붙  임

공 사 비 증 액 개 요

분야	주 요 내 용	증가액 (백만원)
구조체 변경	․ 본관 개축, 동관․북관․과학관 대수선, 연결 코어 등	8,619
	․정보관 안전진단 등급 조정 및 건설공사비 지수 반영 (당초) 면적 1,710㎡, 공사비 2,670천원/㎡(문화시설), 구조 B등급(신축비의 50%) 적용 구조등급별 공사비 산정 : 신축 100%, 구조B등급 50%, 구조C등급 70%, 구조D,E등급 80% (변경) 면적 1,550㎡, 공사비 3,040천원/㎡, 공사비 지수 1.096, 구조 D등급(신축비의 80%) 적용 2015년 대비 2017년 물가상승지수 (’15년 대비 9.6%증가)
	․본관․북관․동관․과학관 안전진단 등급 조정 및 건설공사비 지수 반영 ․아트리움 증축 등
외장	․정보관 외장자재 변경(알미늄 루버 → 테라코타) ․아트리움 유리재질 변경(2중 복층 → 3중 복층) 및 외장재 변경	2,503
설비	․급탕방식 변경( 개별급탕 → 중앙공급 ) (115백만원)	2,681
	․전시실 및 수장고 공조방식 변경( 실별공조 → 중앙공조 ) (732백만원)
	․ESS설비 설치 의무화 적용(2017년부터) (303백만원)
	․소화설비 내진 의무화 적용(2016년부터) (120백만원)
철거	․철거범위 확대 및 방법 변경 등의 사유로 철거비 및 폐기물 처리비 증가 (1,159백만원) (당초) 철거면적 810.8㎡, 단가 61천원/㎡ (변경) 철거면적 3,541㎡, 부재 성상별 철거비 직접산출	1,798
	․폐기물처리량 산출하여 폐기물처리비 산정 (375백만원)
	․석면조사에 따른 철거비 산출 (264백만원)
조경	․조경 부분면적 증가(대지면적의 20% → 35%) (385백만원)	1,325
	․차량 진출입로 변경에 따른 포장구간 확대 및 은행나무 주변 조경 특화시설 등 (940백만원) 주차장 → 조경으로 변경함에 따른 조경부분 증가(평떼식재 등), 일부 조경시설 특화에 따른 시설비 증가
계		16,926