문서번호	역사문화재과-4020
결재일자	2018.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	역사문화재정책팀장	역사문화재과장
이훈영	양지호	03/08 정영준

『서울무형문화재 북촌 교육전시장 작업대 및 의자 제작구매』

계약기간 변경계획

2018. 3.

문 화 본 부

(역사문화재과)

『서울무형문화재 북촌 교육전시장 작업대 및 의자 제작구매』

계약기간 변경계획

서울무형문화재 북촌 교육전시장 작업대 및 의자 제작구매 추진 중 시설운영 업체의 추가 요청사항을 반영하기 위해 과업기간을 연장하고자 함

□ 계약현황

○ 계 약 명 : 서울무형문화재 북촌 교육전시장 작업대 및 의자 제작구매

○ 계약기간 : 2018. 2. 8 ～ 2018. 3. 9

○ 계약금액 : 13,700천원(부가세 포함)

○ 계약업체 : ㈜고성디자인엔지니어링(대표 : 유종길)

□ 계약 변경내용

○ 계약기간 변경

- 당 초 : ‘18. 2. 8 ~ 3. 9

- 변 경 : ‘18. 2. 8 ~ 3. 16

○ 지체상금 부과여부 : 부과하지 않음

○ 변경사유

- 작업대의 프로젝터 스크린과의 적정거리 및 수강생 이동경로를 고려하여 작업대 크기의 조정이 필요하다는 시설 운영업체(㈜예문관)의 추가 요청사항을 반영하기 위해 용역기간 연장 필요

□ 향후일정

○ ‘18. 3. 8         : 계약기간 변경 의뢰(역사문화재과 → 재무과)

○ ‘18. 3.12 ~ 16  : 물품 납품, 검수 및 대가 지급

붙 임 : 합의각서 양식 1부.  끝.