보 고 서
			담당	팀장	도로환경처장	도로관리본부장
문서번호	도로환경처-1976
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2018.03.14.
공개여부	공개
제 목	설계변경(정산) 보고

1. 용 역 현 황

가. 용 역 명 : 2017/2018년 자동차전용도로 제설작업용역

나. 용역기간 : 2017. 11. 16 ~ 2018. 3. 15

다. 용 역 비 : 805,135,200원

라. 도 급 자 : 파크중기(주) 대표 신완섭

2. 보 고 내 용

상기 용역 설계변경(정산,최종)에 대한 시행 보고임.

가. 설계변경 사유

1) 제설대책 비상근무 일수 변경에 따른 공종별 증감 물량 반영

○ 당초: 제설근무 22일(보강11, 강설11) → 변경: 35일(보강19, 강설16)

○ 주요공종 물량 증감

공 종	단위	당 초	변 경	증․감
제설작업원(야간)	hr	3,520	2,509	감) 1,011
제설작업운전원(2.5톤,4.5톤,야간)	hr	1,496	2,295	증) 799
제설장비 상시대기(2.5톤)	일	1,650	1,815	증) 165
제설작업(2.5톤덤프)	hr	1,320	1,986	증) 666
제설작업(4.5톤덤프)	hr	176	267	증) 91

공 종	단위	당 초	변 경	증․감
제설작업운전원(15톤덤프,굴삭기,야간)	hr	1,584	2,303	증) 719
제설장비 상시대기(15톤덤프)	일	1,210	1,342	증) 132
제설작업(15톤덤프)	hr	968	1,477	증) 509
제설장비 상시대기(굴삭기0.6㎥)	일	77	149	증) 72

나. 용역비 변경내용

○ 총 괄                                                   (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
총 용 역 비		805,135,200	844,650,000	증) 39,514,800
용역비	공급가액	731,941,091	767,863,637	증) 35,922,546
	부가가치세	73,194,109	76,786,363	증) 3,592,254
	계	805,135,200	844,650,000	증) 39,514,800

3. 조치의견

상기와 같이 설계변경(정산)하여 총무처에 변경계약 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 설계변경(정산) 내역서 1부.  끝.