문서번호	시설과-1236
결재일자	2018.3.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
이강호	오임석	심상원	03/08 代심상원
협 조
	주무관		배진수

「동물·조류 격리치료사 설치공사」

준공정산 설계변경 보고

2018. 3.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『  동물 · 조류 격리치료사  설치공사』

준공정산 설계변경 보고

「동물·조류 격리치료사 설치공사」와 관련 실 시공물량 정산 및 설계변경 대공원 위원회 자문회의 결과 등을 반영하여 준공정산 설계변경코자 함

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 서울대공원 동물·조류 격리치료사 설치공사

공사기간 : 2017.09.08.~2018.03.15.

계약금액 : 1,184,040,000원

시 공 사 : ㈜성림이엔씨 대표 윤 란 순

공사내용

○ 건측물 (연면적 211㎡) 개축 및 리모델링 공사, 외부방사장 748㎡ 신설

○ 도로신설 및 조경석 쌓기

○ 외부 우수관 및 오수관 설치

○ 외부휀스 설치 등

Ⅱ		설계변경 검토내용

관련문서 및 관련근거

○ 제 10차 설계변경 대공원 위원회 자문회의 개최(‘17. 12. 14.(목) 14:00))

○ 제1차 설계변경(시설과-8207호 ‘17.12.19)

주요 변경내용

단위 : (천원)

구 분	변경 내용	사 유	예산사항
토공 및 지정공사	∘ 터파기/기계(리핑암 철거)	∘ 심의위원회 의견 반영	감 4,198

구 분	보고내용	사 유	예산사항
철근콘크리트 공사	∘ 레미콘(25-24-15)물량 감	∘ 시공물량 정산	감 2,868
	∘ 외부 거푸집 설치 및 해체 물량 증	∘ 〃	증 2,796
철골공사	∘ 방사장 등 철골설치 물량 감	∘ 〃	감 3,100
돌공사	∘ 토전벽돌 붙임 물량 감	∘ 심의위원회 의견 반영	감 3,638
도장공사	∘ 유성페인트 물량 감	∘ 시공물량 정산	감 884
기타공사	∘ 메쉬휀스(외부 울타리) 물량 증	∘ 〃	증 9,422
조경공사	∘ 조경석 쌓기 노무비 단가 조정	∘ 심의위원회 의견 반영	감 8,235
작업부산물	∘ 작업부산물 물량 증	∘ 〃	감 1,405
계			감 12,110
도급금액			감 12,110

Ⅲ		설계변경 사항

변경 내역

구분	계 약	제1차 설계변경	준공정산 설계변경	비고
도급금액	952,875,900	1,184,040,000	1,171,930,000	감 12,110,000
공사기간	‘17.09.15~12.20	‘17.9.15~’18.3.15	‘17.9.15~’18.3.15	-

Ⅳ		처리의견

위와 같이 준공정산 설계변경 시행하고 준공처리 코자 함

붙임 : 1. 준공정산 설계변경 내역서.  끝.