투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	「보라매공원 다목적운동장 노후 운동시설 개선공사」 설계변경(정산) 시행 및 계약 의뢰

『보라매공원 다목적운동장 노후 운동시설 개선공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 보라매공원 다목적운동장 노후 운동시설 개선공사

2. 공사기간 : 2.20 ~ 4.5

3. 총공사비 : 31,840,370원

4. 도 급 자 : 대한종합조경㈜ 대표 허갑환

5. 설계변경사유 : 민원요구사항에 따른 신규공종발생, 보험료 정산

6. 공사비 변경내역

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		31,840,370	33,667,000	1,826,630
도급비	공 급 가 액	28,945,791	30,606,364	1,660,573
	부가가치세	2,894,579	3,6060,636	166,057
	계	31,840,370	33,667,000	1,826,630

7. 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상

및 도시녹화지원, 공원녹지관리 수준향상, 공원관리 및

도시녹화지원,  보라매공원 시설물 정비, 시설비및부대비,

시설비

붙임 : 1. 변경설계서 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부.

3. 검토보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	최지효		공원조성팀장	송복식		시설과장	03/05 진병규
협조자	경리팀장	곽선아
시행	시설과-429	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02-2181-1165	/전송	02-2181-1169	/	charity3@seoul.go.kr	/	대시민공개