문서번호	보육여성과-8135		주무관			보육행정팀장			보육여성과장	복지환경국장
결재일자	2018.3.20.		김현종			유희남			김성복	03/20 최성연
공개여부	부분공개(5)
방침번호
			협조
방침번호

육아종합지원센터 기능보강 공사 계약변경(기한연장) 계획

추진근거

연꽃 어린이집 및 육아종합지원센터 기능보강 계획 [보육여성과-23028(2017.08.30.)호]

육아종합지원센터 기능보강 공사 발주 [보육여성과-1712(2017.12.06.)호]

추진계획

공사개요

- 공사기간 : 2018. 1. 15 ~ 3. 23 (68일)

- 공사대상 : 센터 본청 2개소 및 산하기관 3개소

- 공사내용 : 센터 본청 바닥교체, 사무실 이전 및 산하기관 상담실 추가 등 리모델링

계약변경

- 변경사유 : 사당센터 조명공사 제외, 몰딩 교체 등 설계변경 및 공사기간 부족

- 변경내용 : 공사기한 연장 [2018. 3. 23 ⇒ 4. 20일까지 (28일 연장)]

계약금액 : 123,540천원 [구비 (시설비) / 2017. 사고이월 사업]

복지환경국

보육여성과

해당항목에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검 토 항 목	검 토 여 부															협조사항
추진근거	■	법 령				□		방 침				□	별도규정 없음
	(영유아보육법 제36조 같은법 시행령 제24조)
사업추진 유형	□		신규사업							■	기존사업
	□		일회성사업							□	계속사업 ( 년)
예산확보 사항	□		신규 확보 필요							■	확보 완료					예 산 팀 협 조 ( )
	[사고이월 구비 300백만원(특교금)]
	□		비예산 사업
이해관계인 유무	○		주 민	:	유		□		( )					무	■	동주민센터 협 조 ( )
	○		단 체	:	유		□		( )					무	■
주민 의견수렴	○		의견수렴	:	유		□		( )					무	■
타자원 활용가능성	○		중앙부처	:	유		□		( )					무	■
	○		서 울 시	:	유		□		( )					무	■
	○		민간단체	:	유		□		( )					무	■
	○		기 업 체	:	유		□		( )					무	■
홍보 필요성	○		홍보대상	:	유		□		( )					무	■	홍보물심사 협 조 ( )
	▪		사업 단계별 홍보 필요성 : 계획 □ , 경과․수시 □ , 완료 □
	○		보도자료	:	유		□							무	■

육아종합지원센터 기능보강 공사 계약변경(기한연장) 계획

2017년도 사고이월 사업인 “육아종합지원센터 기능보강 공사” 시행중 센터 산하기관과 공사일정 조율 등으로 인한 마감공사 연장 및 사당센터 조명공사 제외, 몰딩 교체 등 일부 설계변경 필요 사항을 고려 공사기한 연장을 통해 보다 내실있는 영유아 보육 공간을 구성하고자 함.

Ⅰ		추진근거 및 공사개요

추진근거

연꽃 어린이집 및 육아종합지원센터 기능보강 계획 [보육여성과-23028(2017.08.30.)호]

육아종합지원센터 기능보강 공사 발주 [보육여성과-1712(2017.12.06.)호]

공사개요

추진배경 : 보육청 사업 추진 등으로 업무량이 증대된 육아종합지원센터 내부

및 산하 영유아돌보미센터, 아동발달상담실 등 노후 시설 개보수

공사대상 : 육아종합지원센터, 창의놀이터, 사당 및 신대방 영유아돌보미센터,

영유아아동발달상담실 (총 5개소)

위치/규모

구 분		구 성	면적	주 소
육아종합 지원센터	3층	센터장실, 사무실, 상담실, 세미나실, 정보자료실	368.50㎡	대방동 385-2 (※ 1,2층은 구립 꿈나무어린이집 사용)
	4층	창의놀이터(창의력교실,육아카페,모유 수유실,자연학습공간)	287.74㎡
	5층	강당	287.74㎡
아동발달상담실		본동10-23 / 노량진1동 현장민원실, 51.86㎡
영유아돌보미센터		∙ 신대방 : 신대방1동 607-115 / 지상2층, 132㎡ ∙ 사 당 : 사당1동 1044-22 / 사당노인종합복지관 3층, 145.5㎡

공사기간 : 2018. 1. 15 ~ 3. 23. (68일)

계약업체 : 이유종합건설(주) (대표 : 유병수)

계약금액 : 123,539,830원

예산과목 : 아이낳고 키우기 좋은 환경 조성, 보육시설 확충, 국공립어린이집 확충,

시설비 및 부대비, 시설비 (사고이월)

Ⅱ		계약변경 계획

변경내용 : 공사기한 연장

구분	당 초	변 경
준공기한	2018. 1. 15. ∼ 2018. 3. 23. (68일)	2018. 1. 15. ∼ 2018. 4. 20. (96일)

현 공정율 : 약 75%

변경사유

공사대상 시설이 5개소로 분산, 공사인력 등 투입일정 조율이 어려워 착수지연

∙ 시설별 실제 착수일자

- 사당 센터 : 2018. 2. 5(월)

- 신대방센터 : 2018. 2. 26(월)

- 창의놀이터 : 2018. 2. 11(일)

육아종합지원센터 본청 및 사당센터 등 산하기관 설계변경 추진

∙ 육아종합지원센터 : 사무실내 씽크대 상부장 설치, 센터장실 도배 추가 등

∙ 창의놀이터 : 매트 설치 규격 일부 변경 등

∙ 사당 센터 : 등기구 교체 제외 및 바닥 몰딩 교체 변경 등

∙ 신대방센터 : 교체 가구 변경 및 문짝 교체 추가 등

∙ 아동발달상담실 : 대기공간 쇼파 교체 변경 등

Ⅲ		행 정 사 항

계약변경 : 재무과 협의 추진

설계변경 : 시공사 설계변경(안) 협의 후 계약금액 조정 등 별도 계획수립 추진.

끝.