문서번호	보육여성과-8167		주무관			보육행정팀장			보육여성과장	복지환경국장
결재일자	2018.3.20.		김현종			유희남			김성복	03/20 최성연
공개여부	부분공개(5)
방침번호
			협조
방침번호
				흑석사업팀장				김종민
				건축시설팀장				배장우

재개발 사업 관련 안정적인 보육 서비스 제공을 위한

흑석3구역내 흑석어린이집 이전 TF팀 구성계획

추진배경 : 흑석3구역 조합의 흑석어린이집 이전에 따른 임시보육시설

미확보에 따른 부서간 긴밀한 업무 협조

추진기간 : 2018. 3월 ∼ 2019. 5월

대상부서 : 3개 부서 및 흑석3주택재개발조합

구성현황 : 복지환경국장, 보육여성과장, 보육행정팀장,

흑석사업팀장(도시개발과), 건축시설팀장(건축과),

흑석3주택재개발조합장

사업내용 : 구립 흑석 어린이집의 성공적인 이전 및 임시보육시설의 원활한

운영을 통해 학부모, 영유아에 대한 안정적 보육 서비스 제공

복지환경국

보육여성과

해당항목에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검 토 항 목	검 토 여 부															협조사항
추진근거	□	법 령				■		방 침				□	별도규정 없음
	(2018. 1. 29, 월요간부회의)
사업추진 유형	□		신규사업							■	기존사업
	□		일회성사업							■	계속사업 (1년)
예산확보 사항	□		신규 확보 필요							□	확보 완료					예 산 팀 협 조 ( )
	■		비예산 사업
이해관계인 유무	○		주 민	:	유		□		( )					무	■	동주민센터 협 조 ( )
	○		단 체	:	유		□		( )					무	■
주민 의견수렴	○		의견수렴	:	유		□		( )					무	■
타자원 활용가능성	○		중앙부처	:	유		□		( )					무	■
	○		서 울 시	:	유		□		( )					무	■
	○		민간단체	:	유		□		( )					무	■
	○		기 업 체	:	유		□		( )					무	■
홍보 필요성	○		홍보대상	:	유		□		( )					무	■	홍보물심사 협 조 ( )
	▪		사업 단계별 홍보 필요성 : 계획 □ , 경과․수시 □ , 완료 □
	○		보도자료	:	유		□							무	■

재개발 사업 관련 안정적인 보육 서비스 제공을 위한

흑석3구역내 흑석어린이집 이전 TF팀 구성계획

흑석3구역 재개발로 인한 흑석어린이집 이전 관련 TF팀(Task Force팀, 프로젝트팀)을 구성하여 흑석7구역 도레미 어린이집의 적기 준공 및 원활한 임시보육시설 확보를 추진, 학부모에게 안정적인 영유아 보육 서비스를 제공할 수 있도록 어린이집 이전 업무에 전문성을 강화하고자 함.

Ⅰ		구 성 개 요

추진기간 : 2018. 3월 ∼ 2019. 5월

대상부서 : 3개 부서 및 흑석3주택재개발조합

구성현황 : 복지환경국장, 보육여성과장, 보육행정팀장, 흑석사업팀장(도시개발과),

건축시설팀장(건축과), 흑석3주택재개발조합장

사업내용 : 구립 흑석 어린이집의 성공적인 이전 및 임시보육시설의 원활한 운영을

통해 학부모, 영유아에 대한 안정적 보육 서비스 제공

Ⅱ		흑석 어린이집 이전 TF팀 구성

조직체계

				복지환경국장
				보육여성과장
흑석어린이집 이전 및 도레미어린이집 신축			도레미어린이집 신축 설계 및 공사				흑석3구역 조합 관리 및 감독 등			흑석3구역 정비 및 흑석어린이집 이전
보육여성과 보육행정팀			건 축 과 건축시설팀				도시개발과 흑석사업팀			흑석3구역 재개발조합

부서 · 민간 추진역할

역할 구분	참여 부서 · 민간	주 요 추 진 사 항
총 괄	보육여성과	-도레미어린이집 신축(흑석7구역 기부채납 부지) 및 경계 측량 등, 흑석어린이집 이전 및 학부모 민원처리 -흑석3구역 조합과 업무 협의 등 -흑석7‧8구역 의무보육시설 국공립 전환 등
협 력	건축과	-도레미어린이집 신축 관련 설계 및 공사
	도시개발과	-흑석어린이집 이전 관련 흑석3구역 정비사업 관리‧감독, -흑석3‧7‧8구역 조합과 업무 협의
	흑석3구역조합	-흑석어린이집 이전 및 임시보육시설 설치 등 지원

Ⅲ		그간 추진사항

흑석7구역 도레미어린이집 신축시 임시보육시설 이용계획 수립 : 2017. 6월

흑석어린이집 정원 조정 (131명 ⇒ 111명) : 2017. 12월

흑석어린이집 이전 관련 임시보육시설에 대해 조합 협의 : 2018. 1월

흑석3구역 조합 사무실 / 보육여성과(과장․팀장․담당), 조합장 및 총무이사

흑석어린이집 학부모 제1차 간담회 개최 : 2018. 1월

흑석어린이집(유희실) / 구청장, 보육여성과장, 흑석사업팀장, 학부모, 조합장 등

흑석7‧8구역 조합 의무보육시설 사용 협의 : 2018. 1월 ~ 2월

각 조합 사무실 / 보육여성과장, 흑석사업팀장, 조합장 등

흑석어린이집 학부모 제2차 간담회 : 2018. 2월

흑석어린이집(유희실) / 보육여성과장, 학부모, 조합 총무이사 등

도레미 어린이집(흑석7) 설계 관련 건축과 업무 협의 : 2018. 2월

보육여성과(팀장․담당자), 건축과(담당자), 설계사무실(소장 등)

흑석어린이집 이전 및 도레미어린이집 신축 대책 회의 : 2018. 3. 5.

복지환경국장실 / 국장, 보육여성과장, 흑석사업팀장, 조합장 등

Ⅳ		흑석 어린이집 이전 대책

국공립 도레미 어린이집 신축 이전 [기본 원칙]

위    치 : 흑석로 13길25(흑석동 173-52, 726.2㎡)

규    모 : 지하1층/지상3층, 연면적 856㎡, 약 정원 114명

내    용 : 원장실, 교사실, 보육실, 화장실, 유희실, 식당, 창고, 주차장 등

공 사 비 : 2,705백만원(시비 2,500, 구비 205)

흑석7,8구역내 의무보육시설 임대 [보조 대안]

추진개요 : 도레미 어린이집 미준공 및 흑석3구역내 흑석어린이집 조기 이전이

불가피할 경우 임대 사용 (도레미 어린이집 준공시까지)

추가사업 : 흑석7․8구역내 의무보육시설 국공립 전환 (보육여성과)

Ⅴ		향 후 계 획

도레미(흑석7) 어린이집 신축 및 인접 점유지 정비(측량) : 3월 중

도레미 어린이집 신축 설계 완료 : 4월말

도레미 어린이집 신축 공사 발주 : 5월중

도레미 어린이집 공사 착공 및 준공 : 2018. 6월 ~ 2019. 5월

흑석3구역 재개발 착공시 분진‧소음 등에 대한 대책수립 : 2018. 11월

흑석 어린이집 이전 조치 : 2019. 5월(준공 후, 예정)

Ⅵ		행 정 사 항

부서․조합간 업무 협의사항 발생 시 정보공유 및 수시 TF팀 회의개최

흑석7‧8구역 조합 3‧4월 총회결과에 따른 의무보육시설 이용여부 협의

※ 적정시기에 흑석7‧8구역 조합과 의무보육시설 국공립 전환 동시 추진