문서번호	건축부-4056
결재일자	2018.3.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	문화시설과장	건축부장
이진영	윤용훈	03/26 임인구

『북한산성 대성문 해체·보수공사』

전문가 자문회의(4차) 개최계획

2018. 3.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『북한산성 대성문 해체·보수공사』

전문가 자문회의(4차) 개최 계획

『북한산성 대성문 해체·보수공사』관련 제4차 문화재 전문가 자문회의 개최 계획에 대한 검토 보고

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 성북구 정릉동 북한산성 대성문(사적 제162호)

○ 공사내용(해체·보수 범위)

- 문  루 : 바닥면적 35.24㎡, 높이 5.7m

- 육축부 : 높이 5.5m, 폭 12m, 너비 8m

○ 사업기간 : 2016.01. ~ 2018.09.

- 설 계 : 2016.05. ~ 2016.12.

- 공 사 : 2017.05. ~ 2018.08.

○ 총사업비 : 1,329백만원(공사비 1,246 / 설계비 53 / 감리비 30)

○ 시공/감리 : 원택건설㈜ / ㈜경복영건

○ 현장사진

현장전경	육축부 내·외부(계단) 공사

Ⅱ		추진경위

○ 2017.05. : 공사착공

○ 2017.06. : 헬기운항 허가(서울지방항공청) 및 가설자재 운반

○ 2017.07. : 가설휀스, 우회 등산로 설치

○ 2017.08. : 기와 해체, 1차 자문회의 실시

○ 2017.09. : 문루 해체, 2차 자문회의 실시

○ 2017.11. : 육축 해체, 3차 자문회의 실시

○ 2018.03. : 육축 재설치 완료, 계단 및 성문 진입로 정비공사 중

- 목부재 치목 및 훈증 등 문루공사 준비 중

Ⅲ		자문회의 개최계획

○ 일    시 : 2018.03.27.(화) 15:00~

○ 장    소 : 대성문 해체‧보수 공사 현장

○ 방    법 : 자문위원 현장 방문하여 검토 및 자문

○ 자문위원(3명)

연 번	성 명	분 야	소 속	비 고
1	*****	건 축 사	문화재 위원
2	*****	고 고 학	문화재 전문위원
3	*****	건 축 사	문화재 위원

○ 안    건

- 홍예석과 측벽석 틈새 마감처리 관련

- 표면풍화에 따른 일부석재 표면박리, 탈락된 석재 보존처리 여부

- 성문 내·외부 진입로 마감 처리방안 및 회곽로 배수처리 관련

- 고막이석 통풍구 설치 방안 등

Ⅳ		향후계획

○ 자문위원 검토 결과를 향후 공사추진 및 변경사항 등에 반영하고        ○ 사업의뢰부서(한양도성도감과)에는 관련 업무에 참고토록 통보

Ⅴ		행정사항

○ 외부전문가 자문수당

- 소요예산 : *********************

- 지급방법 : 개인별 은행개좌로 입금

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감과, 한양도성 보존·관리 활용, 한양도성 보존·정비, 시설부대비(401-03)

붙임 : 1) 자문위원 검토의견서 1부

2) 자문위원 참석명부 1부

3) 제4차 자문회의 안건(상세자료) 1부.  끝.