기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 709 호
구 분 도로(교량,터널),지하철,하천,건축,조경,설비(전기),도시계획,교통,소방,디자인 등으로 분야 표시	교 통

건 명	2018년 교통사고 잦은 곳 개선사업 실시설계용역

요청기관명	도시교통본부 교통운영과
제출년월일	2018년 3월 27일

기술용역사업계획

용역개요	○ 용 역 명 : 2018년 교통사고 잦은 곳 개선사업 실시설계용역 ○ 용 역 비 : 83,534천원 ○ 용역기간 : 착수일로부터 ‘19.3.29까지 ○ 사업규모 - 교통사고 잦은 곳 : 14개소 - 특별교통안전진단 지점 : 3개소 - 고물상주변 횡단보도 : 5개소 ○ 입찰참가자격 - 엔지니어링산업진흥법 제21조에 따라 건설부분 중 전문분야(교통, 도로·공항, 도시계획)에 신고한 엔지니어링 사업자 또는 기술사법 제6조 규정에 의한 기술사사무소 개설 등록(동분야)한 업체로서 교통기술사를 보유한 업체이어야 하며, - 현재 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체
자체시행 가능여부	○ 용역시행 목적 - 본 과업은 교통사고가 일정수준 이상(최근 3년간 교통사고 인명피해 건수 평균 상위지점) 발생하는 교통안전 취약지점을 대상으로, 교통공학적 기법을 통하여 사고원인 분석, 개선안을 도출하여 도로구조, 교통안전시설, 교통운영체계 등을 개선하는 등 교통사고 잦은 곳 등을 개선하고 교통소통을 원활히 하여 시민의 재산과 생명을 보호하는데 그 목적이 있음. ○ 추진근거 - 교통운영과-1024(2018.1.16)호
	○ 자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, ■ 미포함) - 자체시행대상임에도 외부용역으로 발주하는 사유 : 해당없음
	○ 투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 : 해당없음 ○ 용역추진경위 - 2018. 2 : 2018년 교통안전사업 추진계획 수립 - 2018. 3 : 교통사고 잦은 곳 등 개선지점 조사 및 선정
과업내용 (요약)	○ 과업의 기본방향 - 교통사고 잦은 곳 등 대상지점에 대하여 교통공학 기법을 적용 도로구조, 교통안전시설, 교통운영체계 개선 등 기본계획 검토 및 실시설계를 수행하여 교통소통과 시민의 생명과 재산 보호 ○ 과업의 범위 - 교통사고 잦은 곳 등 사고원인 분석 및 개선방안 도출 - 기본개선계획 검토 및 실시설계 시행

사업추진계획 (절차)	○ 기술용역 심의 : 2018. 3 ○ 기술용역 실시 : 2018. 4 ~ 2019. 3 ○ 공사 시행 : 2019. 4 ~ 2019. 12
유사용역 자료활용계획(최근5년 이내)	○ 용 역 명 - 2017년 교통사고 잦은 곳 개선 실시설계용역 ※ 과업대상의 성격 및 현장 여건이 달라 성과품 활용이 어려움
리스크관리심사항목	○ 용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부 - 용역추진 관련 이해당사자의 반대 등 민원이 발생될 소지가 있는지 : 본 용역은 교통사고 잦은 지점에 대한 교통사고 예방을 위한 시설개선을 목적으로 하는 사업으로 반대 민원발생 소지가 거의 없음 - 용역수행중 민원이 발생되어 용역추진에 차질이 생길 경우 대책은 : 교통사고 사전예방과 시민의 생명 보호 등 교통안전을 위한 사업임을 설명하여 이해 설득 - 용역수행과정에서 외부기관의 인․허가 또는 심의를 득하는데 지장이 없는지 : 서울지방경찰청 교통안전시설 심의 예정 ○ 용역비용 및 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 : 해당없음 ○ 기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안 : 해당없음
사업의 예상효과	○ 교통사고 다발지점에 대한 교통안전시설 등을 개선하여 교통사고 예방 및 시민의 생명과 재산 보호

【붙임 서류 】

1. 용역시행 방침서 1부

2. 용역 대가 산출근거 1부