2018년 노후 하수관로 조사, 기본 및 실시설계 용역(1~4구역)

과 업 내 용 서

2018. 3.

물재생계획과

목         차

1.0 일반사항	1

1.1 과업의 명칭	1

1.2 과업의 목적	1

1.3 과업의 개요	1

1.4 주요업무의 사전승인	2

1.5 과업수행 및 공정보고	2

1.6 용역감독 등	5

1.7 계약상대자의 책임	5

1.8 자료요구·질의 등	6

1.9 관계기관 협의 및 인 ․ 허가	6

1.10 설계 자문	7

1.11 설계의 경제성(VE) 검토	7

1.12 건설기술심의위원회 심의 등	7

1.13 신기술․신공법의 도입 등	8

1.14 타 계약상대자와의 업무한계	8

1.15 보안 및 비밀유지	8

1.16 하도급 사항	8

1.17 과업내용 변경	9

1.18 용역수행자의 교체	10

1.19 용어의 해석	10

1.20 설계 등 손해배상	10

1.21 계약상대자의 시정요청	11

1.22 용역 성과품의 품질관리	11

1.23 발주기관의 제공자료	11

1.24 적용기준 및 참고자료	12

1.25 준수사항	13

2.0 기본 방향	17

2.1 일반사항	17

2.2 하수관로 조사	17

2.3 하수관로 평가	18

2.4 기본 및 실시설계	18

2.5 현지답사	18

2.6 골재원과 사토장에 대한 조사	18

3.0 하수관로 조사	19

3.1 일반사항	19

3.2 하수관로 조사	21

3.2.1 관로내부조사(육안조사, CCTV)	21

3.2.2 내시경 검사	22

3.2.3 GPR탐사	22

3.2.4 관로조사시 고려되어야 할 사항	23

3.2.5 측량 조사	23

3.2.6 지반 조사	24

3.2.7 맨홀조사	26

3.2.8 조사결과의 제출	26

4.0 하수관로 평가	27

4.1 일반사항	27

4.2 노후관로 평가	27

4.2.1 평가항목 선정	27

4.2.2 평가기준의 설정 및 노후도 평가	27

4.3 불량관로 평가	28

4.3.1 평가를 위한 판단기준 선정	28

4.3.2 불량관로 판단기준 종류	28

4.4 조사결과 판독 및 보고서 작성	28

4.5 우선순위	29

5.0 기본 및 실시설계	30

5.1 일반사항	30

5.2 자료수집 및 관련 계획 검토	30

5.2.1 기본방침	30

5.2.2 관련계획 자료조사	31

5.3 현장조사	31

5.3.1 일반사항	31

5.3.2 지장물 조사	31

5.3.3 동일 또는 유사 공종의 건설공사 사후평가 조사 및 피드백	32

5.3.4 위험공종 목록화하여 안전사고 예방	32

5.4 기본 설계	33

5.4.1 기본설계 일반사항	33

5.4.2 설계기준 검토 및 설정	33

5.5 실시설계	33

5.5.1 실시설계 일반사항	33

5.5.2 하수관로의 개량 계획	34

5.5.3 관종 계획	35

5.5.4 관로의 접합	35

5.5.5 관기초 계획	36

5.5.6 맨홀 계획	36

5.5.7 구조물 및 부대시설 계획	36

5.5.8 가시설 설계	36

5.5.9 계측 계획	37

5.5.10 포장 및 보도설계	37

5.5.11 교통처리 계획	38

5.5.12 기 타	39

5.6 재정계획 및 사업 추진 계획	40

5.7 유지관리 및 자산관리 방안	40

5.7.1 유지관리	40

5.7.2 자산관리	42

5.8 사업의 효과분석 실시	42

6.0 성과품작성 및 납품	43

6.1 일반사항	43

6.2 성과품 납품시기	43

6.3 성과품의 구성 및 내용	43

6.4 납품	48

1.0 일반사항

1.1 과업의 명칭

본 과업의 명칭은『2018년 노후 하수관로 조사, 기본 및 실시설계 용역(1~4구역)』이라 하며 서울시 물재생계획과를 ‘발주기관’이라 하고 용역사를 ‘계약상대자’라 한다.

1.2 과업의 목적

최근 도로함몰 현상이 커다란 사회문제로 대두함에 따라 도로를 이용하는 시민의 불안감이 가중되고 있다. 이에 서울시 전역의 하수관로 상태에 대한 명확한 진단과 기본 및 실시설계를 시행함으로써 시민이 안전한 하수도 구축을 목적으로 한다.

1.3 과업의 개요

1) 과업의 범위

- 공간적 범위

․ 1구역 : 종로구, 성동구, 동대문구, 성북구, 강북구, 도봉구, 강남구

․ 2구역 : 은평구, 서대문구, 마포구, 양천구, 강서구, 영등포구, 동작구

․ 3구역 : 중구, 용산구, 구로구, 금천구, 관악구, 서초구

․ 4구역 : 광진구, 중랑구, 노원구, 송파구, 강동구

- 시간적 범위 : 2018년도

- 내용적 범위

․ 기 수행한 1차~3차 사업의 결과 분석

․ 하수관로 상태 조사(노후/불량 관로)

․ 하수관로(노후/불량) 정비계획(대상관로 및 우선순위 설정 등), 기본 및 실시설계

․ 관련 인허가

2) 과업의 내용

- 실태조사 및 설계

구분	합계	1구역	2구역	3구역	4구역
CCTV조사(㎞,주간)	358	96	95	85	82
CCTV조사(㎞,야간)	4	1	1	1	1
육안조사(㎞)	8	2	2	2	2
내시경조사(개소)	4	1	1	1	1
시추조사(개소)	4	1	1	1	1
노선측량(㎞)	79	18	16	21	24
기본및실시설계(㎞)	99	23	21	27	28

- 하수도관리전산시스템 보완

․현황조사 결과 하수도 전산시스템 탑재가능한 자료 작성

※ 조사 물량은 개략 물량으로써 조사 착수 전 현장 등을 파악하여 용역감독 확인 후 착수토록 하며, 물량증감분은 추후 정산토록 한다.

3) 과업기간

(1) 본 과업기간은 착수일로부터 10개월로 한다.

(2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 계획된 기간 내에 완료하여야 한다. 다만, 다음과 같은 사유로 과업기간을 변경할 필요성이 있을 경우에는 발주기관의 승인을 득하여야 한다.

① 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

② 발주기관의 계획변경에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

③ 당초 과업수행에서 예기치 못한 사항의 발생으로 변경이 불가피하게 될 때

④ 기타 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생 되었을 때

4) 위치도 : 하수관로 조사대상 위치도(별첨)

1.4 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

2) 주요 설계 내용 및 방침의 설정 또는 변경

3) 관계기관과의 협의사항

4) 용역 수행자의 교체

5) 설계기준의 설정 또는 변경

6) 하도급 사항

7) 공공측량 및 현장조사, 지반조사 계획

8) 기타 발주기관의 주관부서 업무담당자(이하 “용역감독자” 이라한다) 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

1.5 과업수행 및 공정보고

1) 과업수행방법

(1) 계약상대자는 과업내용서와 관계법령 및 제규정 등에 따라 발주기관의 지휘감독을 받아본 과업을 성실히 이행하여야 한다.

(2) 용역수행처리절차는 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 사전협의하여 처리함으로써 내실 있는 과업수행이 되도록 하여야 한다.

(3) 공정계획에 의한 과업수행 중 중요 결정사항 등은 수시로 협의하여 공정추진에 지장이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2) 착수신고서 제출

계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 기술용역을 착수하여야 하며 착수시 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

(1) 착수신고서

① 착수보고서(「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제2016-101호)」 별지 제1호 서식)

② 기술용역 예정공정표

③ 사업책임기술자 선임계(이력서, 기술자격증 사본 첨부)와 필요한 경우 분야별 책임기술자의 선임계 포함

④ 내역서

⑤ 건설기술용역 실적관리 시스템의 정보입력 결과(舊 위탁관리기관의 계약현황 필증)

(2) 분야별 참여기술자 투입 및 작업 계획서

(3) 용역수행에 필요한 다음 서류

① 내국 기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서

② 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

(4) 계약상대자는 건설기술진흥법 제30조에 따라 건설기술용역 실적관리 시스템에 해당 용역의 정보를 입력한다. 그리고 동법 시행규칙 제23조(별지25호 서식)에 의거 설계 등 용역업자의 현황통보 및 관리를 위한 자료(전산파일)를 발주기관에 제출한다.

(5) 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

3) 과업수행계획서 제출

과업수행계획서는 착수일로부터 10일 이내에 과업의 특성 및 현장 여건을 감안한 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할협의서 첨부)를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

(1) 세부공정계획서(분야별 세부공정계획 및 업무 흐름도 포함)

(2) 설계자 선정을 위한 사업수행능력평가시 작성하여 제출한 참여건설기술자의 투입계획

(3) 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업계획서

(4) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

(5) 과업수행조직 및 인력(장비) 투입계획서

(6) 건설기술 경력사항 확인서

(7) 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

(8) 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

4) 사전검토서 제출

착수신고서 제출 이후 7일 이내

5) 업무협의 및 공정보고

(1) 보고시기

다음의 경우에는 발주기관에 사전 보고하여 검토를 받아야 한다.

① 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토 시

② 조사 및 자료수집 완료 시

③ 월간 정기 공정보고 시

④ 각 분기별 보고 시

⑤ 자문회의 시

⑥ 성과품 작성 시(또는 준공 시)

⑦ 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

(2) 월간 정기 공정보고

계약상대자는 과업수행 기간중 다음 사항을 포함한 월간공정보고서를 매월 말일을 기준으로 하여 다음달 5일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

① 과업추진 내용 및 공정 현황

② 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

③ 업무관련 회의 및 발주기관 지시사항 처리결과 (승인사항 포함)

④ 과업수행상 중요 문제점 및 대책

⑤ 다음 달 과업수행 계획

(3) 중간보고

계약상대자는 발주기관의 요구가 있거나 다음 각각의 경우 관련자료를 제출하고 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 발주기관의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)을 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

① 주요 단계별 과업이 종료 되었을 때

② 분기 1회 이상의 중간보고시

③ 주요계획 및 방침의 설정과 변경시

(4) 조사계획보고

계약상대자는 아래 사항이 포함된 주간 조사계획서를 발주기관에 제출한다.

① 조사계획 관로 및 조사진행사항

② 하수관로 조사 중 발생가능한 문제점 및 대응방안(자치구 협조사항 포함)

③ 자치구 요청사항 및 반영계획

(5) 작업일지 작성

계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제출하여야 하며 작업일지 양식은 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제2016-101호)」에 따른다.

6) 기술자문 등 검토

(1) 계약상대자는 발주기관의 요구가 있을 경우 각종 검토회의 등을 통하여 기술자문 및 검토를 받아야 한다.

(2) 계약상대자는 발주기관의 요구가 있거나 주요 공정을 선정 또는 완료하기 이전에 관련 자료를 제출하고 담당분야별 책임기술자로 하여금 보고토록 하여야 하며, 지적사항에 대하여는 성실히 보완한 후에 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

7) 참여기술자 투입일수 기록(Time Sheets) 제출

계약상대자는 참여기술자의 투입일수에 대한 개인별기록을 월간 단위로 작성하여 분기별로 제출하되 분기 시작달의 10일까지 투입기록을 제출하여야 한다.

참여기술자별 투입기록(  월)

성      명 :       인

책임기술자 :       인

월/일	투입시간	휴일(야간) 근무시간	수행업무	비 고
1
.
30

1.6 용역감독 등

1) 용역감독

발주기관은 이 과업을 시행함에 있어 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제2016-101호)」에 따라 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

(1) 기술인력 투입 현황.

(2) 용역 단계별 과업추진 내용 및 공정현황

(3) 공정회의 개최

(4) 기타 확인에 필요한 사항

2) 용역점검

(1) 계약상대자는 발주기관이 설계품질 확인과 용역업무의 적정 수행여부 확인 등을 위해 실시하는 정기점검(2개월 주기)과 수시점검에 성실히 응해야 한다.

(2) 정기점검과 수시점검 시 발주기관으로부터 지적받은 내용 및 요구내용은 과업범위를 벗어나지 않는 한 모두 반영하여야 한다.

1.7 계약상대자의 책임

1) 계약상대자의 책임범위

① 계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 잘못으로발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정 보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정 조치하여야 한다.

② 계약상대자는 과업내용서의 업무 및 계약서에 명시된 계약조건을 성실히 이행하여야 하며,과업과 관련된 중요한 모든 사항은 발주기관의 서면승인을 득한 후 시행하여야 한다.

③ 발주기관으로부터 계획변경 등으로 추가과업을 서면으로 요청받은 경우에는 계약상대자는과업변경에 대한 검토서를 제출하여야 하며, 발주기관으로부터 추가 과업내용 및 비용에 대한 서면승인을 얻은 후 과업을 착수하여야 한다.

2) 문서의 기록비치

계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 안전관리의 의무

(1) 착수 시 안전관리계획서 제출

(2) 계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

4) 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계법률이 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

1.8 자료요구·질의 등

1) 발주기관은 과업수행이 지연되지 않도록 발주기관에서 보유 또는 입수할 수 있는 과업관련 기초자료(정보)를 과업착수 후 빠른 시일내 무상으로 계약상대자에게 제공하여야 하며, 계약상대자는 추가로 관련자료를 발주기관에 요청할 수 있다.

2) 계약상대자는 발주기관에 용역수행과 관련된 질의, 문제 등을 서면으로 제출할 수 있으며, 발주기관은 서면접수 후 7일 이내에 서면으로 회신한다.

1.9 관계기관 협의 및 인 ․ 허가

1) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 다음과 같은 관련부서의 인․허가에 필요한 서류를 작성 제출하여야 한다.

항 목	수 량	관련기관	비 고
가) 측량 및 지반조사 허가 신청서류	1 식	구 청
나) 지하매설물 및 기타 조사에 필요한 부수되는 서류	"	지하매설물 관리기관
다) 하수관로 조사, 공사 중 교통처리에 관한 사항	"	교통운영과, 서울지방경찰청
라) 기타 인허가 신고 및 심의자료	"	-

2) 계약상대자는 과업과 관련하여 관계기관 협의 및 인 ․ 허가에 필요한 자료를 조사 용역 과업공정 진행에 따라 필요한 시기에 작성 제출하여야 하며(인․허가 및 협의 주체는 발주기관)제출된 자료에 대하여는 계약상대자가 책임진다.

3) 계약상대자는 본 과업 중 관련기관과 사전협의 및 설명이 필요한 경우에는 성실히 협조하여야 한다.

1.10 설계 자문

1) 계약상대자는 발주기관으로부터 설계자문의 시기, 내용 등에 대한 계획이 통보되면 설계 자문이 효율적으로 시행될 수 있도록 자료를 제출하여야 한다.

① 과업수행계획 제출시 : 과업수행 방향, 자료수집 및 조사 추진계획, 조사항목별 분석 및 검토방법, 설계서 작성기준 및 구성방향, 전체과업수행 절차 및 절차별 추진방안, 각종 설계기준, 지질조사내용, 측량 및 하수관로 내부조사 방법 등

② 중기단계 (공정60%) : 각종 조사결과 분석, 노후하수관로 선정기준 적정여부, 기본설계 결과, 최적의 노후하수관로 정비방안,  공법 비교안 검토시 세부사항 검토 적정여부, 자문회의 조치결과 등

③ 마무리단계(공정 90%) : 기본 및 실시설계, 관련법규 및 하수관로 정비대상 연장 및 사업비 현황(시설별, 관경별, 공법별), 자문회의 조치결과 등

④ 발주기관은 자문 시기, 자문내용 등 설계자문 계획을 자문시행 10일 전까지 계약상대자에게 통보하여야 하며, 계약상대자는 효율적인 설계자문이 될 수 있도록 발주기관에 자문시행 7일전까지 설계자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 설계자문시 지적사항에 대하여 면밀히 분석․검토하여 발주기관에 조치계획을 보고하며 특별한 사유가 없는 한 반영하여야 한다.

1.11 설계의 경제성(VE) 검토(필요시)

1) 계약상대자는 기본 및 실시설계 단계에서 설계에 대한 설계의 경제성 심의자료를 작성하여 발주기관 사전 검토를 받은 후 실시할 수 있도록 하여야 하며, 설계 VE는 건설기술심의 전 실시한다.

2) 계약상대자는 다음 각 호의 자료를 설계의 경제성 등 검토 실시 최소 10일 전에 검토조직에 제시하고 설계의 경제성 등 검토업무 진행 과정에서 추가로 요구되는 자료가 있을 경우 이에 적극 협력하여야 한다.

① 설계도

② 주요 설계기준

③ 설계도서

④ 사업내역서, 공사비산출서

⑤ 각종계산서

⑥ 기타 필요하다고 인정하여 요구하는 자료

3) 계약상대자는 설계의 경제성 등 검토결과 승인된 VE 제안에 대한 조치계획서를 작성하여 발주기관에 제출하고, 설계내용에 수정․반영 및 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

1.12 건설기술심의위원회 심의 등(필요시)

1) 심의시기

(1) 건설기술심의위원회 설계심의는 기본설계 준공 완료 시점에 받도록 한다.

2) 심의준비

(1) 계약상대자는 발주기관으로부터 설계심의 등에 대한 계획이 통보되면 심의에 필요한 자료를 작성 제출하여야 한다.

3) 심의결과 반영

계약상대자는 심의 시 지적사항에 대하여 면밀히 분석·검토하여 발주기관에 조치계획을 보고하여야 하며 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 한다.

1.13 신기술․신공법의 도입 등

1) 계약상대자는 건설기술진흥법 시행규칙 제40조 따라 신기술과 기존 공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교·분석하여 해당 건설공사에 적용할 수 있는지를 검토해야 한다.(환경 신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영 여부 검토)

2) 계약상대자는 신기술 ․ 신공법 및 특정공법 특정제품 등을 설계에 반영하고자 할 경우에는 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 자문회의시 공개하여 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 설계에 반영하도록 한다.

3) 발주기관은 건설공사의 설계에 신기술을 반영하는 경우에는 그 적정성에 대하여 “건설신기술 활용 심의위원회”심의를 받아야 한다.

1.14 타 계약상대자와의 업무한계

공동도급일 경우에는 계약상대자 상호간에 과업분할 협의서를 작성, 수행하여야 한다.

1.15 보안 및 비밀유지

1) 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야한다.

2) 과업성과품 발간시 유의사항

계약상대자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 발주기관과 협의하여 발간한다.

3) 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 져야 한다.

1.16 하도급 사항

1) 계약상대자는 본 용역과업의 모든 사항에 대하여 발주기관의 사전승인 없이 일부분이라도 타업체에 하도급을 할 수 없다.

(1) 건설기술용역의 하도급 계약과 관련하여 관계법령이나 계약서 등에 특별히 정한 경우를 제외하고는 건설기술용역 하도급 관리지침에 따른다.

(2) 계약상대자는 건설기술진흥법 시행규칙 제31조에 따라 하도급 승인을 받기 위해서는 동법 시행규칙 별지 제32호서식의 하도급 계약승인신청서를 발주기관에 제출하여야 한다.

(3) 발주기관은 건설기술용역 하도급 관리지침에 따라 하도급 계약의 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 그 승인 여부를 계약상대자에게 알려야 한다. 다만, 하도급 적정성 판단에 상당한 시일이 요구되는 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 1회에 한해 통지기간을 연장할 수 있으며, 통지기간을 연장한 경우에는 그 사유와 7일 이내의 통지예정 기한을 정하여 지체없이 계약상대자에게 알려야 한다.

(4) 하도급으로 시행한 당해 설계 성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

2) 계약상대자는 하도급에 대하여 발주기관의 사전 승인을 받은 후 하도급 계약을 체결하고 계약 체결일로부터 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주기관에 통지하고 관리를 받아야 한다.

(1) 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

(2) 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

(3) 하도급 기간 및 하도급 금액 등

3) 용역감독자는 다음에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 즉시 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

(1) 하도급에 관한 승인사항을 위반하거나 일괄 하도급하는 경우

(2) 하도급대금 지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생하는 경우

4) 계약상대자는 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

(1) 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

(2) 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자

5) 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다. (하도급거래 공정화에 관한 법률 제6조 및 제13조3항)

6) 책임한계

하도급으로 시행한 당해 설계 성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다

1.17 과업내용 변경

1) 과업 내용 변경사항이 발생하였을 경우, 발주기관은 "지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(제14장 용역계약 일반조건)"에 따른다.

2) 계약상대자는 설계용역수행 중에 주요 설계과업내용에 대한 변경없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 발주기관의 지시를 받아 우선 과업을 변경하여야 한다.

3) 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 설계변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

4) 계약상대자는 다음 항목에 해당하는 때에는 발주기관과 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

(1) 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

(2) 계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산 변경시

(3) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

(4) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

(5) 관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

(6) 지층상태가 불규칙하여 변경이 불가피할 때

(7) 기타 발주기관에서 변경이 불가피하다고 인정할 때

1.18 용역수행자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관에서 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서 발주기관으로부터 교체요구가 있는 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

3) 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

4) 과업에 참여하는 기술자는 관련법령에서 정하는 자격요건을 갖춘 자로 하여야 한다.

1.19 용어의 해석

1) 과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

2) 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 후 사용하여야 한다.

1.20 설계 등 손해배상

1) 계약상대자는 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역 목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 하며, 계약상대자는 보험 또는 공제에 가입하고, 당해 용역을 완료하기 전에 보험증서 또는 공제증서를 발주기관에 제출하여야 한다.

2) 보험 또는 공제가입에 따른 비용은 용역비용에 계상한다

1.21 계약상대자의 시정요청

계약상대자는 용역감독자가 다음에 해당하는 경우 서면으로 발주기관의 장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

1) 용역감독자가 설계과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

2) 용역감독자가 정당한 사유 없이 건설기술자의 교체를 요구할 때

3) 용역감독자가 정당한 사유 없이 용역 업무를 지연시킬 때

1.22 용역 성과품의 품질관리

1) 설계의 실명화를 통한 설계도서의 품질관리를 위해 최종 용역보고서 및 설계도면에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당자(설계 등 용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다. (건설기술진흥법 제48조제5항, 본 과업내용서의 별표1 참조)

2) 준수사항 및 설계시 고려되어야 할 사항

(1) 본 과업내용에 명시되지 아니한 사항(설계 설계심의결과 미반영된 사항, 자치구 및 주민요구사항, 기타) 등에 대해서도 발주기관의 지시가 있을 때는 성실히 수행해야 한다.

(2) 계약상대자는 설계의 경제성 등 검토결과 승인된 VE제안에 대한 조치계획서를 작성하여 발주기관에 제출하고, 설계내용에 수정․반영 및 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

3) 참여기술자의 명단은 주민등록번호 뒷자리를 **로 암호화 처리하여야 한다(보고서도 동일)

1.23 발주기관의 제공자료

1) 본 과업수행을 위해 계약 후 발주기관이 제공할 자료는 다음과 같다.

(1) 사업예정지 주변지역 수치지형도 또는 수치지도 1부

(2) 사업예정지 주변 하수관망도 1부

(3) 본 과업관련 보고서 각 1부

․ 서울시 하수관거조사 및 정비기본설계 종합보고서(2001.9 서울특별시)

․ 하수관거조사 및 정비 기본설계 보고서(00처리구역 : 1993.12 서울특별시)

․ 2030하수도정비 기본계획 보고서 및 부록Ⅰ, Ⅱ(2018.1 서울특별시)

․ 상습침수 해소를 위한 하수도시설기준 재검토 (2002.12 서울특별시)

․ 비굴착공법에 의한 하수관정비 품질관리지침서 및 서울시 비굴착 전체 보수 전문시방서 (1998, 서울시)

(4) 기타 필요자료

2) 상기 자료는 설계 참고용으로 제공된 것으로 계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성을 확인하되, 오류가 발생한 경우 발주기관에 보고하여 확인 후 사용하여야 하며, 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

3) 상기 제공자료는 성과품 제출시 반납한다.

1.24 적용기준 및 참고자료

1) 본 설계용역에 적용하는 다음의 설계기준 및 시방서는 최신의 것이어야 하며, 관련 기준이 개정된 경우 용역완료일까지 수정된 최신 기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의․적용하여 수행한다.

(1) 국토교통부 및 관련 학회 각종 표준시방서, 설계기준 및 설계지침서

(2) 한국산업규격(KS)

(3) 서울시 각종 설계 및 시공편람

- 전문시방서

- 지반조사 편람

- 시설물 설계 및 시공편람

(4) 서울시 유지관리지침, 하수도표준도 및 하수도표준도 해설(국토교통부)

(5) 시설물 안전관리에 관한 특별법

(6) 하수도 법령

(7) 하천 법령

(8) 도로 법령

- 도로의 구조․시설기준에 관한 규칙

(9) 도시계획법령

- 도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙

(10) 하수도시설기준(환경부) 및 하수분야업무처리지침(서울시)

(11) 설계기준 변경에 따른 하수도 종합정비 실시설계 지침(서울특별시 2008. 2)

(12) 환경관련 제 법규

(13) 건설기술진흥법에 의한 품질시험규정

(14) 공공하수도시설 설치사업 업무지침(환경부)

(15) 환경부 하수도공사 시공관리 요령

(16) 서울특별시 친환경상품 구매촉진에 관한 조례․시행규칙

(17) 기타 관련 법규

(18) 기타 발주기관이 제공하는 관련자료

(19) 굴착시 보도 포장과 관련하여서는

① 차량 진출입로는「보도 턱 낮추기시설 설치개선 운용지침(도로관리담당관-2313호, 2007. 2.14)」를 준수하여 계획하되, 차량 진출입로로 인해 보행하계가 단절되지 않도록 연속된 보도로 계획할 것.

② 볼라드는 「도로안전시설 설치 및 관리지침(국토교통부, 2014)」에 적합한 규격을 사용할 것.

③ 보도포장은 「시공상세도면 작성지침(기술기준과-1732, 2010.6)」에 의거 시공 상세 도면을 작성한다.

(20) 시멘트 콘크리트 포장 생산 및 시공 지침(국토교통부)

(21) 아스팔트 혼합물 생산 및 시공 지침(국토교통부, 2014. 1)

(22) 산업부산물 재활용 도로 포장 지침(국토교통부)

(23) 보도공사 시공매뉴얼(서울특별시, 2013년)

(24) 디자인서울 가이드라인(서울특별시, 2008년)

(25)「빗물가두고 머금기 사업」가이드라인(서울특별시, 2008년)

(26) 하수도정비기본계획(서울특별시, 2009년)

(27) 도로안전시설 설치 및 관리지침(2012.11, 국토교통부)

(28) 보도설치 및 관리지침(2011.7, 국토교통부)

(29) 침수대응 하수도 시뮬레이션 수행 매뉴얼(환경부, 2011년)

(30) 건설공사의 설계도서 작성기준(국토교통부, 2013년)

(31) 서울특별시 빗물관리 기본계획(서울특별시, 2013년)

(32) 지반침하 대응 하수관로 정밀조사 매뉴얼(환경부, 2015년)

2) 통계자료는 공신력 있는 기획재정부, 국토교통부 및 정부기관, 지방자치단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

3) 관련법령 및 기준에 대하여 명기한다.

1.25 준수사항

1) 준수사항

(1) 본 과업을 충실하게 수행하기 위하여 계약상대자는 본 과업내용서와 관계법령 및 제규정에 따라 성실히 수행하여야 한다.

(2) 과업수행 중 정책변경 등으로 불가피하여 본 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업내용을 변경할 수 있으며, 이 경우 기수행한 설계 및 조사에 대한 비용은 상호 협의하에 결정한다.

(3) 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 발주기관이 과업 수행상 필요로 추가 과업을 요청할 경우에는 그 내용 및 비용 등을 상호 협의하여 결정하며 계약상대자는 이를 성실히 수행하여야 한다.

(4) 본 과업내용서 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가시 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

2) 조사 및 설계시 고려되어야 할 사항

(1) 설계변경 및 공사비 증액의 최소화

(2) 환경 친화적 건설공사를 위한 공법 및 적용기준 제시

(3) 건설폐자재 활용방안 검토

(4) 설계에 적용 가능한 건설 신기술의 공법 및 적용기준 제시

(5) 발주기관과 시공자간의 클레임 발생이 최소화 되도록 설계도서 작성

(6) 공사시방서에 시공상세도면의 목록 제시

(7) 동일 또는 유사공종의 건설공사 사후평가 결과 조사 및 검토하여 본 설계에 반영

(8) 건설공사 사후평가 결과 작성을 위한 실시설계 사후평가표 작성

(서울특별시 건설공사 사후평가 수행지침 참고)

(9) 우기·동절기 등 공사 중지 기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 시민불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 공정관리 전문가 참여하여 적정 공사기간 산정

(10) 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용) 계상 : 안전관리비를 잠정금액(PS단가)으로 설계내역서에 포함하여 작성

(11) 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시해야 함(엔지니어링 사업대가의 기준에 따라 시공상세도 작성비 계상)

(12) 주민, 시의회 등 의견수렴 내실화로 민원발생 최소화

(13) 관계기관과의 충분한 협의를 통한 공사중 설계변경 요구사항 사전 방지

(14) 동일 또는 유사공사의 사고사례 조사 및 안전대책 수립 의무화

(15) 본 과업내용에 명시되지 아니한 사항(기설계심의결과 미반영된 사항, 자치구 및 주민요구사항, 기타) 등에 대해서도 발주기관의 지시가 있을 때는 성실히 수행해야 한다.

(16) 건설안전을 고려한 설계(DFS, Design For Safety)

- 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다.

- 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다.

- 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다.

- 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려한다.

- 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전하게 작업이 이루어지도록 해야 한다.

- 시설물의 유지관리가 용이하도록 개․보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등이 고려되어야 한다.

- 부서지기 쉬운 자재가 최소화되도록 하여야 하며, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 하여야 한다.

- 해체 및 개․보수 공사 시 기존 구조물이 안전하도록 하여야 한다.

- 지반굴착공사의 시공시기가 장마철, 해빙기와 겹칠 경우에는 이에 대한 안전성검토를 실시하여야 한다.

- 건설공사 중 근로자의 안전확보를 위하여「산업안전보건법」제23조부터 24조까지에서 정하는 내용을 고려해야 한다.

(16) 안전관리문서의 제출

- 설계과정 중에 도출한 건설안전 위험요소(Hazard) 및 위험성(Risk)에 대한 평가를 실시한 결과로서 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성된 설계안전성검토(DFS)보고서

- 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

- 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

(17) 기존 설계에서 조사된 구간은 기존 자료를 최대한 활용하되, 현장을 확인하여 현황이 맞지 않아 조사가 필요하다고 판단되는 구간은 재조사 실시

(18) 정비가 완료된 구간은 향후 도시기반 시설변경이나 인구변동 등의 설계인자에 변화가 없는 한 내구연한 이상까지 재정비가 필요없도록 통수능, 유속, 수밀성 등이 확보되고 품질이 향상되도록 설계

(19) 하수관로 건설비, 유지관리비 및 유지관리 용이성 등을 비교․검토하여 경제적인 설계가 되도록 할 것.

(20) 유지관리 관로는 리스트 작성 실시설계 준공 시 제출하여 하수도 관리 전산시스템에 별도 DB관리되도록 할 것.

※ 상․하류 관로 병행 정비 연장, 상․하류 관로 부설년도, 정비 시 소요사업비, 예상 정비 가능 년도, 기준 미달 유속 등

(21) 서울시 하수도 관리 전산시스템(GIS) 등록 가능한 자료를 제출할 것.

(22) 신설․개량되는 하수도공사는 ‘ 2016.12.30 개정된 도로법 시행규칙 제21조 및 공공측량 작업규정에 따라 시행하고, 공공측량 및 성과심사는 관련법, 규정에 의해 관리청(사업시행부서)에서 추진하되 측량 및 성과심사비등 소요예산을 반드시 반영할 것

(23) 두 개의 관이 연결되는 부분은 곡관 또는 T형관으로 하고, 우수토실 사용을 금지할 것.

(24) 관로조사를 통하여 발견되는 내부 퇴적물이나 지장물은 조서를 작성 제출할 것.

(25) 최종 성과품은 하수도관리 전산시스템 보유 데이터 갱신에 활용될 수 있도록 하수도 GIS DB 관리부서와 긴밀히 협의하여 설계

(26) 정화조의 하수관 연결시 낙차에 따른 악취 저감방안을 검토하여 설계에 반영하도록 한다.

(27) 시민친화형 하수관로 재구축 사업 개선보완 발전계획에 따라 다음과 같이 내용을 검토토록 한다.

※ 시민눈높이에 맞춰 공사 소음․진동 최소화(저소음컷터기 사용)

※ 6m이하도로 굴착공사시 경량복공 및 가시설 적용

※ 맨홀과 맨홀 일정구간(30m내외)을 일괄굴착 시공(기울기, 다짐도, 수밀성 확보)

※ 도로굴착, 복구시 시민안전 및 환경관리 개선

※ 신공법 적용에 따른 홍보

(28) 본 설계 용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다. 단, 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

(29) 인체에 유해한 물질(예 석면 등)이 함유된 자재는 사용하지 않도록 한다.

(30) 건설폐자재 등 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시하여야 한다.

(31) 토피는 1m이상 확보를 원칙으로 하되 최소토피 유지가 곤란한 곳은 1m이하로 할 수 있다.

(32) 지반조건에 적합한 관 기초를 계획하되 기초형식은 내구성 및 경제성을 고려한 형식으로 설계한다.

(33) 공사 준공 표지판을 맨홀은 1개소당 하수관은 2본당 1개소에 부착한다.

(34) 콘크리트 구조물에 대한 설계기준강도(fck)를 표기하고, 각종 강도의 단위는 SI단위 할 것.

(35) 골재원 및 토사처리는 서울특별시에서 수행하고 있거나 또는 추진예정인 각종 공사장과 우리시「사이버 흙은행」 및 국토교통부 「토석정보공유시스템」을 이용하여 공사 시 시공성 및 경제성을 최대한 높일 수 있는 토취장, 골재원 및 사토장을 조사하여 본 과업에 사용 여부를 발주기관과 협의하여 결정한다.

(36) 관 연결부위, 접속부위 등 다짐 효율이 떨어지는 부분의 지반침하를 예방할 수 있는 다짐방안을 검토하여 제시하여야 한다.

(37) 관의 최소토피는 가장 최근에 제시된 동결심도 분포를 고려하여 반영하여야 한다.

(38) 효율적인 하수도관리 전산시스템 활용을 위해 자산관리 개념을 적용하여 장기 하수관로의 유지관리비를 절감하고 시설 사용연한을 늘릴 수 있는 방안 모색이 필요함.

(39) 하수관로의 설계 시 지하 매설물 등의 횡단에 의한 역사이펀을 고려하고, 유입구와 유출구와의 손실수두 감소와 상류측 관로내의 유속을 20~30% 증가시킬 수 있도록 계획하는 것이 필요함.

(40) 계약상대자는 발주기관이 설계의 경제성 등 검토를 실시하고자 하는 경우 이에 필요한 관련 자료 등을 제공하여야 하며 , 설계개념 발표 및 VE제안서에 대한 의견개진 등 설계VE 활동에 적극 협조하여야 한다.

(41) 계약상대자는 설계의 경제성 등 검토결과 승인된 VE제안에 대한 조치계획서를 작성하여 발주기관에 제출하고, 설계내용에 수정·반영 후 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

2.0 기본 방향

2.1 일반사항

1) 금회 과업에서는 2030하수도정비기본계획의 기본방향에 따라 종합적인 하수관로 정비 설계가 되도록 하여야 한다.

2) 노후관로 및 불량관로에 대한 종합적인 하수관로정비 기본 및 실시설계가 될 수 있도록 하고 하수관로 조사(CCTV조사, 내시경조사, 맨홀조사, 관로현황 조사)는 종합적인 조사계획이 포함된 현장조사 계획서를 작성하여 승인을 받아야 한다.

3) 본 과업은 정비대상을 우선 선정한 후 그 결과를 토대로 기본 및 실시설계를 수행하도록 한다.

4) 에너지절약 설계기법 및 절감방안을 사업초기부터 충분히 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

2.2 하수관로 조사

1) 금회 과업은 시급성을 고려하여 전체 하수관로중 기 조사완료, 정비중, 정비예정, 정비대상인 지역의 관로, 개발사업지역 등을 제외하고 금회 조사대상을 선정하여 불필요한 조사로 인한 예산낭비, 시간낭비를 최소화하여 효율적인 조사가 되도록 한다.

2) 현장조사자는 교통혼잡구간, 시장골목 등 조사가 어려운 구간이 조사구역에 포함된 경우 자치구 현장관리자, 발주기관 용역감독에게 보고하여야 하며, 필요시 현장관리자 및 용역감독 승인 후 야간조사를  실시할 수 있다.

3) 관계기관 협의

(1) 본 조사는 과업목적에 부합하여야 하며, 최적의 조사가 되도록 하수도 관리청(자치구)와 긴밀한 협조가 이루어질 수 있도록 전체 조사계획에 대한 사전협의를 실시한다.

(2) 계약상대자는 하수관로 조사기간 중 자치구의 현장관리자와 현장조사자간 긴밀한 교류가 이루어질 수 있도록 조직체계를 구성하여야 한다.

(3) 현장조사자는 매주 주간 조사계획 및 조사 중 발생가능한 문제점, 요청사항을 자치구 현장관리자에게 보고하여야 한다.

(4) 현장조사자는 1~3차 미조사 관로 중 퇴적 및 미정비 구간 등을 해당 자치구 현장관리자에게 제시하고, 준설시행여부, 정비일정 등에 대한 사항을 공지받은 경우 긴급조사가 이루어지도록 하여야 한다.

4) 금회 조사대상 하수관로는 아래와 같은 방안을 검토 후 조사를 시행한다.

(1) 조사대상 하수관로가 장기주차, 노상 적재물 아래 위치할 경우 해당 자치구에 보고하여야 한다.

(2) 일방통행, 교통혼잡, 시장골목, 상가 인근 등 민원이 발생할 수 있는 지역의 하수관로는 조사 시행 전 홍보조치를 시행하여야 한다.(필요시 관할 경찰서 업무 협조 요청)

(3) 시민공원, 볼라드설치 등 차량통제구간내 불탐관로는 해당 유관기관에 사전 협조 공문을 시행하여 원활한 조사가 시행될 수 있도록 한다.

(4) 토사퇴적, 물고임 등 구조적으로 조사가 어려운 하수관로는 해당 자치구 현장관리자 및 용역감독에게 보고하여야 하며, 용역감독 승인 후 조사대상에서 제외할 수 있다.

5) 하수관로 상태조사

(1) 지반 및 지하수위 조사

- 기존자료를 통한 지반조건 및 지하수위에 대한 조사를 통해 조사대상 우선순위 및 노후도 평가기준의 자료로 활용하여야 한다.

(2) 하수관로의 노후도 평가를 위해 일반적인 기존 하수관로 조사 시 사용되는 관로내부조사(CCTV, 육안) 외에 필요시 추가 조사를 시행한다.

- 하수관로 내에서 파손된 및 토사유입 등 도로함몰의 개연성이 높은 지점에 대한  지반공동화를 조사할 수 있는 조사(내시경 조사, GPR탐사 등)

(3) 노후 관로에 대한 기본 및 실시설계를 위해 관로 현황조사를 시행한다.

2.3 하수관로 평가

1) 금회 조사된 하수관로에 대해 노후불량 하수관로를 구분하여 선정한다.

2) 노후 관로는 금회 조사결과와 ‘하수관로 노후도 평가항목 설정 및 평가방법 개선방안 용역’ 및 기존의 노후관로 조사 용역을 검토하여 노후도 평가 항목과 기준을 수립한다.

3) 불량 관로는 기존 서울특별시 하수관로 판단기준 외에 하수도시설기준, 환경부 제정 매뉴얼 등을 참고로 하여 판단기준을 수립한다.

4) 수립된 노후 관로와 불량 관로에 대한 평가 항목 및 기준은 향후 하수관로 정비사업시 기준이 되도록 공신력 있는 대내외 자문을 거쳐 결정한다.

2.4 기본 및 실시설계

1) 금회 사업은 기존 노후 관로 정비를 위한 사업이나 2030하수도정비기본계획에서 나온 세부 추진계획, ‘15~’17년 용역 및 본 용역에서의 계획한 하수관로 정비방안 수립 기준 등을 고려하여 종합적인 하수관로 정비사업 설계가 되도록 한다.

2.5 현지답사

1) 계약상대자는 현지 답사하여 현지조건에 계획시설물이 적합한지를 확인하여야 한다.

2) 또한, 지형, 지질, 하천 등의 자연상황 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 작업장 등의 확보 가능여부를 판단 한다.

3) 현지답사 시에는 필요할 경우 사진(또는 비디오)을 찍어 사진첩(또는 USB나 CD)에 정리하고 구조물 계획 시에 참조 하도록 한다.

2.6 골재원과 사토장에 대한 조사

서울특별시에서 수행하고 있거나 또는 추진예정인 각종 공사장과 국토교통부 「토석정보공유시스템」을 이용하여 공사 시 시공성 및 경제성을 최대한 높일 수 있는 토취장, 골재원 및 사토장을 조사하여 본 과업에 사용 여부를 발주기관과 협의하여 결정한다.

3.0 하수관로 조사

3.1 일반사항

1) 본 과업은 각종 조사를 통해 하수관로의 상태(노후도, 불량현황)를 파악하여 해당 관로의 정비를 위한 기본 및 실시설계를 수행하는데 그 목적이 있다.

2) 하수도 유지관리계획을 수립하기 위해 하수도 관리현황(준설, 청소 등) 및 하수도로 인한 영향(악취, 수질, 유량 등)과 관련된 조사항목을 포함한다.

3) 하수관로 조사계획은 사전조사계획서를 하수도 관리청 및 발주부서에 제출하여 조사방법, 물량 등을 사전에 협의토록 한다.

4) 본 과업내용서 이외의 명시되지 않은 조사항목은 발주기관이 과업수행상 필요로 추가 과업을 요청할 경우에는 그 내용 및 비용 등을 상호협의 하여 결정하며, 계약상대자는 이를 성실히 수행하여야 한다.

5) 조사내용은 하수관로의 내부상태, 하수관로 주변 현황(도로함몰 발생여부, 지반조건, 지하수위 변동 등)을 직․간접적으로 조사하여야 한다.

6) 계약상대자는 조사 대상이 누락되거나 불필요한 조사가 되지 않도록 철저한 사전조사를 시행하며, 불필요한 조사비용에 대한 책임을 져야한다. 또한 계약상대자의 판단에 의해 추가 조사가 필요하다고 판단되거나 조사내용의 변경이 필요한 관로는 발주기관과 협의하여 시행을 결정한다. 다음 지역 및 관로는 조사대상에서 제외한다.

(1) 각 자치구 배수분구 종합정비사업, 단일개량사업, 보수․보강지역 등의 공사완료 및 공사 중, 설계완료 및 설계 중, 공사예정인 관로

(2) 하수관로 정비대상 관로

(3) 산지 및 공원지역

(4) 주택재개발/재건축사업 지역, 뉴타운 예정지구 등 개발지역

7) 매설년수별(5/10/15/20/25년, 30년 이상) 하수관로 상태평가 결과를 비교·분석한다.

8) 추가 과업 시행 시 발생하는 비용 및 여건상 조사가 불가능 한 지역은 발주기관과 협의하여 물량 증감에 따라 비용을 정산 처리한다.

9) 하수관로 평가 시 ‘노후도 평가항목 결정 및 평가방법 개선방안용역’ 등 관련 자료를 고려하여 수행토록 한다.

10) 하수관로 상태평가단 운영 시 해당 조사결과를 반영한 상태평가결과를 도출할 수 있도록 성실히 내용을 제공한다.

11) 조사 대상 관로에 대한 내부조사 자료가 있는 경우 발주기관과 협의하여 활용가능여부를 검토하여 조사가 중복되지 않도록 하여야 한다.

12) 관로 조사 시 관련기관과 사전 협의를 철저히 시행하고 인가 필요시 인가를 득한 후 조사를 시행하여야 한다.

13) 지하매설물 유지관리 기관과 관로 현장 조사기간에 클레임이 발생하지 않도록 하여야 한다.

14) 관로 내 퇴적량을 확인 후 용역감독자에게 유지관리 주체인 관할구청에 통보하여 준설이 가능하도록 관련자료를 제출하여 최적의 상태에서 관로조사가 시행되도록 한다.

15) 하수관로 내부조사(CCTV)시 퇴적물에 의해 주행율이 낮아 하수관로 내부 상태조사가 어려울 경우는 발주기관에 보고하여 퇴적물 준설 후 대상 관로에 대한 완전한 내부 상태조사를 시행하여야한다.

16) 조사불가 및 미완주 관로(1~3차포함)에 대한 분석 및 조치계획을 마련해야 한다.

17) 관로내부를 육안조사 시 유독가스에 의한 사고사례가 있으므로 하수관로 맨홀 뚜껑 개폐 후 산소농도 측정 등 안전사고에 대비하여 안전대책을 마련한다.

① 작업장의 사고방지를 위한 확인사항

가. 부근에서 유독가스가 발생하는 장소는 없는지 사전조사 및 조치

나. 유아, 학생, 기타 제3자가 조사현장이나 기자재 하차장 등 위험장소에 출입하지 않도록 적절한 조치

다. 작업의 방법, 순서 등 시공계획을 세운 뒤 이를 준수하여 작업

라. 작업 내용에 따라 작업자 선정을 신중히 하여 적격자를 선정

마. 무게를 취급하는 장비(윈치, 크레인, 체인블록 등)의 경우 와이어로프 거는 방법, 안전하중 등은 정해진 방법으로 적정하게 운영

바. 벨트(belt), 기어(gear), 풀리, 샤프트(shaft) 등은 말끔히 커버를 씌어 보관

사. 기타 안전대책 수행

② 밀폐공간에서의 작업 수행 시 절차

출입자, 관리감독자, 감시인은 밀폐공간 출입작업에 대하여 허가를 받아야 하며 작업 절차는 다음과 같음

출입 사전조사 → 장비준비/점검 → 출입조건 설정 →출입전 유해공기측정 →밀폐공간 작업허가서 작성 및 허가자 결재 → 감시인 상주 → 감시모니터링 실시→ 통신수단 구비 → 화기작업 시 화기작업허가 취득 → 밀폐공간 작업허가서를 작업장에 게시 → 밀폐공간 출입 → 문제발생 시 선조치 후보고

③ 밀폐공간에서의 작업방법

가. 밀폐공간 출입자는 개인 휴대용 측정기구를 휴대하여 작업 중 유해공기를 수시로 측정

나. 밀폐공간 출입자는 휴대용 측정기구가 경보를 울리면 즉시 밀폐공간을 떠날 것

다. 경보음이 울릴 때 출입자가 작업현장에서 떠나는 것을 감시인은 필히 확인

라. 작업현장 상황이 구조 활동을 요구할 정도로 심각할 때 출입자는 반드시 감시인으로 하여금 즉시 비상구조 요청

④ 교통안전 대책

도로상의 조사에 있어서는 도로사용 허가조건을 엄수하여 다음 사항을 고려하여 교통보호에 노력하여야 함

가. 조사표지판, 안전펜스, 주의 등, 조명등 등을 항시 정비하여 정확히 배치

나. 조사구역 내 항시 정리정돈

다. 교통안전요원의 배치(차량의 유도, 통행인의 안전 확보 등)

라. 도로부대설비의 보호(교통표지, 가드레일, 가로등)

마. 안전한 보행자의 통로 확보

조사구간	조사구간
차량 안전사고 예방 대책	보행자 안전사고 예방대책

18) 관로 측량은 하수도관리전산시스템의 자료를 활용하되, 측량이 미 시행된 관로는 하수도정확도개선사업과 연계하여 우선 시행토록 발주기관과 협의하고, 기본 및 실시설계가 필요한 관로의 경우 추가 측량을 시행하여 계획수립에 차질이 없도록 사전에 조치한다.

19) 해외 하수관로 조사 신기술, 탐사기법 등에 대해 “노후도 평가항목 결정 및 평가방법 개선방안 용역”에서 자문을 실시하여 적용 가능한 신기술을 검토하고, 본 용역에 우선적으로 적용토록 한다.

3.2 하수관로 조사

3.2.1 관로내부조사(육안조사, CCTV)

1) 관로 내부조사는 현장 판독결과에 따라 관로상태, 노후도 및 개․보수 평가, 공법선정 등에 영향을 미치므로 전문 조사인력을 투입하여 조사를 시행한다.

2) 관로 내부조사가 필요한 관로에 대해서는 인력 또는 CCTV로 조사한 기본자료(관로의 위치, 관로의 기본사항, 관로의 이상 상태 등)를 COMPUTER DATA BASE화하고 수집된 자료는 보고서로 작성하여 유지관리의 기초 자료로도 활용할 수 있도록 한다.

3) CCTV 촬영 시 기존관로의 위치 및 기본사항 등이 확인가능토록 하고 조사 촬영된 자료는 정해진 위치를 탐색하고자 할 때 즉시 탐색이 가능하도록 수록하며, CCTV촬영은 측시가 가능토록 한다.

4) CCTV 촬영 자료 등 조사 자료는 “서울시 하수도관리 전산시스템”에 즉시 탑재 가능한 형식으로 작성한다.

5) 내부조사 시 유입관로의 낙차가 심한 지점은 필요할 경우 하부 슬라브 세굴방지 및 악취확산 발생 방지를 위한 부관의 설치를 검토할 수 있도록 각 유입관로의 관저고를 조사, 기록하여야 한다.

6) 내부 상태 조사방법

- 원형관로

․ 관경 1000mm 미만 : CCTV 조사(카메라부 화소 최소기준 : 41만, 600㎜이상 90만화소)

․ 관경 1000mm 이상 : 육안조사(필요시 CCTV 조사, 90만화소)

7) 관 내부조사 사항

- 내부부식 및 크랙여부, 연결관 돌출여부, 본관 및 연결관 접속부위 파손여부, 관연결부 단차여부, 토사퇴적, 타관통과, 오접 등 하수도 시설기준에 부합하는 관로 조사항목을 모두 포함한다.

8) 관로내부 CCTV 조사는 관로 및 배수설비 연결부위는 해당부위의 연결 상태를 확인하기 위하여 360° 회전하여 촬영하여야 한다.

9) 서울시는 교통이 혼잡하고 통행하는 시민이 많으므로 관로내부 조사시 교통사고, 맨홀추락 등 계약상대자, 보행자의 안전사고 방지를 위한 교통대책을 포함한 종합적인 안전대책 수립 후 현장조사를 이행토록 한다.

10) 강우 시 유량증가, 관내의 유속에 대한 안전조치 등 조사자의 안전을 위한 보호장구 착용, 보호시설 설치 등의 모든 조치를 취하여야 한다.

11) 하수관로 육안조사 전 항상 일기예보를 확인하고 작업시에는 지상에 안전요원 2인 이상 필히 배치(작업자와 통신가능한 장비 확인)토록하며. 강수확률50%이상인 경우 반드시 작업을 중지토록 한다. 이와 관련된 우리시에서 마련한 돌발강우시 하수관로 안전작업 관리매뉴얼 관련내용을 숙지하여야 한다.

12) CCTV 조사 장비가 하수관로 촬영용으로 적합한지에 대한 확인은 발주기관 용역감독자가 입회한 상태에서 이루어져야 한다.

13) 기존관로 내부조사 자료를 충분히 활용하여 조사가 중복되지 않도록 한다.

3.2.2 내시경 검사

1) 내시경 조사는 육안조사시 관로의 파손 및 토사유입 등 도로함몰 개연성이 높은 하수관로에 대해 추가적으로 내시경 장비를 이용하여 하수관로 주변의 동공 유무를 조사하기 위해 실시한다.

2) 내시경 검사는 사전에 발주기관 협의를 통해 조사 대상에 대해 결정하여 실시한다.

3) 조사과정은 사진 촬영 또는 영상으로 기록하여 제출하여야 한다.

3.2.3 GPR탐사

1) GPR탐사는 도로함몰의 개연성이 높은 하수관로에 대해 지하 공동 여부, 노후도 평가 검증, 주변지반의 공동화, 함몰, 기초 세굴 등을 조사하기 위해 실시하여야 한다.

2) GPR 탐사는 사전에 발주기관 협의를 통해 조사 대상에 대해 결정하여 실시하여야 한다.

3) GPR탐사 장비는 가능한 국내․외에서 활용도와 신뢰도가 높은 장비를 이용하여 조사하는 것을 원칙으로 한다.

4) 탐사전에 현장답사를 통하여 지장물이 예상되는 지역은 반드시 지장물을 확인하여 탐사의 정밀도를 높여야 한다.

5) 현장조사는 원칙적으로 일정한 속도를 유지할 수 있는 장비를 활용하여야 하며 이는 자체 장비를 사용하는 것을 원칙으로 하며 이동 장비는 사전에 협의하여야 한다.

6) 조사 심도는 설계 도면 등을 기준으로 하여 결정한다.

7) 탐사 순서 및 횟수는 장비운영업체에서 장비의 특성에 따라 결정한다.

3.2.4 관로조사 시 고려되어야 할 사항

1) 최신 조사 기법 및 장비를 활용하여 조사기간 단축 및 비용을 최소화하는 방법을 검토, 제시 한다.

2) 안전관리 및 교통처리 대책 등을 하수관로 상태조사 전 계획하여 하수도 관리청 및 발주처와 협의하여 민원발생 최소화 및 조사기간이 단축될 수 있도록 한다.

3.2.5 측량 조사

1) 일반사항

(1) 기본 및 실시설계 대상관로에 대한 측량조사를 시행하여야 하며, ‘하수도 GIS DB 정확도 개선사업’과 연계하여 기 조사가 완료된 지역은 조사를 제외하여야 한다.

(2) 측량은 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 및 공공측량의 작업규정(국토지리정보원) 세부기준에 의하되 우리시 수치지도(1/1,000)와 비교 ․ 평가하여 정확도를 높여 시행하여야 한다.

(3) 계약상대자는 측량을 실시하기 전에 작업계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

(4) 작업계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

① 조사물량

② 작업계획표 (외업, 내업)

③ 인원편성

④ 주요기기

⑤ 특기사항 (안전관리, 사진촬영)

⑥ 위 치 도

⑦ 기    타

(5) 측량기구는 수시로 점검하여야 하며, 공인기관의 보정․확인을 받은 것이어야 한다.

(6) 계약상대자는 측량작업 시 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

(7) 측량작업 시 필요한 관계기관의 제수속은 계약상대자 부담으로 신속히 처리한다.

(8) 측량을 위해 교통 혹은 보행의 금지 또는 제한이 필요한 경우 해당 경찰서 및 발주기관과 협의하여 허가를 득한 후 시행한다.

(9) 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률에 따른 공공측량 성과 심사를 시행한다.(필요시)

2) 종․횡단측량

(1) 하수도대장도(수치지형도)에 사용한 수준점(T.B.M)확인 및 복구를 통하여 활용하도록 한다.

(2) 굴착공법으로 시행하는 개․보수 관로에 대한 종․횡단측량을 시행한다.

(3) 국토지리정보원의 수준점 성과를 이용하여 그 폐합차가 허용범위 이내에 들도록하고 주요지점에 표석(수준점)을 설치하고, 위치 및 표고를 평면 및 측량 성과품에 명시하고 추후 공사 시 이용이 가능하도록 한다.

(4) 기존 관로의 측량결과(관저고 및 맨홀 지반고)는 기초 자료로 활용하고 기존 하수관망도에 기록한다.

(5) 본 공사에 필요한 종․횡단측량은 20m 간격으로 시행하되 지형 등이 급변하는 곳에는 보조측점을 설치하도록 한다.

(6) 중심선 측량에 의해 결정된 종단측점에 대하여 종 ․ 횡단 측량을 실시하되 왕복측량으로 허용오차 내에 들도록 실시하고 종단면도의 축척은 종 1:100, 횡 1:500으로 작도하고 횡단면도의 축척은 1:100으로 한다.

3) 기타

(1) 인접 및 최근 시공 시 사용한 수준기점 사용

(2) 맨홀이 없더라도 지표 경사가 변화하는 지점은 반드시 지반고를 확인하여 종단도에 표시하여 최소토피 유지 여부 확인

3.2.6 지반조사

1) 시추조사

(1) 시추조사는 기존 기본계획 시추자료를 바탕으로 실시설계 및 공사를 효과적으로 수행할 수 있도록 보완조사를 시행한다.

(2) 서울시 지반정보시스템과 기본계획시 조사자료를 최대한 활용하며 관로 계획 노선의 대표성을 갖는 지점을 선정토록 한다.

(3) 시추지점의 정확한 위치를 측량하여 좌표 및 표고를 평면도상에 표시한다.

(4) 시추조사 시 지하매설물 유무확인을 위한 인력굴착(지하 1.5m이상)을 시행하기 전 유지관리기관(가스관, 통신케이블, 상수도관 등)과 협조 입회하에 지장물 유무를 확인 후 시추한다.

(5) 시추조사는 일정한 압력 및 회전속도를 유지할 수 있는 유압식 시추기를 사용하여 시행 한다.

(6) 시추공의 규격은 NX로 한다.

(7) 지하수위 측정은 시추 완료 후 모든 지점에서 72시간 측정을 원칙으로 한다.

(8) 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 구역을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동 상태를 파악한다.

(9) 도로주변에서 시추작업을 할 경우, 작업표시판, 안전울타리 등을 설치하여 안전사고를 방지하고, 교통 및 보행에 지장이 없도록 최대한의 조치를 취해야 한다.

(10) 시추조사를 완료 후 시추공의 보존 및 폐쇄방안은 서울시 지반조사편람 표준 과업지시서에 따라 시행한다.

(11) 시추조사 완료 후 주변을 원상복구하고 현장정리를 깨끗이 하여야 한다.

(12) 연약 점토층에서 채취된 실내시험용 불교란 자연시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀 등으로 시료상자를 보관하여 이동 중의 교란을 방지한다.

(13) 시추조사 시 채취된 교란시료는 함수비 변화가 없도록 시료 병에 넣어 밀폐시켜 보관한다.

(14) 주요 구조물 설치 위치에 대하여는 시주조사를 별도 시행토록 계획하고, 시추 중 연약지반이 분포할 경우 용역감독자가 필요하다고 판단될시, 별도의 추가 시추 조사계획을 수립 상세한 지반조건을 파악 한다.

2) 조사항목

(1) 시추조사에 의해 채취한 시료는 실내시험을 하여 흙의 물리적 특성을 측정하고, 설계에 필요한 토질의 역학적 정수 결정에 사용한다.

(2) 지질조사항목

- 실내시험은 입도, 함수비, 체분석, 비중, 액성한계, 소성한계 등 토성시험을 실시하여야 하며, 연약지반이 분포할 경우 자연시료채취에 의한  전단, 압밀, 일축압축 시험등 역학시험을 추가 한다.

- 표준관입시험은 KSF 2307 규정에 의하고, 매 1m마다 또는 지층이 변할 때마다 시행한다.

(3) 지반조사항목

- 토질시험은 한국산업규격의 규정에 따라 시행하며, 변경 시 사전에 용역감독자의 승인을 얻어 시행하여야 한다.

3) 시료정리

(1) 조사중 채취된 흙시료는 채취, 시추공번호, 채취심도 등 필요한 사항을 기록한 표준명패가 부착된 시료병에 넣어서 시료상자에 보관한다.

(2) 암석코어는 추후 제시하는 표준규격의 시료상자에 시추공 및 채취심도별로 정리하며, 상자에는 시추공번, 상자번호, 과업명, 조사일시 등 제반  정보를 기재하여 상자의 식별이 용이하도록 한다.

(3) 암석코어가 아닌 슬라임이 채취된 경우에는 슬라임을 흙시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

4) 보고서 작성

지반조사에 대한 자료는 서울특별시 「지반정보관리시스템」을 활용하고 지반조사결과 자료는 전산파일 형식(한글, 워드, PDF, CAD 등)으로 작성하여 CD에 담아 발주기관과 서울시 지리정보담당관에 각 1부씩 제출하도록 할 것.

(1) 지반조사 보고서는 과업내용에 명시한 사항과 조사방법 및 결과, 조사  지역의 지층분포 및 기타 설계에 필요한 자료들을 검토하여 보고서내에 수록한다.

(2) 지층명, 두께, 토성 및 역학적 성질을 분석․수록 한다.

(3) 시료의 종류와 시료의 공학적 특성을 분석․수록 한다.

(4) 시추위치 평면도, 시추주상도, 지층단면도 등을 수록 한다.

(5) 시추 주상도에는 다음 사항을 명시한다.

① 시추공번호, 시추지점 좌표 및 표고

② 암석명, 색상, 풍화도

③ 분류된 지층명과 특성

④ 강도, 절리간격, 절리면 상태, 암질표시율(RQD), 코어회수율(TCR)

⑤ 지하수위 관측치

⑥ 표준관입시험 결과의 N치

⑦ 기타 참고사항

(6) 각종 현장시험 결과 및 성과분석 자료를 수록한다.

(7) 조사․시험결과로 얻어지는 각종지반의 물성치를 기재하여야 하며, 계획지역의 지반구성상태, 연약지반현황, 예상되는 구조물 기초의 종류 (콘크리트기초, 자갈기초, 모래기초 등)에 따른 적합성 여부, 허용지지력 등을 수록 한다.

(8) 지반조사 보고서는 업무별로 책임기술자 및 참여기술자가 별도 서명 날인하여 제출하여야 한다.

3.2.6 맨홀조사

1) 맨홀내부에 대한 현황을 확인하기 위해 사다리, 인버트, 관접합 상태, 맨홀내벽(상하구체간 결함 등) 상태 등을 찰영 및 기록하여야 한다.

2) 현장조사의 맨홀 개폐 시 안전시설을 설치하고 안전요원을 배치하며 조사자의 안전을 위해 보호 장구를 착용하며 유독가스 발생에 대비한 강제 환풍기를 사용 등 계약상대자의 책임하에 안전에 만전을 기한다.

3) 도로구간에 조사 시 교통사고 방지를 위하여 교통신호수를 투입하고, 현장조사 시 조사원의 안전사고를 미연에 방지할 수 있도록 종합 안전대책을 수립한다.

4) 맨홀조사의 주요 조사 내용은 유하 및 퇴적상황, 손상상황, 불명수 상황, 기타로 구분하며, 세부적인 조사 항목 및 방법은 환경부의 조사 매뉴얼을 참고한다.

3.2.7 조사결과의 제출

1) 하수관로 조사결과는 리스트 작성하여 설계 준공 시 제출하여 하수도 관리 전산시스템에 별도 DB관리되도록 하여야 한다.

2) 서울시 하수도 관리 전산시스템(GIS) 보완을 위하여 용역설계 준공 즉시 하수도 관리 전산시스템 탑재 가능한 자료를 제출하여야 한다.

3) 관로조사를 통하여 발견되는 내부 퇴적물량이나 지장물은 조서를 작성 제출하여야 한다.

4) 금회 조사 대상관로 중 미조사구간은 미조사사유 등을 포함한 조서를 작성 제출하여야 한다.

5) 작성된 자료는 반드시 하수도 유지관리계획 시 참고하여야 한다.

4.0 하수관로 평가

4.1 일반사항

1) 하수관로 평가는 노후관로 및 불량관로를 구분하여 시행한다.

2) 각 평가에 대한 항목 및 평가기준은 과업내용서에 제시된 사항을 참고하여 금회 하수관로 조사결과를 바탕으로 재검토하여 발주기관과 협의를 거쳐 외부 자문을 통해 공신력 있는 평가 항목 및 기준으로 결정하여 선정하여야 한다.

4.2 노후관로 평가

4.2.1 평가항목 선정

1) 도로함몰은 도로 하부지반의 공동화에 따라 발생되며, 공동화는 하수관로 주변 지반의 지하수의 침입시 토사유입에 의해 발생되므로 지하수와 토사 유입에 영항을 주는 영향인자를 검토하여 선정하여야 한다.

2) 평가항목은 기존 관로불량등급 기준을 참고하여 선정하되, 물재생계획과에서 시행한 하수관로 노후도 평가항목설정 및 평가방법 개선방안 용역과 연계하여 결정하되 자체적인 평가항목 설정기준을 마련하고 용역과 상호비교 검토 분석하여 결정한다.

3) 평가항목으로는 하수관로 상태조사 결과를 활용하여야 한다.

(1) 관로내부의 상태를 파악할 수 있는 육안 및 CCTV조사를 이용한 관로내부결함 이상항목

(2) 하수관로 주변의 공동여부를 파악할 수 있는 내시경 탐사

(3) 연약지반 및 지하수위를 파악할 수 있는 지반 및 지하수위 현황

(4) 맨홀 내부 이상상태를 알 수 있는 관로현황조사

(5) “노후도 평가항목 결정 및 평가방법개선방안 용역”에 의한 기타 조사 내용

4) 기존 도로함몰의 원인이 하수관로인 경우 함몰지역의 각종 조사를 통해 도로함몰과 하수관로의 인과관계를 검토하여 평가항목의 신뢰성을 확인하여야 한다.

4.2.2 평가기준의 설정 및 노후도 평가

1) 평가항목에 따라 노후 하수관로를 판단할 수 있는 평가 기준을 설정하여야 한다.

2) 평가기준은 평가항목을 통해 등급화하여 배점으로 평가하도록 작성하며, 정도를 함께 제시하여 관로 정비계획에 활용할 수 있도록 한다.

3) 평가항목에 대한 등급은 평가순위를 세분할 수 있도록 3~5개로 나누어 점수화하거나 등급에 따라 점수를 가산하는 것을 검토하여야 한다. 5개 등급으로 구분하여 심각, 불량, 보통, 양호, 우수로 할 경우 다음과 같이 예시를 참고할 수 있다.

4) 평가항목에 대한 등급점수를 합산하여 조사된 하수관로의 노후도를 평가한다.

평가항목	균등점수					가산점수
	심각	불량	보통	양호	우수	심각	불량	보통	양호	우수
“가” 항목	5	4	3	2	1	10	8	6	4	2
“나” 항목	5	4	3	2	1	20	16	12	8	4
“다” 항목	5	4	3	2	1	40	32	24	16	8
“라” 항목	5	4	3	2	1	15	12	9	6	3
“마” 항목	5	4	3	2	1	10	8	6	4	2
“비” 항목	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
계	30	24	18	12	6	100	80	60	40	20

4.3 불량관로 평가

4.3.1 평가를 위한 판단기준 선정

1) 불량관로의 경우는 이상개소별 불량등급 및 정비등급의 기준에 준하여 평가하여야 한다.

2) 관로내부조사에 따른 관로상태를 판단하는 기준을 검토하여 금회 과업에 적합한 판단기준을 적용하여 평가하여야 한다.

4.3.2 불량관로 판단기준 종류

1) 불량관로에 대한 판단기준으로는 다음과 같다.

(1) 2030하수도정비기본계획(서울시)

(2) 하수관로 노후도 평가항목 및 평가방법 기준 마련 용역(서울시)

(3) 지반침하대응 하수관로 정밀조사 매뉴얼(환경부)

(4) 하수도 시설기준(환경부)

4.4 조사결과 판독 및 보고서 작성

조사결과 판독 및 보고서작성은 ‘지반침하대응 하수관로 정밀조사매뉴얼’을 참조하여 작성 하여야 함.

1) 조사결과 판독자의 자격

하수관로 정밀조사 판독 및 보고서 작성을 위해서는 촬영영상에 대한 전문적인 이해와 일관성 있는 판독작업이 필요하기 때문에, 관련 교육 이수 등을 통해 전문성을 갖춘 자(판독자)가 업무를 수행하도록 하며, CCTV 판독자의 전문성을 확보하기 위해 하수도법에 의한 법정교육기관에서 실시하는 CCTV조사 판독 관련 교육 등을 이수하여야 함

2) 결과판독 보고서 내 명시사항

판독 보고서에는 정밀조사를 수행한 조사자(판독자) 성명, 교육이수여부 등 현황을 명시하여야 함.

※ 하수관로 정밀조사서(별표 2)

4.5 우선순위

1) 우선순위의 평가기준 및 평가항목은 합리적이고 타당성 있게 제시하고 추후 발주기관과 협의를 거쳐 결정하여야 한다.

2) 사업우선순위 평가기준은 다음 사항을 고려하여 분류하여 가급적 계량화하여 제시하여야 한다.

(1) 도로함몰 우려가 높은 관로

(2) 노후도가 높고 불량인 관로

(3) 도로함몰시 예상 피해가 큰 관로(간선도로 지하 매설 관로 등)

(4) 대형 공사장 주변

(5) 기타 고려가 필요한 사항

5.0 기본 및 실시설계

5.1 일반사항

1) 기본 및 실시설계 수행에 있어서 하수도정비기본계획(이하 변경 포함), 하천정비기본계획(이하 변경 포함), 풍수해저감종합계획, 하수관로 정비 및 침수방지 등 관련 단위사업, 기타 지역개발계획 등 각종 상․하위 관련계획을 종합적으로 검토․분석하여 반영하여야 한다.

2) 관로의 구조적 문제가 있는 경우와 단순한 관로 기능에 문제가 있는 경우(통수능 부족, 관 내부불량, 역경사, 토사퇴적 등)를 발주기관의 계획에 따라 구분하여 수립할 수 있다.

3) 기본 및 실시설계시 고려되어야 할 사항

(1) 환경 친화적 노후하수관로정비를 위한 공법 및 적용기준 제시

(2) 하수관로 건설비, 유지관리비 및 유지관리 용이성 등을 비교․검토하여 경제적인 기본 및 실시설계가 되도록 할 것

(3) 사업비 산정에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

5.2 자료수집 및 관련 계획 검토

5.2.1 기본방침

1) 현장조사 및 기본 및 실시설계 시 발주기관의 지역현황을 토대로 기 수립된 도시계획 및 하수도정비 기본계획 또는 변경, 하수관로정비 설계 등을 검토하여 계획을 수립한다.

2) 모든 계획은 기존 자료를 최대한 이용하여 검토하며 합리적인 계획을 수립한다.

3) 조사업무 수행중 과업여건상 과업내용의 변경이 필요할 경우 상호간의 합의에 의해 변경할 수 있다.

4) 본 과업 수행을 위한 기초자료 수집 및 분석에 있어 우리시의 협조 하에 시행하도록 하며 공인된 기관에서 제공하는 최근 자료를 수집․활용하여 분석하여야 한다.

5) 상위계획 및 관련계획조사

① 하수도정비 기본계획(이하 변경 포함)

② 하천정비 기본계획(이하 변경 포함)

③ 하수도시설기준(2011, 환경부)

④ 풍수해저감종합계획

⑤ 기 수립된 하수관로정비계획 및 하수관로정비 기본 및 실시설계

➅ 도시기본계획 및 각종 토지이용 계획

➆ 각종 장기계획 및 장래계발계획

5.2.2 관련계획 자료조사

1) 제반사업의 연관성

본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 설계의 자료로 활용한다.

2) 도시계획사항 및 토지이용계획

계획구간내의 도시계획현황과 토지이용계획 등 관련 사업계획을 조사․검토하여 일관성 있는 계획이 수립될 수 있는 자료를 제공한다.

3) 환경부, 한국환경공단 및 서울시정개발연구원의 관로정비 및 도로함몰 관련 보고서를 참고하여 좀 더 효율적인 용역이 이루어지도록 한다.

5.3 현장조사

5.3.1 일반사항

1) 계약상대자는 현지를 답사하여 현지조건에 계획시설물이 적합한 지를 확인하여야 한다.

2) 지형, 지질, 하천 등의 자연상황과 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 작업장 등의 확보 가능여부를 판단하여야 한다.

3) 현지답사 시 필요할 경우 사진(또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하여야 한다.

4) 현장조사는 하수도대장 작성 이후 도로상황, 시공환경 및 지하매설물 등에 변화가 있을 수 있으므로 하수도대장과 조사 내용을 현장 비교 확인하여 시행하여야 한다.

5) 주변 환경 조사

(1) 지형, 배수분구계(분수령), 배수 흐름방향 등을 확인하여 현지 적합 여부 검토

(2) 용도지역(주거지역, 상업지역, 공업지역, 녹지지역) 파악

(3) 주간, 심야간, 주야간, 주야연속 시공구분, 교통소통 대책 등을 사업비에 반영

(4) 사업대상 노후 하수관로에 대해서는 도로형상, 포장종별과 시공년도, 전기, 통신, 상수도, 가스 등의 맨홀위치와 형상, 기타 도로구조물의 현황 조사

6) 시공조건 조사

(1) 시공조건 조사는 현재 주변상황이나 지하매설물을 확인하여 조사하여야 한다.

(2) 수집 자료는 도로대장, 하천계획도, 기존의 토질조사 자료, 도로구조물의 기초도 등을 수집하여 활용하여야 한다.

(3) 관련기관의 매설물조사는 전력, 가스, 통신, 상수도 등을 조사하고 정비 및 확충계획 등도 함께 조사하여야 한다.

(4) 수집된 자료는 현장조사를 통하여 확인하고 수집내용과 현장조사 내용을 토대로 지하매설물도 작성하여야 한다.

5.3.2 지장물 조사

1) 계획 구역내 각종 지하매설물 및 지장시설물을 조사하여 기본 및 실시설계에 반영한다.

(1) 조사방법

① 발주기관은 지하시설물 통합정보시스템을 활용하여 대상지 주변 지하 시설물도를 설계용역업체에 기본적으로 제공한다.

② 계약상대자는 발주기관에서 제공된 지하 시설물도를 참고하여 계획구간의 각종 지하매설물 및 지장시설물의 저촉여부를 조사하여 누락된 지하시설물이 없도록 유관기관과 협의(협의결과 발주기관 사전보고)를 이행한다.

2) 지장물 조사시 “서울시 지하시설물 정보 통합관리 시스템”을 활용하여 지장물 현황을 파악하여야 한다.

3) 지장물중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관, 철도 등)은 반영하여야 한다.

4) 공사 시 터파기 등으로 인한 보호공이 필요한 시설 등에 대하여는 보호방안을 반영하여야 한다.

5) 조사 된 지장물은 현황도에 정확히 표기되어 있어야 한다.

6) GIS Data Base 조사

(1) 대상유역의 기 구축된 국가지리정보체계(NGIS) 수치지형도와 하수도시설 GIS 자료를 조사․수집하여야 한다.

(2) 하수도시설 GIS 자료가 미구축된 경우 기존 하수도대장과 대장조서 등의 자료를 조사․수집하여야 한다.

5.3.3 동일 또는 유사 공종의 건설공사 사후평가 조사 및 피드백

1) 동일 또는 유사 공종의 건설공사 사후평가 조사

(1) 서울특별시 One-PMIS(http://pmis.eseoul.go.kr), 정보소통광장(http://opengov.seoul.go.kr), 국토교통부 건설CALS 시스템(http://www.calspia.go.kr)을 활용하여 동일 또는 유사공종의 건설공사 사후평가 결과를 조사한다.

(2) 동일 또는 유사공종의 건설공사 사후평가 결과를 면밀히 검토·분석하여 본 설계(공사비 증액 및 공사기간 연장 방지, 민원 최소화 방안, 건설공사장 안전사고 방지)에 반영 해야 한다.

5.3.4 위험공종 목록화하여 안전사고 예방

1) 사고사례를 분석하여 위험공종을 목록화하고 안전사고 예방을 위한 꼭 지켜야 할 사항을 검토, 설계시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다.

(1) 지반굴착 및 흙막이공법 적용구간 안전대책(지하위험 시설물 인접공사시 안전대책)

(2) 구조물 시공 시 안전대책

(3) 우기 시 및 동절기안전대책

(4) 유지관리 종합안전대책 등

5.4 기본 설계

5.4.1 기본설계 일반사항

기본설계는 조사결과를 토대로 다음 각 호의 업무를 수행한다.

(1) 설계 개요 및 법령 등 제기준의 검토

(2) 조사 및 판독 결과의 검토

(3) 공사지역의 문화재 등에 대한 문화재지표조사 및 설계반영 필요성 검토

(4) 기본적인 구조물 형식의 비교·검토

(5) 구조물 형식별 적용 공법의 비교·검토

(6) 기술적 대안 비교·검토

(7) 대안별 시설물의 규모, 디자인의 검토

(8) 대안별 시설물의 경제성 및 현장적용타당성 검토

(9) 시설물의 기능별 배치 검토

(10) 개략 공사비 및 공기 산정

(11) 측량, 지반, 지장물, 수리, 수문, 지질, 기상, 기후, 용지조사

(12) 주요 자재·장비 사용성 검토

(13) 주요 기자재 선정 기준

(14) 경제성 분석(공사비, 시설내구연한, 유지관리비 및 주요기기별 LCC를 감안한 총비용 산정 비교)

(15) 설계도서 및 개략 공사시방서 작성

(16) 설계설명서 및 계산서 작성

(17) 관계법령 등의 규정에 따라 기본설계시 검토하여야 할 사항

5.4.2 설계기준 검토 및 설정

1) 설계 기준은 하수도시설기준 및 하수도정비기본계획(변경) 등을 참고하여 계획을 수립한다.

2) 1~3차 용역 및 ‘17년 정비사업 결과를 비교·분석하여 종합적인 설계기준을 수립한다.

5.5 실시설계

5.5.1 실시설계 일반사항

실시설계는 기본설계 결과를 바탕으로 건설공사 및 시설물의 설치·관리 등 관계법령 및 기준 등에 적합하여야 하며 시공에 필요한 설계도면 및 시방서등 설계도서를 작성하는 것으로 다음 각 호의 업무를 수행한다.

- 설계 개요 및 법령 등 제기준 검토

- 기본설계 결과의 검토

- 구조물 형식, 디자인 결정 및 설계

- 구조물별 적용 공법 결정 및 설계

- 시설물의 기능별 배치 결정

- 장비 반입구, 반입동선 및 준공 후 설비 유지관리 계획

- 각종 설비의 현장․중앙제어 및 감시계획

- 주요 기자재에 대한 성능보증 사항

- 예비품 및 특수공구 목록 제시

- 공사비 및 공사기간 산정

- 토취장, 골재원 등의 조사확인(현지조사 및 토석정보시스템 등 이용) 샘플링, 품질시험 및 자재공급계획

- 측량․지반․지장물․수리․수문․지질․기상․기후․용지조사

- 기본공정표 및 상세공정표의 작성

- 시방서, 물량내역서, 단가규정 및 구조 및 수리계산서 작성

- 과업 완료시 향후 기대되는 침수방지효과, 경제성분석, 주변환경에 미치는 영향 등을 포함하여 기대되는 효과를 작성하되 시설의 설치 및 유지관리비용, 시설로 인한 편익(직접,간접), 내구연수 등을 고려한다.

- 사고사례를 분석하여 위험공종을 목록화하고 안전사고 예방을 위한 꼭 지켜야 할 사항을 검토, 설계 시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다.

1) 지반굴착 및 흙막이공법 적용구간 안전대책(지하위험 시설물 인접공사시 안전대책)

2) 구조물 시공시 안전대책

3) 우기시 및 동절기안전대책

4) 유지관리 종합안전대책

5.5.2 하수관로의 개량 계획

1) 본 용역 설계는“하수도시설기준” 및 “하수도공사시공관리요령”에 준하여 설계한다.

2) ‘하수도 시설기준’에 따라 유속은 일반적으로 하류방향으로 흐름에 따라 점차 커지고, 관로경사는 점차 작아지도록 다음사항을 고려하여 유속과 경사를 결정하고, 토사의 퇴적 및 오수의 침전물 방지 등을 고려하여 설계한다.

(1) 오수관로

계획시간최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.6m/s, 최대 3m/s로 한다.

(2) 우수관로 및 합류관로

계획우수량에 대하여 유속을 최소 0.8m/s, 최대 3m/s로 한다.

3) 불량 하수관로의 보수․보강 방법을 결정하기 위해 하수관로의 개․보수의 판단기준을 제시하고 해당 관로에 대한 보수공법을 선정한다.

4) 굴착에 의한 교체를 원칙으로 하며, 비굴착공법은 굴착이 곤란한 지역으로 통수능에 문제가 없고 경사가 양호한 지역으로 내부보수만 시행하여도 기능유지가 가능한 관로에만 극히 제한적으로 적용을 검토한다.

5) 비굴착 공법 설계는 지방자치단체 제한경쟁계약 운영요령(행정자치부 예규 제3호, 2014. 12. 19)에 의거 시행하고 아래의 사항을 검토한다.

(1) 비굴착 공법 적용시 각 정비구간에 대하여 전체보수 공법과 부분보수 공법을 상호 경제성을 비교하여 정비공법을 선정한다.

(2) 비굴착 공법에 의한 하수관로 정비 품질관리지침서 및 연구보고서를 참고한다.

(3) 기본설계이후 도입된 다수의 하수관로 정비 신기술의 적용성을 검토한다.

6) 맨홀은 관로의 방향, 경사, 관경이 변화하는 개소, 낙차의 발생개소와 관로의 합류, 접합하는 개소에 설치한다.

7) 맨홀의 간격은 ‘하수도 시설기준’의 일반기준을 따르며 현장 여건을 고려하여 설치한다.

8) 연결관 접합시 기성제품의 연결지관(Saddle) 사용 또는 천공 후 연결관 삽입 등 공법을 확정한다.

9) 기존 하수관로는 철거 후 폐기물처리를 반영하여야 한다.

5.5.3 관종 계획

1) 관종은 하중조건을 감안하여 경제적이고 안전한 관종으로 계획하여야 한다.

2) 지하수, 하천수 등의 불명수 유ㆍ출입이 없도록 수밀성이 보장되고 내구성이 있는 관종 및 관접합 방법을 선택하여야 한다.

3) 관종 선정시에는 가능한 여러 관종을 비교하여 경제성, 유지관리성, 시공성, 부속자재 등이 우수한 관종을 선정하여야 한다.

4) 관종 선정시「하수도법」및「산업표준화법」에 의거 한국산업규격(KS) 인증자재 사용을 원칙으로 하며, 한국산업규격(KS)이 없는 경우 우수단체규격 등 관련 규격 인증 제품을 사용하여 품질관리가 가능하도록 설계한다.

5) 특히 관 파손과 관 연결부 불량시 지하수, 하천수 등의 침입수가 발생하면 도로함몰의 원인이 되므로 수밀성 및 내구성이 우수한 관종 및 관연결 방법을 선정하여야 한다.

5.5.4 관로의 접합

1) 관로의 관경이 변화하는 경우 또는 2개 이상의 관로가 합류하는 경우의 관로의 접합은 원칙적으로 수면접합 또는 관정접합을 기본으로 하되 현장여건을 감안 관저접합, 단차접합, 계단접합을 검토 후 적용한다.

2) 특히, 최대유속을 초과하는 관로를 개량하는 경우 관경변화에 대한 유무와 관계없이 단차접합 또는 계단접합을 원칙으로 하되, 사업비의 과다 및 이상 없는 관로 전체를 재 부설하여야 하므로 현장여건, 불량상태 등을 감안하여 신중하게 검토한다.

3) 단차접합은 D300mm 이상의 관로에 적용하고 지표 경사에 따라 적정 간격으로 맨홀을 설치하고 1개소 단차는 1.5m 정도를 한도로 하고 단차가 0.6m이상인 경우에는 부관을 설치한다.

4) 계단접합은 유속이 3m/sec 이상의 현장 타설 암거에 적용하고 계단의 높이는 1단당 30cm 이내로 하되 지표의 경사와 단면에 따라 계단의 길이와 높이를 변화시킬 수 있다.

5) D300mm 미만의 관로는 지표 경사와 같은 급경사로 부설하여도 되나 완경사로 변화하는 구간에서 유입수가 집중하게 되므로 하류관경 결정에는 에너지 흡수가 가능한 여유있는 관경으로 설계한다.

6) 2개의 관로가 합류하는 경우의 중심교각은 되도록 60°이하로 하고, 곡선을 갖고 합류하는 경우의 곡률반경은 내경의 5배 이상으로 한다.

7) 관로 접속이 직각인 관로는 선형변경을 검토하거나 맨홀내 인버트를 설치토록 한다.

5.5.5 관기초 계획

1) 하수도 시설기준의 관기초공 결정방법을 적용한다.

2) 관로시설은 안전성을 고려한 기초계획을 수립하여야 한다

3) 각 공사구간마다 관의종류, 토질의 지내력, 상재하중, 토압, 매설조건 등을 고려하여 구조계산 결과에 따라 적정 기초형식을 선정한다.

4) 성토구간 등 연약지반은 기초공을 실시하여 부등침하가 발생하지 않도록 설계하고 시공중 침수가 발생되지 않도록 차수 및 배수처리 방안 등을 검토하여야 한다.

5) 지반조건에 적합한 관 기초를 계획하되 기초형식은 내구성 및 경제성을 고려한 형식으로 계획하여야 한다.

5.5.6 맨홀 계획

1) 인버트의 높이는 우수관의 경우 하류관경의 1/2로써 최고 50㎝로 해야 하나 분류식 오수관에서는 하류관경의 1/2 또는 시간최대 오수량의 수위 중 큰 것으로 택한다.

2) 인버트의 종단경사는 하류관의 경사와 동일하게 하며, 상류관 저부와 인버트 저부에는 일정한 낙차를 두는데 중간맨홀에서 3㎝정도 합류맨홀에서는 3～10㎝ 정도로 한다.

3) 현장여건 및 경제성 등에 대해 여러 공법의 장․단점을 비교 검토하여 적정 설계가 되도록 하고, 맨홀 하부에 침사지는 설치하지 않는다.

5.5.7 구조물 및 부대시설 계획

1) 구조물 및 관로 부대시설은 불명수의 침입방지, 지하수의 오염이 없는 구조 계획을 수립설계 하여야 한다.

2) 구조물설계를 착수하기 전 각종 기준 및 지침의 제․개정 현황을 확인하고 설계에 적용을 검토하여야 한다.

3) 구조물은 구조적으로 안전하고 각종 하수에 의한 부식이 방지될 수 있는 시설을 반영하여 경제성과 유지관리에 유리하도록 설계한다.

4) 콘크리트 구조물 설계는 구조물별, 부위별로 콘크리트 타설순서, 타설방법, 콘크리트 종류(압축강도, 슬럼프치, 골재크기), 타설 전․중․후의 유의사항 등을 명시한다.

5.5.8 가시설 설계

1) 각종 지하매설물의 위치를 정확히 조사하여 구조물의 위치, 가시설의 굴착공법, 지장물 이설여부 판단 및 이설 방법 등을 설계한다.

2) 본 공사에 필요한 가시설은 기존 교통통행에 지장이 최소가 되는 공법을 제시하여야 하며, 가시설 및 공사에 따른 단계별 교통처리방안을 제시해야 한다.

3) 가시설은 구조물 방수작업이 가능하도록 필요한 이격거리가 확보되도록 설계하여야 한다.

4) 복공구간과 기존도로와의 접속부는 포장면 단차가 발생하지 않아야 한다.

5) 흙막이공은 터파기의 규모, 지반조건, 지하수 상태, 주위 여건 등을 고려하여 적합한 흙막이공법을 선정하여야 한다.

6) 지장물은 이전하거나, 안전하게 시공이 될 수 있도록 매달기 등 보호공을 설치해야 한다.

7) 붕괴, 파손, 과대한 변형을 방지할 수 있게 안전하고 공기의 최소화가 되도록 경제적으로 설계하여야 한다.

8) 공사중 가시설 계측방법에 대하여 검토, 반영하여야 한다.

9) 공사중 홍수대책, 진동, 소음, 비산먼지 대책을 수립하여야 한다.

5.5.9 계측 계획

1) 계측의 목적, 문제점 및 항목을 명확히 설정하도록 하여, 계측기의 선정, 설치, 빈도 등의 신뢰도가 높도록 계획한다

2) 지반조건 및 위험단면, 주변현황, 지장물 등을 종합적으로 고려하여 계획하도록 한다.

3) 계측위치는 구조물의 규모, 원지반 조건, 시공방법 등을 고려하여 계측목적에 부합되도록 선정한다.

4) 계측간격 및 측정빈도는 지반조건 및 굴착방법, 시공조건에 따라 변경 가능하도록 조절한다.

5) 계측과 병행하여 지보공 및 지질 상태를 파악, 평가하여 시공에 반영하도록 한다.

6) 계측결과와 당초 설계 조건을 비교․검토하여 시공에 반영될 수 있도록 역해석을 실시할 수 있는 자료를 제공하도록 한다.

7) 계측을 현장의 여건과 중요도에 따라 계측의 자동화 및 영구계측 시스템의 운영을 검토하도록 한다.

8) 계측기의 종목 및 수량은 계측관리 표준품셈이나 발주기관의 기준에 따른다.

9) 시공과 유지관리에 관련하여 발주기관의 별도 요구에 의한 계획을 수립한다.

5.5.10 포장 및 보도설계

1) 포장설계

(1) 포장설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량 등에 관한 조사자료를 기초로 포장구조 및 포장두께를 결정한다.

(2) 포장구조 및 공법은 기본 및 실시설계에서 제시된 사항을 적용하는 것을 원칙으로 하나 지역여건, 지형여건, 경제여건이 변화할 경우에는 변경도 가능하며, 이 경우 구체적인 검토가 필요하다.

(3) 포장설계는 “도로포장 구조설계요령(국토교통부)”을 사용하도록 한다.

(4) 시멘트콘크리트포장은 줄눈 및 표면처리에 대해서 상세하게 설계하도록 한다.

(5) 길어깨포장은 폭우, 강설 등으로 인한 세굴 및 파손방지와 유지관리를 고려하여 설계하도록 한다.

(6) 포장층은 동결심도 이상의 충분한 동결방지층을 두어 포장구조의 동결을 방지하여야 하며, 동결심도는 “도로 동상방지층 설계지침”에 의거 결정하여야 한다.

(7) 포장구조 및 단면해석에 필요한 포장특성치와 물성치는 도로포장에 적용할 포장공법으로부터 설정토록 한다.

(8) 포장설계는 형식 및 주요인자를 비교․ 검토하여 최적의 설계가 되도록 하고 특히 교량상부 포장형식은 토공부 포장과의 연속성, 건설 후 유지관리, 시공성, 저소음 등을 비교 검토하여 적정한 포장형식을 결정한다.

(9) 구조물과 접속부 및 신구포장 경계면에서 발생하는 단차가 포장파손의 원인이 되므로 이에 대한 대책을 수립 설계에 반영하여야 한다.

2) 보도설계

(1) 보도관련 공사 설계 지도・점검 이행

- 보도포장 관련 공사(설계) 시행기관 및 부서에서는 설계용역 준공 전(디자인 심의 대상 사업의 경우에는 심의 완료 후) 사업개요, 사업설명서, 설계도서(설계도, 공사시방서) 등을 서울시 보도환경개선과에 제출하여 점검을 받고 점검 지적사항에 대한 조치계획서를 제출하여 승인받아야 한다.

(2) 설계도면, 공사시방서, 내역서 작성

- 보도포장 전문기술교육 전문기술교육 이수 의무화, 도시화로 인한 불투수 면적 증가에 따른 도시 물환경 변화 문제점 해결을 위하여 투수성 포장 설치 원칙 등이 반영되도록 공사시방서 작성한다.

- 내역서 작성시 건설공사 표준품셈을 활용하여 작성하되, 현장에 대한 사전조사를 철저히 하여 각 현장 실정에 맞게 각종 할증률을 반영하여 공사중 통행불편 및 공사하자 등을 사전 예방토록 한다.

(3) 설계 시 준수사항 : 보도 유효폭 2m 준수, 횡단경사 2% 이내 준수 등

(4) 재료 선정시 주의사항 이행

- KS 및 서울시 관련 지침에서 정한 기준을 통과한 제품을 적용 한다.

(5) 보도공사 설계는 보도공사 설계시공 매뉴얼(서울특별시)에 따른다.

5.5.11 교통처리 계획

1) 교통운용계획

조사・분석된 자료를 근거로 하여 차로수에 대한 적정성을 검토․결정하고 교통개선효과를 분석, 신호 체계운영 방안을 검토하여 최적의 교통소통이 이루어지도록 한다.

2) 기존 도로체계 검토

인접 간선도로 연결과 확장 및 개선으로 인해 파생되는 기존 도로체계에 미치는 교통영향을 분석하고 이에 따른 대응방안을 검토하여 제시한다.

3) 공사 중 교통처리계획 수립

공사 중 교통처리계획은 다음 사항을 면밀히 고려하여 이용시민의 불편을 최소화 할 수 있는 계획을 수립하여야 한다.

(1) 공사 중 신호체계 운영계획, 공사 시행방안별 교통운영 효과 분석과 V/C 분석 및 용량부족 시 용량 증대 방안 등을 강구

(2) 지하, 지상 지장물의 이설

(3) 우회도로 조사

(4) 야간공사의 필요성 검토

(5) 공사일정에 따른 도로점용 변화상황과 교통소통방안 검토

4) 작업공간 확보

교통처리계획 수립 시에는 장비의 작업동선, 자재 적치공간, 각종 환경방지시설 설치공간 등의 작업공간을 감안하여야 한다.

5) 교통소통대책 수립

원활한 교통소통과 교통안전을 위하여 안전시설(안전표지, 차선도색, 반사가드레일 등)을 설계에 반영하여야 한다.

5.5.12 기 타

1) 관로의 종류는 하수도 시설기준을 참고한다.

2) 맨홀 및 맨홀 뚜껑의 종류와 적용은 하수도 시설기준 참고한다.

3) 인버트 및 부관의 설치는 하수도 시설기준 참고한다.

4) 구조물 및 관로 부대시설은 불명수의 침입방지, 지하수의 오염이 없는 구조 계획을 수립하여야 한다.

5) 준공 시(성과품) 하수도전산시스템관리 DB 관련자료 일체 제출하여야 한다.

6) 관련기관 협의사항에 따라 주요 사항내용이 변경될 경우 필요시 관련계획, 설계를 검토 보완 또는 통보한다.

7) 과업내용서 대로 적용이 어렵거나 대안이 유리할 경우 발주기관의 승인을 받아 적용하여야 한다.

8) 용지조사는 다음과 같은 내용을 포함하여야 한다.

(1) 지장물 및 소유자 확인

본 과업에 편입되는 용지 및 지장물을 정확히 조사하고, 지목별, 지장물별(가옥, 수목 등)로 지번과 소유자를 확인하여야 한다.

(2) 조사 자료의 제출

지적조사에 따라 편입되는 용지에 대한 토지등기부등본 및 토지대장, 지장물에 대한 지장물 현황조사를 용지도와 함께 발주기관에 제출하여야 한다.

(3) 조치사항

보상 및 공사에 영향을 줄 수 있는 서울특별시의 각종 인․허가 사항을 조사하여 과업수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

5.6 재정계획 및 사업 추진 계획

1) 소요사업비는 사업내용별로 구분하고 산출기준을 제시하여야 하며 공사비, 설계용역비, 시설물 유지관리비 및 정보관리시스템(GIS) 보완에 소요되는 구축비용 등으로 구분한다.

2) 소요사업비 산정 시 구간별 적용 가능한 굴착공법(Open Cut공법, 가시설공법, 차수공법), 추진(압입)공법, 비굴착보수공법 등을 검토하여 반영하여야 하며, 시공 시 발생될 수 있는 지장물 이설비용 등을 반영하여 실질적인 공사비용을 산정하여 제시하여한다.

3) 재정계획은 사업우선순위를 고려한 연차별 투자계획 또는 단기, 중장기로 구분하여 제시토록 한다.

4) 사업비 산정은 표준품셈 및 제반규정에 의거 물량과 단가를 산정하고 적용된 단가는 조달청 발행 “가격정보”지 등의 최근호 단가로 계산한다.

5.7 유지관리 및 자산관리 방안

5.7.1 유지관리

1) 금회 하수관로에 대한 조사 결과를 고려한 유지관리 대상관로 선정은 다음과 같다.

(1) 하수관로는 사전에 유지관리 통한 예방조치를 통해 관로 기능을 상시 유지하여야 한다.

(2) 관로현황조사 결과를 반영하여 노후 관로나 불량 관로로 판정된 하수관로는 중점 유지관리 대상관로를 선정하여 정비완료시까지 유지관리하여야 한다.

(3) 악취(황화수소)가 발생하는 관로
주로 오수의 부패 냄새에 의한 것으로 관로 자체의 원인(최소유속 미달, 역경사, 관로내부 이상, 토사퇴적)을 검토하여 정비완료시까지 유지관리하여야 한다.

(4) 관로내 퇴적량은 많은 관로
지역성, 관경, 경사 등에 따라서 편차가 있으나, 조사결과 자료를 통해 파악할 수 있으므로 정비완료시까지 유지관리를 한다. 퇴적물은 자연적 퇴적과 불법 투기로 인한 퇴적물이 있으므로 그 구별을 명확하게 하여야 원인파악이 가능하다. 자연적인 퇴적의 경우 황화수소 악취와 같은 관로 자체의 원인과 관로 파손에 의한 외부 유입으로 주변지반의 공동화가 발생할 수 있으므로 관로 및 주변 현황에 대한 세부적인 검토를 통해 정비대책을 수립하여 정비를 완료한다.

2) 일반적인 하수도시설물의 관리주기는 다음 표와 같으나,

경과년수	맨홀,관로	역사이펀	맨홀펌프	우수토실	토구	오수받이	빗물받이	수문
0~30년	3년 1회	1년 1회	월 1회	2년 1회	1년 1회	3년 1회	3년 1회	반년 1회
30년이상	1년 1회	1년 1회	월 1회	1년 1회	1년 1회	3년 1회	3년 1회	반년 1회

관로시설은 각각 부설된 여건이 다르므로 과거 유지관리 정보(점검 및 조사결과, 관로시설의 중요도, 경과년수, 장소 등)를 기초로 특히 중점적으로 관리해야 할 관로는 다음과 같다.

(1) 건설 후 50년을 경과한 관로

(2) 건설 후 30년이 경과한 관로

(3) 과거에 이상을 발견한 관로

(4) 맨홀에서 이상이 발견된 관로

(5) 주요 간선 도로에 부설된 관로

(6) 과역 피난장소, 주변의 도로나 긴급용 피난 통로에 부설된 관로

(7) 연약지반에 부설된 관로

(8) 지하수위가 높은 지역에 부설된 관로(관로내 침입우려)

(9) 지하수위가 낮은 지역에 부설된 관로(지중으로 하수 유출 우려)

3) 하수관로는 지하에 매설되는 관계로 시공이 끝나면 주변여건 및 경제적인 문제로 인한 관로의 개․보수가 타 사업처럼 원활하게 이루어지기가 어려우므로 매설된 관로를 항상 시공당시 관로상태로 유지관리하는 것이 매우 중요하므로 아래 사항을 고려하여 유지관리계획을 수립토록 한다.

(1) 문제점

∙ 하수 관로내 오물 불법투기로 인한 토사퇴적

∙ 관로내 지장물로 인한 CCTV 카메라 촬영 및 준설작업의 어려움

∙ 하수도대장의 관리부실(정확성 결여, 자료의 누락, 변동자료의 미기록)

∙ 준설장비의 재래식 및 준설요원 확보 곤란

∙ 타 지하매설물로 인한 시설 및 개량공사의 어려움

∙ 주민에 대한 홍보 부족(오접, 폐기물 불법투기)

∙ 공사후 레미콘 등 폐기물 불법투기

(2) 개선방안

∙ 관경별 준설 및 청소방법 제시

∙ 건설공사의 잔류물, 일상생활의 쓰레기 등을 맨홀이나 하수관로로의 불법투기를 억제하는 홍보활동 강화

∙ 관로내 설치된 상수도관, 도시가스관, 통신케이블 등 장애물은 이설 또는 제거토록 한다.

∙ 하수도와 관련된 각종자료의 전산화 또는 정기적인 재 작성으로 자료관리 철저

∙ 부실시공 방지를 위한 CCTV조사의 활용 및 확대

∙ 지하매설물 종합관리체계 확립

∙ 홍보활동 강화 및 방지대책 수립

4) 유지관리비는 적용되는 대응시설물에 대한 시설물별, 단계별로 구분하고 그 산출기준을 제시하며, 시설별 내구연한 및 시기 등을 고려(펌프시설의 경우 기자재의 내구연한 등, 하수관로의 경우 준설 및 점검횟수 등)하여 산정 한다.

5.7.2 자산관리

1) 자산관리는 비용을 최소화하고 최적의 서비스를 제공하기 위한 모든 단계를 가이드하는 지속적인 과정을 말하며, 하수관로 시스템 구축을 통해 효율적인 자산관리가 이루어지도록 하여야 한다.

2) 하수도전산관리시스템내 자산관리항목을 추가하여 공사 준공 및 조사완료후 자산관리시스템에 입력할 수 있도록 하여야 한다.

3) 사용연수별 노후도를 기준으로 자산관리를 통한 관로를 평가하고 관리하도록 투자 및 유지관리 계획을 수립하여야 한다.

5.8 사업의 효과분석 실시

본 과업이 완료되면 향후 기대되는 경제성분석, 주변환경에 미치는 영향 등을 포함하여 기대되는 효과를 작성하되, 시설의 설치 및 유지관리비용, 시설로 인한 편익(직접, 간접), 내구연수 등을 고려한다.

6.0 성과품작성 및 납품

6.1 일반사항

1) 성과품 작성기준

계약상대자는 성과품 작성 시 “서울특별시 설계용역관리편람”및“건설공사 설계도서 작성기준”에 의한 작성기준에 따라 작성하여 발주기관 검토 후 제출하여야 한다.

2) 성과품의 인쇄

모든 성과품 인쇄는 발주기관과 협의 후 실시하여야 하며 발주기관의 요구에 따라 작성하여 제출하여야 한다.

3) 도면상의 문자, 숫자

도면상의 문자는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나, 한글사용을 원칙으로 하고 숫자는 아라비아 숫자를 사용한다.

4) 하수도관리 전산시스템 데이터로 입력될 각종 자료는 하수도관리 전산시스템에 탑재되어 시스템 사용자에게 제공 될 수 있도록 조치하여야 한다.

5) 기본 및 실시설계 이후 하수관망도 전산화 과정에서 관로번호 체계가 변경되었으므로 관로조사 결과, 수리계산서, 설계도면 등 모든 자료는 기본 및 실시설계 관망도가 아닌 하수도 GIS 관망 자료를 기준으로 작성하고, 모든 도면의 기본도는 수치지형도를 사용한다.

6) 최종 성과품은 하수도관리 전산시스템 보유 데이터 갱신에 활용될 수 있도록 하수도 GIS DB 관리부서와 긴밀히 협의하여 설계하여야 한다.

7) 기본 및 실시설계 단계별 설계의 경제성 등 검토(설계VE) 결과를 최종 보고서에 수록하고 설계서에 반영한다.

6.2 성과품 납품시기

1) 성과품의 납품은 건설기술심의 납품(필요시), 최종 성과품 납품, 공사발주 시로  구분 한다

2) 모든 성과품의 인쇄는 발주기관과 협의하되 발주기관의 방침 등에 따라 성과품 종류, 수량 및 제작방법이 변경 될 수 있다.

3) 건설기술심의 시에는 최소 10일전에 제출하며, 최종 성과품은 과업수행 종료일부터 3일 이내 납품 한다

6.3 성과품의 구성 및 내용

1) 종합보고서 작성

(1) 표    지

(2) 제 출 문(용역수행업체의 대표이사 명의)

(3) 참여기술자(명단, 생년월일, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)

(4) 목    차

(5) 위 치 도

(6) 과업의 목적

(7) 과업의 개요(내용), 과업수행 지침

(8) 조사 및 분석(측량, 지장물조사, 노후․불량관 조사, 지반 및 지하수위조사 등)

(9) 설계기준

(10) 관련계획 검토사항

(11) 노후 및 불량 하수관로 평가 방안 검토

(12) 서울시 하수관로 정비 방안 및 사업우선순위 선정

(13) 기본 및 실시설계

(14) 사업비 산정내용

(15) 유지관리 시설계획

(16) 부록 (각종 조사자료,  주요 기본 및 실시설계 도면 및 협의, 지시사항, 주요자재 및 공법 선정 ․ 비교, 승인된 설계VE 제안 반영 내용 등)

※ 총공사비가 50억원 이상인 경우 설계의 경제성 등 검토 시행결과 발주기관이 승인한 설계VE 제안사항에 대한 조치계획서를 작성․제출하고, 설계내용에 수정․반영 및 그 결과를 수록

(17) 기술자문회의 지적사항에 대한 반영여부와 보완내용.

(18) 실명화를 위해 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업 참여기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자 주민등록번호는 공공기관의 개인정보에 관한 법률 제9조의 규정에 의거 개인정보 누출방지를 위하여 뒷자리를 암호화 처리한다.

(19) 기타 발주기관 요구 사항

(20) 기본 및 실시설계 완료후 건설사업 수행내용(건설공사 사후평가 수행지침 참고)

사업명	기본 및 실시설계				공사비 증가시 재검증		증감율 및 변동사유
	용역비 (백만원)	수행기간	추 정 공사비 (백만원)	추 정 공사기간	실시여부 (○, ×)	미실시時 사유	기본 설계비 증감율	기본 설계기간 증감율	공사비 증감율	공사기간 증감율	비고
		년 월 일 - 년 월 일		○년 ○○개월

2) 요약보고서 작성

(1) 표    지

(2) 제 출 문(용역수행업체의 대표이사 명의)

(3) 참여기술자(명단, 생년월일, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)

(4) 목    차

(5) 위 치 도

(6) 과업의 목적

(7) 과업의 개요(내용), 과업수행 지침

(8)~(13) 종합보고서 작성 참조하여 간략히 작성

(14) 결언

3) 기본 및 실시설계 도면

(1) 일반사항

① 기본 및 실시설계 도면에 포함될 사항

∙ 표지, 목차

∙ 위치도 및 전체계획 평면도

∙ 표준단면도, 종단면도

∙ 표준 구조물도

∙ 표준 부대시설도 및 상세도

② 설명문의 기입

설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성하여야 하며, 도면내용을 이해하기가 어렵거나, 해석상 혼란이 발생할 소지가 있는 부분은 설명문을 기입하여야 한다.

③  표제란

도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

④ 서명, 날인

모든 설계도면에는 과업책임기술자, 분야별 책임기술자, 심사자, 설계자, 제도자의 서명 또는 날인을 한다.

(2) 도면의 작성

① 표준단면도의 작성

표준 단면도는 하수암거, 맨홀, 작업구, 기타 부대시설물로 구분하여 작성하며 표준도에 사용되는 도면, 부호는 상세히 표기한다.

(3) 도면의 축척

① 지하매설물도

▪ 색인도면 : 배수구역 계통도와 통일

▪ 지하매설물도 및 지상구조물도 축척 : 1/3,000

▪ 표시내용 : 하수관로 관로번호 및 유로방향, 맨홀 표시, 지하매설물(전기, 상수도, 통신, 가스, 기타로 구분) 맨홀 및 노선방향, 버스 및 택시 정류장, 지상 구조물의 위치 및 기초 형상, 시행중이거나 계획중인 재개발 및 재건축 위치, 공동구 등

② 개 ․ 보수(신설)도

▪ 색인도면

▪ 평면도

- 축척 : 1/1,000(기본 및 실시설계 도면 활용)

- 개․보수 대상관로 이외에는 노선, 맨홀, 유향 및 관로번호, 우․오수 받이만 표시

- 개․보수(신설관로 표시) 대상관로는 평면도 상에는 기존의 관로 현황(관로 및 맨홀번호, 관경, 연장, 관저고, 지반고, 유향, 경사, 우․오수받이)를 표시하되 정비대상 하수관로의 기호를 표시하고, 개량후의 관경, 관저고, 유향, 경사는 (  )내에 표시

▪ 종단면도

- 축척 : 종 1/100

- 기존관로의 관경 및 관저고, 토피고, 지반고, 변경관로의 관경, 관저고, 경사

- 맨홀의 형상, 위치, 깊이 등

- 횡단하는 지하구조물(매설물)

- 기존관로는 파선으로 표시하고 정비관로는 실선으로 표시

- 유입관로 표시는 유향의 좌측에서 유입하는 경우 좌측으로 유입선을 표시하고 우측으로 유입하는 경우 우측으로 유입선 표시 및 하수관로별 기호 표기

③ 구조물 상세도 : 적정 축척 사용

(4) 정비대상 하수관로별 기호 표시 방법은 다음과 같다.

① 전체교체 : 합류식 관로

전교-합

, 우수관로

전교-우

, 오수관로

전교-오

② 부분교체 : 합류식 관로

부교-합

, 우수관로

부교-우

, 오수관로

부교-오

③ 전체보수 : 합류식 관로

전보-합

, 우수관로

전보-우

, 오수관로

전보-오

④ 부분보수 : 합류식 관로

부보-합

, 우수관로

부보-우

, 오수관로

부보-오

⑤ 병용관로 : 합류식 관로

병용-합

, 우수관로

병용-우

, 오수관로

병용-오

⑥ 배수구역 변경관로:

합류식관로

변경-합

,   우수관로

변경-우

,   오수관로

변경-오

⑦ 신설관로 : 합류식 관로

신설-합

, 우수관로

신설-우

, 오수관로

신설-오

⑧ 기존관로 : 합류식 관로

기존-합

, 우수관로

기존-우

, 오수관로

기존-오

4)공사시방서

(1) 공사시방서는 공사계약 문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료등과 시공절차,방법,기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

(2) 특별히 포함되어야 할 사항

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선 순위, 설계도서 검사의무 등에 관한 상세사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

⑤ 수급인이 작성하여야 할 시공상세도 목록

⑥ 수급인이 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법,시기 및 절차 등에 관한 세부사항

⑦ 발주기관과 계약상대자 사이의 책임범위 및 한계

⑧ 각종검사,기성지급,설계변경 등에 대한 절차,방법,시기

⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

⑩ 주요 공종별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요 인원 등에 대한 상세한 규정

⑪ 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

⑫ 기타 주요 공사 사항

(3) 공사시방서 작성시 유의사항

① 공사시방서는 전문용어를 사용하고,정확하고 완전하며 간단 명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고,되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

④ 공법 및 공종에 맞는 자재,장비,인원을 선정한다.

⑤ 공종 전반에 대해 기술하며,목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

⑥ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

⑦ 공사기성에 관련된 사항을 이해가 명확하도록 한다

⑧ 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 수급인, 감리자등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

⑨ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

⑩ “시공상세도 작성지침”에 따라 시공상세도 작성목록을 제시하여야 한다.

(4) 시공상세도 작성비용은 엔지니어링 사업대가 기준에 따라 산정하여 포함하여야 한다.

(5) 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용)를 계상한다.

(6) 신설·개량되는 공공 하수시설에 대해 절대측량에 의한 공공측량을 실시하고, 공공측량 성과 심사를 받아 서울시 하수도관리 전산시스템 GIS DB 서버에 탑재될 수 있도록 측량비 및 공공측량 성과심사비용을 반영한다.

(7) 보험료 산정

공사 손해보험료를 계상하기 위한 보험료율은 보험개발원, 손해보험회사 등으로부터 자료를 충분히 조사하여 적정한 요율을 산정하여 설계에 반영한다.

6.4 납품

1) 성과품 납품시기

(1) 모든 성과품의 인쇄는 발주기관과 협의하되 발주기관의 방침 등에 따라 성과품의 종류, 수량 및 제작방법이 변경될 수 있다.

2) 설계심의 제출자료

납 품 목 록		수 량	비 고
․ 기본설계 보고서		10부
․ 주요 계산서		10부
․ 지질 및 지반조사 보고서		10부
․ 기본설계 예산서	기본설계내역서	10부
	기본단가산출서	10부
	기본수량산출서	10부
․ 기본설계도면		10부
․ 기타 성과자료		1식

3) 최종성과품의 종류 및 납품부수

성 과 품 종 류		수 량		비 고
		책자 및 도면	CD-ROM
노후 관로 조사 보고서		20부	3부
기본 및 실시설계 보고서 및 부록		20부	3부
각종 계산서		20부	3부
기본 및 실시설계 도면		20부	3부
공사시방서		20부	3부
설계예산서	설계설명서	20부	3부
	설계내역서	20부	3부
	단가산출서	20부	3부
수량산출서		20부	3부
관로 CCTV 및 육안 조사서		10부	3부
측량 및 지형조사서		10부	3부
하수도전산관리시스템(GIS DB)관련자료		1식	3부
측량원도 및 야장		1식	3부
불탐관로 조서 및 야장		1식	3부
기타 자료		1식	3부

[별표1]  분야별 참여 기술자 명단

용역기간 :  착공년월일 ～ 준공년월일

발주기관 ○○○○                   확인자 : 용역감독자(직위) ○○○  (날인 또는 서명)

분야	소 속	회사내 직 위	직책	성 명	생년월일 (기술인협회 등록번호)	참여기간	용역과업수행내용	자격종목 및 등록번호	날인

<주>

․ 분야 : 1. 엔지니어링기술진흥법 시행령 별표1-3의 업무범위 및 전문분야에 열거된 분야

2. 주요 구조물에 대하여는 상기 외에 별도책임기술자로 하여금 수행할 시는 구조물명이나 공사명으로 분야를 기재

※ 예 : 교량, 부두, 하수처리장의 처리시설

․ 직책 : 분야별에서 수행시의 책임정도로써 책임기술자(p.m) 분야별 책임기술자, 참여기술자로만 분류

․ 자격종목 : 국가기술자격법상의 자격을 기재하고 하단에 등록번호를 기재

․ 수행내용기재 : 분야별 책임기술자 중심으로 주요시설물에 대한 수행한 핵심공법을 파악할 수 있도록 기재, 향후 책임한계를 명확히 할 수 있도록 과업내용서상의 업무내용을 위주로 상세하게 작성

[별표 2] 하수관로 정밀조사서

사업명	노후불량 하수관로 종합실태조사 및 기본 및 실시설계		조사자	홍길동	보고서번호	p0001-1
발주기관	서울시		조사방법	CCTV	조사일자	2015. 4. 25
처리구역	A 처리구역		배수구역	a 배수구역	배수분구	a 배수분구
조사위치	00로 00지		조사목적	지반침하	노선명	a 노선
관로번호	설치연도	관종	관경	배제방식	매설깊이	총연장	조사길이
PA-1001	1988	H.P.	800	합류식	2	50	50
맨홀부	번호	맨홀E.L	관저고	깊이	맨홀뚜껑	인버트	맨홀결함
시작맨홀	PA-1001-1	15.10m	13.74m	0.21m	주철	무	부식 A
끝맨홀	PA-1001-2	13.61m	12.26m	0.22m	주철	유
구조적등급	최대값: 좋음 / 평균값: 좋음			운영적등급	최대값: 부실 / 평균값: 매우좋음
미주행여부	25m 부근에서 관파손으로 인한 미주행			종합판단 및 조치계획	지반침하가 진행중이며, 관로 굴착교체 예정

[하수관로 정밀조사서 작성요령]

1. 정밀조사 현황자료를 다음과 같이 입력한다.

가. 처리구역 및 분구: 해당관로를 포함하는 처리구역 및 분구명 기입

나. 위치: 해당관로 위치 정보를 기재(주소, 일반위치)

다. 조사일자 및 목적: 관로 조사일자와 조사 목적 기입

라. 관경 및 길이: 원형관은 직경을 기입하며, 사각형관은 가로×세로길이를 mm단위로 입력하며, 맨홀과 맨홀사이의 관로연장은 m단위로 기입

마. 관종: 해당관로의 재질은 상기표를 참고하여 약어를 기입하며, 관로 매설방식 암거, 개거, 측구 중 한 가지 입력

바. 배제방식(배수방식): 합류식, 분류식 우수관로, 분류식 오수관로로 구분기재

사. 관로번호: 하수도관리대장(도면)상의 관로번호 기재하며, 동일 처리구역에서 동일관로번호가 발생하지 않도록 주의하여 기재

아. 맨홀번호: 하수도관리대장(도면)상의 맨홀번호를 기재하며, 확인이 어려울 경우 상단관로와 하단관로 번호 기재

자. 맨홀E.L: 맨홀의 깊이 기입

차. 관저고: 시작 및 끝의 맨홀과 연결되어 있는 관로의 관저고 기입

카. 깊이: 관로에 흐르는 하수 깊이를 측정하여 기입

타. 맨홀뚜껑: 맨홀 뚜껑의 종류 기재

파. 인버트: 맨홀의 인버트 유무 기재

하. 맨홀결함: 맨홀의 구조 및 운영적 결함 여부 입력

거. 조사길이(총주행거리): 해당관로의 전체길이 중 실제 조사를  완료한 길이를 입력하며, 만약 완주를 하였다면 관로 길이값을 입력

너. 미주행 방향 및 사유: 관로 조사 시 장애물 등으로 인한 미주행발생시 사유 및 지점 입력

더. 구조 및 운영적 등급: 맨홀과 맨홀사이 관로 전체 연장에 대한 양호도를 판정하여 등급 표기

2. 기타

○ 하수관로 이상에 따른 지반침하 발생 시 지상현장 사진을 첨부한다.

○ 거리는 조사가 시작된 맨홀중심으로 결함 이상항목 또는 특이상태까지의 거리를 의미하며, 육안조사 시 줄자 등을 이용하여 거리를 확인한다.

○ 맨홀에 대한 결함발견 시 관련사진을 첨부한다.

○ 조사결과서는 아래한글 또는 CCTV 조사프로그램을 이용하여 작성한다.

○ 조사결과를 확인 수 있는 담당자와 연락처를 기재한다.

○ 측량조사 미실시 구간의 맨홀 깊이, 관저고는 하수도관리대장 상의 내용을 기입한다.