위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방행정타운 공사 관련 설계변경 요청

1. 관련문서

가. 소방행정과-7042(2018.3.22.)호 “서울소방행정타운 2단계 전문훈련시설 공사 조기착공 요청”

나. 소방행정과-3298(2018.2.05.)호 “소방행정타운 1단계 추가공사 및 2단계 공사 사업의뢰”

2. 위와 관련하여 현재 추인중인 소방행정타운 시설공사 중 2단계 전문훈련시설 공사부지에 대하여 공정 일부를 다음과 같이 설계변경 요청 하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 요청사항

1) 2단계 공사부지(A계곡) 내 도로 및 기반공사 변경

○ 2단계 전문훈련시설 부지내 시설배치가 미확정으로 설계시 도로 등 변경으로 토목 공사 재검토

○ 도로 등 변경으로 우수관로 변경

2) 부지내 도로 등 변경으로 전기(가로등), 통신(방송, CC카메라) 공사 재검토. 끝

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
담당자	김영민		단장	박정경		소방행정과장	03/29 김선영
협조자
시행	소방행정과-7659	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 중구 퇴계로 2가 52 소방행정과 소방행정타운 추진단	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	3706-1394	/전송	3706-1329	/		/	대시민공개