문서번호	정수시설과-2667
결재일자	2018.3.29.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박희준		代이해승	03/29 윤창진
협 조

2017년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

추진실적 및 설계변경 계획

2018. 3.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2017년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

추진실적 및 설계변경 계획

우리정수센터 전기설비의 원활한 유지보수를 위하여 시행 중인 『2017년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)』와 관련 추진실적 및 설계변경 계획을 보고 드림

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2017년 광암아리수정수센터 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2017. 6. 7. ～ 2018. 3. 31.

○ 총공사부기금액 : 70,288,940원

○ 계약상대자 : (주)한양산전 대표 윤용호

○ 공사규모

- 정수센터 전기설비 예방정비 및 고장 발생시 긴급 보수

□ 전기설비 유지보수 추진 실적

○ 1회차(1차 기성, 2017.12.28.)

차수	작업기간	작업내용	소요예산	비고
1차	7. 6. ~ 8.11.	-청담유량계실 등기구 선로교체 -전염소투입동 전기실 입구 센서등 설치 -여과지동 전기실 배선기구 교체 -착수정 밸브실 환풍기 교체 및 신설 -탈수기동 조명시설 선로교체	3,442천원
2차	9.13. ~10.16.	- 중계펌프동 1층 회로분리(격등) 1층 환풍기 스위치 설치, 지하층 스위치 이설 및 회로분리, 연결통로 조명기구설치 - 활성탄흡착지 지하 투광등 회로분리 및 스위치 이설 지하복도 레이스웨이 오존동 지하 투광등 회로분리 - 사여과지 기계실 배수펌프 제어반 설치	15,118천원
3차	10.17. ~11.30.	- 농축조 제어반 전력케이블 교체 (전염소투입동 전기실→농축조 제어반) - 외등원격제어반 설치(5개소)	38,889천원
계			57,449천원	1차기성완료

○ 2회차

차수	작업기간	작업내용	소요예산	비고
4차	18.3.19. ~ 3.28.	- 관리본관 LED가로등 보수 - 정수지 LED 보안등 회로분리 - 염소실 및 전염소 인젝터실 배관정비 - 관리본관(2층) 대기전원 차단장비 설치 - 관리본관 지하 배수펌프 센서교체 - 자동제어시스템 서지보호기 설치 - 변압기 온도 계측장비 교체 - 중계펌프 기동반 콘덴서 교체 - 관리본관 계측기실 제어케이블 설치 - 탈수기동 및 회수조 펌프실 제어판넬 개량 - 탈수기동 노후조명시설 철거 - 고도처리회수조 지하 투광등 설치	17,611천원
계			17,611천원

□ 설계변경

○ 설계변경 사유 : 제4차 작업결과 물량 증감 및 신규물량 발생

○ 설계변경 내용

- 계약기간 : 변경없음

- 총공사부기금액

변 경 전	변 경 후	증 ․ 감 액
70,288,940원	75,060,000원	(증)4,771,060원

- 시공물량 (상세내역 별첨)

구 분	공 종	비 고
물량 감소	LED 등기구 교체 및 에이밍 등 3건
신규 물량	관리본관 LED가로등 보수 등 11건	4차작업지시물량

※ 계약업체의 “국민연금보험료, 국민건강보험료, 노인장기요양보험료” 미가입에 따른 정산

□ 조치의견

○ 상기와 같이 4차 공사시행 중 발생한 시공물량 증·감, 신규공종발생에 따른 변경사항에 대하여 설계변경심의위원회를 개최하고자 하며,

○ 심의결과를 반영하여 설계변경 하고자 함.

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부, 검증 확인서 1부.  끝.