문서번호	기전설비과-2590
결재일자	2018.3.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
안상정	조성태	유성종		03/30 구아미
협 조
	기획예산과장		代이호성
	재무회계과장		박병식
	시설과장		송병욱
	주무관		임은비

수유6배수지 건설공사(증설) 전기분야 발주계획

2018. 3.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	수유6배수지 건설공사 기본및실시설계용역
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

수유6배수지 건설공사(증설) 전기분야 발주계획

안정적인 급수체계 구축을 위해 시행 중인 수유6배수지 건설공사와 관련하여 전기분야 발주계획을 수립하여 보고 드림

Ⅰ		추진근거

◯ 급수계획과-4335호(2015.06.25.) 수유6배수지건설공사 지방재정 투자심사 분석 계획

◯ 시설과-9206호(2017.10.19.) 수유6배수지 건설공사 시행

Ⅱ		사업개요

◯ 사 업 명 : 수유6배수지 건설공사(장기계속사업)

◯ 사업위치 : 서울시 강북구 수유동 산84-5번지 일원

◯ 사업기간 : 2017.12.13.~2020.5.30.(토목공사 시행중)

◯ 사업목적 : 배수지 적정 체류시간 확보(당초 6.1hr → 확장 후 12hr)

◯ 사업규모 : 배수지 확충(3,100㎥), 송・배수관부설(500~600㎜, 연장 990m)

◯ 총사업비 : ********(토목・조경・기계 : 3,969백만원, 전기:421백만원)

※ 토목・조경・기계 분야 시설안전부 시설과 : 수유6배수지 건설공사 시행

Ⅲ		전기분야 추진계획

□ 전기공사 개요

◯ 공 사 명 : 수유6배수지 전기공사

◯ 공사기간 : 2017.4.~ 2020.5.30.

◯ 공사금액 : *********

(단위 :천원)

사업비 계	도급비	관급자재비	비고
*******	*******	******* ************** *************** ************* ************

◯ 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산(수유6배수지), 시설비및부대비(시설비)

◯ 공사내용

구 분	주요 공사내용
전 기	배관배선공사, 건축전기설비공사, 계측제어배관공사
계측제어(관급)	계측제어기자재 설치
CCTV설비(관급)	CCTV 5대설치

Ⅳ		발주방법

□ 전기공사

◯ 발주사유

- 수유6배수지 건설(토목)공사가 실시 중이며 금년도에 접지공사와 배관일부 매입설치를 위한 전기분야 공사 발주 필요

◯ 도급비 :*********

◯ 발주방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 추정가격이 5억미만 전기공사로 법인등기부상 본점소재지가 서울인 업체로 제한

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조 제1항 제6호

◯ 공사기간 : 2018.04. ~ 2020.05.30.(장기계속공사)

- 1차 : 착공일 ~ 2018.12.31.(14,510천원)

- 2차 : 2019.1.1. ~ 2019.12.31.

- 3차 : 2020.1.1. ~ 2020.5.30.

□ 관급자재 구매

◯ 관급비 : *********

◯ 구매대상 : 계측제어, CCTV설비, 초음파유량계 및 조명기구

◯ 구매방법 : 조달구매

◯ 구매시기 : 공사진행 사항을 고려하여 설치 시기가 도래하는 자재별 조달구매

Ⅴ		추진일정

◯ 2018.3.29. : 계약심사의뢰(본부 재무회계과)

◯ 2018.4.5. : 사업발주 및 입찰공고

◯ 2018.4.11. : 공사계약 및 착공

붙임 : 실시설계 보고서, 공사시방서, 설계내역서, 설계도면 각1부.  끝.