문서번호		안전치수과-4993		주무관		하수관리팀장	안전치수과장		건설안전교통국장
결재일자		2018.4.2.
				최지훈		장현준	함명수		04/02 김기운
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
	『4ㆍ19혁명 국민문화제 2018』관련 행사장 인근 하수시설물 점검 및 준설계획 보고
2018.4.2.
강 북 구 (안전치수과)

『4ㆍ19혁명 국민문화제 2018』관련

행사장 인근 하수시설물 점검 및 준설계획 보고

자유·민주·정의의 4·19민주이념 계승 발전을 위한 『4·19혁명 국민 문화제 2018』의 원활한 추진을 위하여 행사장 주변의 하수시설물을 점검하고 지적사항에 대해 정비하고자 함.

Ⅰ		행사개요

□ 행사명: 4·19혁명 국민문화제 2018

□ 기  간: 2018. 4. 13.(금) ~ 4. 19.(목) (7일)

□ 장  소: 국립4·19민주묘지 및 강북구 일원

Ⅱ		추진근거

□ 『4·19혁명 국민문화제 2018』개최계획 통보【문화체육과-4194(’18. 2. 23.)】

Ⅲ		점검 및 정비계획

□ 점검구간: 도봉로, 구청앞길, 노해로, 한천로, 4ㆍ19로(5.3km)

□ 점검일시: 2018. 4. 4.(수) ~ 4. 9.(월) 4일간

□ 노선별 현장 점검 (인원 : 5명)

① 도봉로(수유사거리 ~ 우이교 교차로) - 1.1km: 조광희

② 구청앞길 - 0.4km: 김근홍

③ 노해로(수유사거리 ~ 쌍문교) - 1.7km: 최지훈

④ 한천로(강북구청사거리 ~ 수유2동주민센터) - 0.9km: 이지용

⑤ 한천로~4ㆍ19로(수유2동주민센터 ~ 4ㆍ19민주묘지) - 1.2km: 김문희

□ 점검내용: 빗물받이 파손 사항, 빗물받이 토사퇴적 사항, 하수맨홀 파손 사항,

악취발생 사항 등

□ 정비기간: 2018. 4. 9.(월) ~ 4. 13.(금) 5일간

□ 정비내용: 점검 지적사항 정비

□ 정비방법: 경미한 사항은 기동반에 작업지시하여 즉시 보수조치 하고, 즉시 보수가

어려운 사항은 하수시설물 및 하수도 준설 연간단가 업체에 작업지시

하여 정비시행

Ⅳ		향후 계획

□ 점검결과에 따라 『4ㆍ19 혁명 국민문화제 2017』 행사 전에 하수시설물 보수 및       빗물받이 청소 등을 완료하고 행사일인 4. 13. ~ 4. 19.에는 행사장 인근지역에       대한 공사를 전면적으로 일시 중지

붙임  4.19 국민문화제 대비 하수시설 점검 위치도 1부.  끝.