준공(납품)기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 홍제천 상류 자연성회복 및 경관복원 기본계획 수립 용역

나. 계약업체 : 동부엔지니어링(주) , ㈜동해종합기술공사, ㈜종합건축사사무소 다담

다. 계약금액

- 총차분 : 일금육억칠천팔백이십칠만원( ￦ 678,270,000)
- 2차분  : 일금삼억칠천팔백이십칠만원( ￦ 378,270,000)
․동부엔지니어링(주) 69.3%         ￦ 262,141,000

․㈜동해종합기술공사 20.7%         ￦ 78,302,000

․㈜종합건축사사무소 다담 10.0%    ￦ 37,827,000

라. 총차 계약일자 : 2016. 10.  7.(2차: 2017. 10. 16)

마. 총차 착수일자 : 2017. 10. 11.(2차: 2017. 10. 16)

바. 총차 준공기한 : 2018.  4.  3.(2차: 2018.  4.  3)

2. 위 용역의 준공(납품)기한을 다음과 같이 연기 조치하여  주시기 바랍니다.

가. 연기기한

- 총차 : 2018. 6. 29.

- 2차 : 2018. 6. 29.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 기본계획 완료전 투자심사를 이행하기 위해 공공투자관리센터 타당성검증 등 사전절차 수행에 따른 절대공기 부족으로 준공기한을 연기코자 함

2018년   4월   일

하천관리과장 손경철 (인)

서울특별시(분임)경리관 귀하