공 사 설 명 서

1. 건  명 : 배움관 승강기(장애인 겸용) 설치 공사

2. 위  치 : 서울시 서초구 남부순환로 340길 58(서초동 391)

3. 목  적 : ‘79년 준공된 배움관에 장애인, 임산부, 교통약자를 장애인 겸용 승강기를 설치하여 교육 및 근무환경을 개선 하고자 함

4. 공사개요

□ 건축규모 : 바닥면적 9㎡ 내외 승강기 설치 (지상 3개층 운행)

기존건축물 외벽부에 연결하는 승강기(장애인 겸용) 설치

□ 구조 및 용도 : 철골구조, 승강기

□ 지붕 및 외벽 : 지붕(철골트러스 위 패널), 외벽(베이스패널+접합유리)

5. 공사금액 : 금190,630천원(부가가치세 포함)

구 분	합 계	도 급 비	관 급 비	이 전 비
건축(토목+기계)	190,630천원	190,630천원	0	0

※ 전기공사 : 별도 시행

6. 공사기간 : 착공 후 5개월

□ 절대공기 : 45일

□ 공사위치가 건물 내 중정에 위치하여 평일은 교육과정에 지장을 초래하므로 소음 발생 공정은 주말(공휴일) 진행이 불가피하여 총 공사기간을 5개월로 산정 함

(※ 총 공사 기간은 계약 후 공사 추진 경과에 따라 단축 또는 연장할 수 있으며 공사가 조기에 완료되어 총 공사기간이 단축되는 경우 단축되는 기간에 관계없이 계약기간을 변경 공사를 준공처리할 수 있음)

7. 특기사항

□ 본 공사는 교육원 내에서 진행되는 공사로 공사소음을 최소화 하는 초지가 요구됨

(공사용 가설시설물은 평일 교육진행에 불편을 최소화 하도록 설치하여야 함)

□ 공사차량 출입 시 안전사고 예방을 위하여 교통지도 요원 배치가 요구됨

□ 토공사는 철거공사 후 필히 발주처와 협의, 공법변경 등 승인 후 추진

- 운반경로(20km) : 인재원 – 남부순환로 – 영동대로 – 올림픽대로 – 미사지구 – 현장

(공사 착공 후 토사 반출 시 사토장 조건에 따라 사토장이 변경될 수 있음)

□ 공사현장 집입로에 우면산 등산로가 위치하여 공사 중 등산객의 안전한 보행이 가능하도록 필요할 경우 안전시설 설치를 철저히 이행하여야 함

8. 입찰참가자격 : 건설산업기본법에 의한 토목건축공사업(또는 건축공사업) 면허를 소지하여야 하며, 공고일 전일부터 계약체결일까지 계속 서울특별시에 주된 영업 소재지를 둔 자.

9. 하자담보책임기간 : 건설산업기본법에 의한 하자담보 책임기간

10. 기타

□ 공사에 필요한 관공서 인·허가 등은 도급자가 필하고 소요비용은 도급자 부담으로 한다.

□ 우리원 인계전까지 전기·수도 등 공공요금과 시운전 도급자 부담으로 한다.

□ 이 공사는 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 반영공사로써, 기초금액에 반영된 금액을 조정 없이 계약 내역에 반영해야 한다.