문서번호	인재기획과-16348
결재일자	2017.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
협 조
	주무관
	주무관

인재개발원

배움관 승강기 설치 계획

2017. 11

인재개발원

인재기획과

배움관 승강기 설치 공사 추진계획

배움관은 전면 3층 (사무·교육) 공간과 후면 1층(교육) 공간으로 건립되어 인재개발원 교육 및 행정업무의 핵심공간으로 활용되고 있으나 38년 이상 경과하여 변화하는 교육환경에 적합한 기능개선의 일환으로 승강기를 설치, 장애 교육생 및 직원의 이동성 편의를 향상시키고자 함

Ⅰ		필 요 성

❍ 배움관 건물현황

- 규  모 : 지하1층, 지상3층  연면적 6,408㎡

- 구  조 : 철골·철근콘크리크조

- 준  공 : 1979.8.31

- 용  도 : 공공업무시설(교육연구 및 복지시설)

❍ 장애인편의시설 설치 규정

- 설치근거 : 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

- 대상시설 : 경사로, 출입구, 화장실, 승강기

- 설치현황 : 경사로, 화장실(‘17년 옥외화장실 준공)

※ 경사로 : 현행 경사도 규정(1/12)에 미달

Ⅱ		추진 방향

❍ 사회적 약자를 위한 편의시설 개선 및 선제적 확충

- 승강기 : 법률 규정상 의무 설치 대상은 아니나 배움관의 우리 시 전 직원의 교육기관으로 장애 교육생 입교 비율이 높아 승강기 설치가 필요함

- 경사로 : 경사로 설치 규정에 적합하도록 개선

※ 기존 경사로를 경사도(1/12)에 접합하도록 개선, 편리한 교육환경 조성

(‘18 개선사업 예정 : 배움관 외부 경사로, 강당 내부 경사로)

❍ 설계용역을 통해 승강기 및 경사로의 기능과 경관이 우수한 디자인의편의시설 설치

❍ 타 시·도 교육기관보다 우수한 경쟁력 확보 및 교육생 복지향상에 기여

Ⅲ		추진 개요

❍ 추진기간 : 2018.01. ~ 2018.09(9개월)

- 설계용역 : 2018.01. ~ 2018.03

- 공사발주 : 2018.04. ~ 2018.05

- 공사추진 : 2018.05. ~ 2018.09

※ 소음발생 공종 : 주말 공사 추진

❍ 추진규모 : 승강기 및 기존건축물 연결구간 설계용역

❍ 추진내용 : 승강기 설치 (장애인 겸용, 3개 층 운용)

❍ 사 업 비 : 217백만원 (철거공사 및 전기공사비 포함)

- 설계비 : 17백만원, 공사비 : 200백만원,

- 예산과목 : 인재원청사 보수ㆍ보강, 시설비

❍ 추진방법

- 설계용역 : 수의계약 (전기설계 포함)

- 공사발주 : 제한경쟁입찰 (전기 공사 별도 발주)

Ⅳ		행정사항

❍ 공사기간 중 소음발생 공종 : 주말공사 추진

- 공사 소음으로 인한 교육과정 진행에 차질 발생 방지

❍ 기존건축물과 연결구간 구조 검토

- 배움관 복도와 연결구간에 대한 구조안전 검토

❍ 철거 공사 시 기존건축물 안전성 확보

❍ 관련부서 사전협조 (교육 및 채용 관련 소음발생 공정 사전 협의)