문서번호	토목부-5778
결재일자	2018.4.4.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

		시 민
주무관	도시고속도로과장	토목부장
남덕희	代박운용	04/04 김영수

건설폐기물처리용역 준공기한연기 검토보고(1차 2회)

(노들섬 특화공간 조성 토목공사)

2018. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

건설폐기물처리용역 준공기한 연기 검토보고(1차 2회)

(노들섬 특화공간 조성 토목공사)

본 공사 1차분 준공기한 연장예정에 따라 잔여 건설폐기물처리를 위하여 1차분 준공기한을 연기하고자 검토 보고 드림

□ 관련 근거

○ 폐기물처리용역 기간연장요청(유탑노들 제18-45호, `18.3.30.)

□ 용역개요

○ 용역명 : 노들섬특화공간조성 토목공사 건설폐기물 처리용역

○ *******************

○ 용역규모 : 폐콘크리트 11,854톤, 폐아스콘 1,006톤

○ 용역기간 : 전체  2017.11.13 ~ 2018.12.20

1차  2017.11.13 ~ 2018. 4.10

○ 계약금액 : 총괄 348,447,000원(1차 218,790,000원)

□ 준공기한 연기 검토

○ 연장사유 : 노들섬특화공간조성 토목공사의 공사기간에 맞추어 폐기물처리를 진행하고자 연장조치

- 노들섬특화공간조성 토목공사(1차)기한 : `18.4.10.→`18. 6.14

○ 용역기간 변경내용

구분	변경 전	변경 후	증 감
전체	2017.11.13.~2018.12.20	2017.11.13.~2018.12.20	변경없음
1차(2회)	2017.11.13.∼2018. 4.10	2017.11.13.~2018. 6.10	증) 61일

○ 계약금액 내용

구분	변경 전	변경 후	비고
전체	348,447,000	변경없음
1차	218,790,000	변경없음

□ 조치 계획

○ 노들섬 특화공간 조성 토목공사(1차) 준공기한(2018.6.14)에 맞추어 건설폐기물처리용역 준공기한 연기

- 1차 준공기한 : 2018.4.10. → 2018.6.10.

○ 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음

○ 지체상금부과 여부 : 미부과

붙임 : 1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.