문서번호	총무과-3541
결재일자	2018.4.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		총무과장		서울물연구원장
임승용		고채현		04/04 정득모
협 조

<서울물연구원 청사 연구(실험)실 증축 공사>

건축사 감리용역 시행계획

2018. 4.

서울물연구원

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

「서울물연구원 청사 연구(실험)실 증축 공사」

감리용역 추진 계획(안)

「서울물연구원 청사 연구(실험)실 증축 공사」 의 건축공사 (건축, 토목, 기계)에 대한 공사 감리 용역을 시행하고자 함.

□ 사업개요

○ 사 업 명 :「서울물연구원 청사 연구(실험)실 증축 공사」건축사 감리용역

○ 위   치 : 광진구 천호대로 716-10(연구원 본관 후면 부지내)

○ 총공사비 : 2,927,744천원(건축․토목․기계 : 2,209,464천원)

○ 사업규모 : 지하1층~지상4층(721.17㎡), 1층 필로티

* 기존건축물 연면적 7,657.21㎡(본관․별관 2개동)

○ 도입시설 : 공공업무 및 연구시설(교육실, 사무실, 실험실 4개소등)

○ 공사기간 : 착수일로부터 17개월

□ 추진경위

○ 2016.02.09 증축관련협의(광진구 건축, 공원녹지, 도시디자인과)

○ 2016.06.16. 설계경기 실시 당선작 선정
○ 2016.07.11 증축설계공모 실시설계 용역 계약

○ 2016.08    경관 심의 및 지반조사 실시 완료

○ 2016.11. 30 증축 실시설계 완료

○ 2018. 1.    청사 증축 예산 배정

○ 2018. 3. 27 공용건축물 협의 완료(광진구)

□ 예산 현황(`18년~`19년)

(단위 : 천원)

구분	확보예산	예산집행계획(2018년 당해예산)			2019년 소요예산
합계	1,500,000	시설비	감리비	시설부대비	1,450,000
		1,400,000	100,000	감리비예산 사용

* 시설부대비 중 2018년 에너지 절약 계획서 용역 비용(금5,500천원) 포함

□ 감리용역 발주계획(안)

○ 용 역 명 : 서울물연구원 청사 연구(실험)실 증축 건축사 감리용역

○ 용역금액 : 25,098,000원(VAT 포함)

※ 기술용역타당성 심사결과에 따라 조정될수 있음.

○ 용역기간 : 착수일로부터 17개월(단, 공사기간에 따라 변경될 수 있음)

○ 업무범위 :

- 건축법 및 건축사법에 의한 공사감리업무로서 건축법 제25조 및 동법 시행령      제19조 및 동법 시행규칙 제19조의 2 규정에서 정하는 업무

- 건축, 토목, 기계공사에 대한 감리업무 등 기타 발주처가 필요로 하는 사항

○ 계약방법 : 전자공개수의계약(공개경쟁)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조의 자격요건을 갖춘 자이고 건축사법에 의한 건축사 면허를 소지하고 건축사사무소 개설등록을 필한 자로서, 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 서울특별시에 소재한 업체

○ 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 서비스장비 확충 및 환경개선, 시설비 및

부대, 감리비

□ 향후계획

○ 2018. 4.  : 기술용역 타당성 심사(기술심사담당관)

○ 2018. 6.  : 감리용역 발주 및 계약 착수

○ 2019. 10.  : 공사준공

○ 2019. 11.  : 감리용역 준공

□ 기타 행정사항

○ 전기․통신․소방분야 등 공종별 별도 발주 추진(배급수연구과)

○ 기술심의용역관리시스템 입력(감리용역별)

붙임 : 1) 감리용역비 설계서 1부.

2) 과업지시서 1부.

3) 기술용역 타당성 심사 요청서(안)   끝.