별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(2공구)

◦ 요청번호 : 2018 -  26호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2018.04.07 시 간 : 09:00～18:00	휴 일	도봉지하차도 육상구간	시공사	○	○
			발주청
			감리사
작업내용	- 본선 터파기 및 가시설 작업 - 본선 구조물 작업 - 안전시설물 점검 및 보수 - 우천,강설시, 현장 정리 정돈

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018. 04. 04

현장대리인  정 우 석 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

-----------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2018 - 26호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
작업일 : 2018.04.07 시 간 : 09:00～18:00	위험공종 없음 단순작업으로 감리근무 없음	-	-	-

2018. 04. 04

책임감리원  김 용 균 (인)

도시기반시설본부장 귀하

별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(2공구)

◦ 요청번호 : 2018 - 27호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2018.04.08 시 간 : 09:00～18:00	휴 일	도봉지하차도 육상구간	시공사	○	○
			발주청
			감리사
작업내용	- 본선 터파기 및 가시설 작업 - 본선 구조물 작업 - 안전시설물 점검 및 보수 - 우천,강설시, 현장 정리 정돈

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018. 04. 04

현장대리인  정 우 석 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

-----------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2018 - 27호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
작업일 : 2018.04.08 시 간 : 09:00～18:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요함	책임감리원	김 용 균

2018. 04. 04

책임감리원  김 용 균 (인)

도시기반시설본부장 귀하별첨서식 #1】

<작업장별 감리원 및 현장책임자 배치현황>

- 작업장 개소가 많은 경우 (동부간선도로확장공사 2공구)

구 분		1구역	2구역	3구역	4구역	5구역	6구역	비고
연 장		440m	340m	260m	135m	250m	475m
공사내용 (공정률)		토공,가시설작업 구조물작업	토공, 가시설작업	공사완료	공사완료	공사완료	공사완료
평일	작업장
	현 장 책임관	공사 과장
	감리원	감리원 2명 순회근무
휴일	작업장
	현 장 책임관	공사 과장
	안 전	안전관리자
	감리원	감리원 1명 순회근무

범례

작업구간