＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰 (서울고교사거리~뱅뱅사거리간 송배수관정비공사외 3건 교통소통대책 수립 용역)

우리사업소에서 시행중에 있는『서울고교사거리~뱅뱅사거리간 송․배수관정비공사 외 3건 교통소통대책 수립 용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기요청 하오니 변경계약 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명: 서울고교사거리~뱅뱅사거리간 송․배수관정비공사 외 3건 교통소통대책 수립 용역

나. 계약업체: 주엔지니어링(주)  대표 이은경

다. 계약금액: 금34,393,550원(금삼천사백삼십구만삼천오백오십원)

라. 준공기한 연기

- 당 초: 2018. 4. 9.

- 변 경: 2018. 5. 9.

마. 귀책사항: 없음

바. 지체상금 부과여부: 미부과

사. 연기사유: 자문회의 심의결과에 따른 승인 조건 및 보완사항 등을 처리하기 위한 절대 공기 부족

붙임: 1. 준공기한 연기 보고 1부

2. 관련공문 및 합의서 1부

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	김진성		시설관리과장	04/06 박은선
협조자
시행	시설관리과-6243	(		)	접수		(		)
우	03741	서울시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 시설관리과(4층)	/
전화	02-3146-4906	/전송	02-3146-4939	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개