문서번호	설비부-4720
결재일자	2018.4.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
추한영		유병기	04/09 권오식
협조
	경리과장		최정수

『서울소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사』

물탱크 납품업체 파산에 따른 조치계획 검토보고

2018. 4.

도시기반시설본부

설  비  부

『서울소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사』

물탱크 납품업체 파산에 따른 조치계획 검토보고

“서울소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사(3차)” 관급자재(물탱크) 구매와 관련하여 계약업체가 파산되어 그 후속 조치를 보고드림

공사개요

규    모 : 지하2층/지상15층, 연면적 25,174㎡, 본관동 외 5개동

주요설비 : 냉난방 및 환기설비, 위생 및 소방, 신재생에너지 등

공사기간 : 2016.5.~2018.4.

도 급 비 : 7,436백만원(3차 3,487백만원)

시 공 사 : 삼천리엔지니어링(주)외 1개사

물탱크 계약 및 납품 현황

(단위 : 천원)

품 명	규 격	수량	계약금액	납 품 현 황	비고
계			184,539
저수탱크	PDS, 95톤	1 대	37,253	미납품
	PDS, 600톤	1 대	147,286	납품(시운전이행증권 제출)

조치경과

2017. 03. 27.  물탱크 납품요구

2018. 02. 08.  업체 파산

2018. 02. 26.  계약이행여부 조회

2018. 03. 05.  계약이행 불가 회신(파산관재인)

2018. 03. 20.  미납품된 물탱크 별도 구매 계약

2018. 03. 27.  시운전 성능이행 보증금 지급 보험금 청구

************

******************

********************

******************************

***************************************

조치계획

***********************************

*******************************

****************************

*******************************************

*******************

****************************************

***************************************

***********************

****************************************************

************************

************

*****************

****************************************

***********************************************

행정사항

건설총괄부로 세입세출외현금 고지서 발급의뢰

따로붙임  1. 납품요구서 1부

2. 시운전 이행보험증권 1부

3. 조달청 3자단가 계약 서류 1부

4. 파산관재인 계약이행 여부 회신 1부

5. 파산선고 결정 공고문 1부. 끝.