준공기한 연기 의뢰서

1. 용역개요

가. 용  역   명 : 가양대교 정밀안전진단 용역

나. 계  약  자 : 한국시설안전공단 대표 강영종

다. 계 약  금 액 : 금560,800,000원(금오억육천팔십만원)

라. 계약년월일 : 2017.  6.  28.

마. 착수년월일 : 2017.  6.  30.

바. 준공예정일 : 2018.  4.  25.

2. 준공기한연기

○ 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한

- 당 초 : 2018년   4월 25일

- 변 경 : 2018년   5월 31일

나. 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 용역 준공 전 건설기술심의(’18.4.18.) 결과 반영을 위한 절대공기 부족

2018. 4.

작 성 자 : 주무관             김 대 희  (인)

확 인 자 : 교량안전과장      한 유 석  (인)

서울특별시 경리관 귀하