문서번호	시설과-1149
결재일자	2018.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
협 조
	전략기획실장
	주무관
	주무관

서울대공원 건축시설물 정밀점검 및 내진성능평가 용역 실시 계획(안)

2018. 3.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

서울대공원 건축시설물 내진성능평가 용역 실시 계획(안)

서울대공원 건축시설물에 대하여 지진발생 대비 내진성능평가  용역을 실시하고, 우선순위에 따라 시설물의 내진성능을 확보하여 지진 등 재해로부터 인명 및 재산피해를 예방코자 함

Ⅰ		추진근거

○ 지진·화산재해대책법 제15조 및 제16조

- 기존 시설물의 내진보강기본계획 수립 및 내진보강 추진 등

○ 건축법시행령 제32조 제2항(구조안전의 확인)

－ 2층 이상 또는 연면적 200㎡ 이상 건축물(‘17. 12. 26. 개정)

※ 종전법에 의거 2층 이상 또는 연면적 500㎡ 이상 건축물 내진성능평가용역 실시

○ 서울대공원 공공시설물 내진보강 계획(원장방침 시설과-1952호(‘17. 4. 8))

－ 시설물별 연차적(‘18년 ~ ‘25년)으로 건축물 내진보강 추진

Ⅱ		추진계획

○ 대공원 내 내진성능 미 확보 건축물에 대한 내진성능평가 실시

－ 건축 시설물 34개소(연면적 : 55,114㎡)

○ 위탁시설 / 내진설계가 적용된 시설물은 제외

－ 총 52개소 중 18개소 (서울랜드 16개소, 기린나라, 야행관)

○ 내진성능평가 결과에 따라 시설물별 내진보강 우선순위 결정 및 예산확보 후 단계별 보강시행

Ⅲ		용역개요

○ 용 역 명 : 「서울대공원 건축시설물 정밀점검 및 내진성능평가 용역」

○ 소요예산 : 276,000천원

－ 예산과목 : 서울대공원, 공원 이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능      및 야생동물 종 보존, 공원 안전시설 보수 및 정비, (100-401-01)    시설비, 〔건축시설물 내진 보강공사(200,000천원), 건축시설물 정밀            점검 및 보수보강(76,000천원)〕

※ 부족예산은 「건축시설물 정밀점검 및 보수보강」예산 76,000천원 사용

○ 용역기간 : 2018. 5 ~ 2018. 10(착수일로부터 180일간)

○ 대상시설물 : 서울대공원 내 34개소(대상시설물 내역 첨부)

○ 용역 진행

착수계 제출		착수 보고회		중간 보고회		최종 보고회
계약후 7일 이내		착수후 30일 이내		준공 90일 전		준공 30일 전

※ 보고회 시 기술자문 병행 실시(분야별 자문위원 3인 이상)

○ 내진성능평가 주요 사항

－ 정밀점검에 준한 현장조사 실시

－ 자료검토 : 외관조사망 도면 등 각종 자료 검토

－ 외관(육안)조사 및 비파괴 검사 : 부재실측, 콘크리트 상태 조사 등

－ 내진해석 : 시설물 구조해석 및 계산을 통한 평가

－ 내진보강 방안 및 내진보강 공사를 위한 도면 및 공사비 내역서 산출

－ 내진보강 우선순위 선정 등

Ⅳ		입찰방법

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰

○ 입찰 참가자격

－『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제28조』에 의거 안전         진단전문기관(건축 또는 종합분야)으로 등록된 업체

－ 국토교통부 ‘기존 시설물(건축물)내진성능 평가요령’ 평가자의 자격에 따라      건축구조기술사 또는 이와 동등한 자격을 가진 구조전문가를 보유한 업체

○ 업체선정 방법

－ 건설기술진흥법 시행규칙 제28조 제1항2호『건설기술용역업자 등의 선정』  기준에 따른 사업수행능력평가(PQ)방식에 의거 선정(용역비 1억원 이상)

－ 건설기술진흥법 시행령 제52조 제1항『건설기술용역업자 등의 선정』기준에  따른 사업수행능력 평가 전 가격입찰 실시(용역비 5억원 미만)

Ⅴ		추진계획

○ 2018. 3. : 사업계획서 방침

○ 2018. 3. : 기술용역 타당성 심사 및 입찰공고

○ 2018. 4. : 사업수행능력평가 및 용역계약

○ 2018. 5. : 용역 착수

○ 2018. 6. : 착수 보고회

○ 2018. 8. : 중간 보고회

○ 2018. 9. : 최종 보고회

○ 2018.10. : 용역 준공

붙임 : 내진성능평가 대상시설물 현황.  끝.