“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	치수과-8766		주무관	치수팀장		치수과장		안전교통국장
			정영상	윤석빈		강태근		전결 04/24 박은섭
등록일자	2018.4.23.
결재일자	2018.4.24.
공개구분	부분공개(5)
			협조자
					재무과장		代강순성
					계약팀장		代이현희

- 2018년 관내 하수도 준설공사(연간단가) -

설계변경 시행계획(1차)

□ 설계변경 사유

- 우기대비 공공하수관로 배수불량 및 하수악취 민원 해소를 위한 준설 및 세정 실시 공종별 물량 증·감사항 발생에 따른 설계변경(1차)

□ 주요물량 증·감 현황

구 분	규 격	단위	수 량				비 고
			당초	변경	증·감
흡입준설	25ton, 13ton	㎥	390	900	증)	510
세 정	D=450㎜~600㎜	m	130,000	130,176	증)	176
버켓식견인흡입준설		㎥	300	630	증)	330
인력준설	규격 1.8미만	㎥	1,990	750	감)	1,240
기계준설	로더 0.25	㎥	5,100	1,410	감)	3,690

□ 공사비 증·감 현황

(단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증 · 감	비 고
도급비	계	1,875,736,320	1,875,736,320	0
	공급가액	1,703,396,655	1,703,396,655	0
	부가가치세	170,339,665	170,339,665	0
	품질시험비	2,000,000	2,000,000	0

2018. 4.  .

	강 남 구
(		치수과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 • 동법 시행령 제74조 제1항
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 공공하수관로 배수불량 및 하수악취 민원 해소를 위한 설계변경
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당 없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 지역주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ○ ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ------------------ ( ● ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ------------------ ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ------------------ ( ) ④ 미래행정 수요예측 ------------------ ( ) ⑤ 시장조사 ------------------ ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ---- ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ------------------ ( ● ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ------------------ ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ------------------ ( )
	•
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음.
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 2018년 관내 하수도 준설공사(연간단가) -

설계변경 시행계획(1차)

관내 하수도 준설공사(연간단가) 시행과 관련하여 예산범위내에서 효율적인 하수관로 유지관리 및 우기대비 공공하수관로 배수불량, 하수악취 민원 해소를 위한 준설 및 세정 실시에 따른 공종별 계약물량 조정 설계변경(1차)을 시행하여 주민생활 불편을 해소코자 함.

Ⅰ	사 업 개 요

공 사 명 : 2018년 관내 하수도 준설공사(연간단가)

사업기간 : 2018.2.7.~2018.12.31.

공사개요

❍ 흡입준설 390㎥, 세정 130,000m, 버켓식견입흡입준설 300㎥

❍ 인력준설 1,990㎥, 기계준설 5,100㎥ 등

총공사비 : 1,875,736천원

시 공 사 : ㈜임천엔니지어링 ******외 1개사

Ⅱ	보 고 내 용

우기대비 공공하수관로 배수불량 및 하수악취 민원 해소를 위한 준설 및 세정실시에 따른 계약금액 범위 내에서 공종별 물량 증·감사항 반영 설계변경

❍ 주요물량 증·감 현황

구 분	규 격	단위	수 량				비 고
			당초	변경	증·감
흡입준설	25ton, 13ton	㎥	390	900	증)	510
세 정	D=450㎜~600㎜	m	130,000	130,176	증)	176
버켓식견인 흡입준설		㎥	300	630	증)	330
인력준설	규격 1.8미만	㎥	1,990	750	감)	1,240
기계준설	로더 0.25	㎥	5,100	1,410	감)	3,690

❍ 공사비 증·감 현황                                            (단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증 ․ 감	비 고
도급비	계	1,875,736,320	1,875,736,320	0
	공급가액	1,703,396,655	1,703,396,655	0
	부가가치세	170,339,665	170,339,665	0
	품질시험비	2,000,000	2,000,000	0

❍ 계약금액조정 검증 결과 : 적정

Ⅲ	조 치 계 획

상기 보고 내용과 같이 계약금액 범위내에서 계약물량 조정 설계변경(1차) 후 기성준공 및 사업시행하여 조기집행율 향상에 기여하고, 하수관로의 효율적인 관리로 침수예방 및 주민생활 불편해소에 만전을 기하고자 함.

첨부 1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 작업지시 검토보고(1, 2차) 각 1부.  끝.