문서번호	주거환경개선과-4450
결재일자	2018.4.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주거환경행정팀장	주거환경개선과장
정윤진	양성태	04/25 유철호

양천구 신월1동(곰달래꿈마을) 주거환경관리사업

정비기반시설 공사비 재배정 계획

2018.04.

도시재생본부

(주거환경개선과)

양천구 신월1동(곰달래꿈마을) 주거환경관리사업

정비기반시설 공사비 재배정 계획

양천구 신월1동 곰달래꿈마을 주거환경관리사업 관련하여 정비기반시설 공사비 요청이 있어 이를 검토하고 예산을 재배정하여 원활한 사업이 진행되도록 추진코자 함                        ※ 재배정 총액 : *********, 부서 : 양천구(균형개발과)

1		사 업 개 요

○ 위    치 : 양천구 신월1동 232번지 일대

○ 면    적 : 45,754㎡

○ 용도지역 : 제1·2종(7층)일반주거지역

○ 인구 및 가구수 : 2,109명, 964세대, 185동

○ 종합계획도(안)

2		추 진 경 위

○ `14.06.02         : 주거환경관리사업 대상지 선정

○ `14.10.20         : 정비계획 수립 용역 착수 ((주)유아컨설턴트)

○ `14.11 ~ `15.12   : 주민참여형 정비계획 수립 (주민설명회 및 워크숍 총 26회)

○ `17.03.23         : 정비구역 지정 및 지형도면 고시 (서울시고시 제2017-106호)

○ `17.07.12 ~ 12.08 : 정비기반시설 기본 및 실시설계

○ `17.12.07          : 기본 및 실시설계 중간보고

○ `18.04.19          : 정비기반시설 공사비 예산재배정 요청

3		재배정 계획

□ 사업내용

연번	구분	세부공정		실시설계 중간보고	발주계획		증감액	비고
				규모(개소)	규모(개소)	공사비
1	도로 포장	어린이보호구역 재도색		1	1	500
2		패턴포장	교차부	5	5	77,093
3			골목길	6	6
4			이면도로	2,130㎡	2,130㎡
5			안심길	6	6
6	안전 시설물	반사경 설치		4	4	2,481
7		CCTV	신설	4	6	238,955		안심벨대체
8			개선	5	5
9		안전벨 신설		13	-	-		연동시스템 미구축
10	청소환경	모아모아하우스 신설		2	-	-	감)62,817	인근주민 반대
11	쉼터 및 녹지조성	화단조성		6	6	153,924
12		담장개선		18	18
13		광고물 부착방지		45	45	3,185
총 공 사 비				538,955	476,138		감)62,817

(단위 : 천원)

□ 예산 재배정

○ 사업명 : 양천구 신월1동(곰달래꿈마을) 주거환경관리사업 정비기반시설 공사

○ 재배정요청액 : *********

○ 재배정액 : *********

○ 재배정처 : 양천구 균형개발과

○ 주요 교부조건

- 양천구 신월1동(곰달래꿈마을) 정비기반시설 공사비 외의 다른 용도로 사용할 수 없음

- 구청장은 실시설계 중간보고 결과(주거환경개선과-13825, `17.12.07.)를 반영토록 검토하시고,

반드시 그 조치 결과를 서울특별시장과 협의한 후 확정토록 하여야 함

- 재배정금은 집행완료 후 소정기일 내 관계증명서를 첨부하여 정산 보고하여야 함

○ 예산과목 : 도시재생본부 주거환경개선과, 평생 살고 싶은 마을만들기 추진,

주거지 재생사업 추진(도정), 주거환경 관리사업(도정), 시설비

□ 검토결과

○ 상기 재배정액은 기본 및 실시설계 용역 및 계약심사 결과를 반영한 사항으로

*******************************************

*******************************

○ 실시설계 중간보고 결과를 반영하여 공공부문 시설을 정비하고, 자치구 관련부서 연계사업(공중선 정비사업 등) 등의 원활한 추진을 위하여 양천구청장에게 예산을 재배정코자 함.

4		향 후 계 획

○ `18.04.  : 공사비 예산 재배정

○ `18.05.  : 공사발주 및 시행

붙임  1. 시비재배정 교부 결정서 1부.

2. 예산재배정 요청(자치구) 1부.

3. 계약심사 결과(조경) 1부.

4. 설계내역서 1부.

5. 실시설계 중간보고 결과 1부.  끝.