<서식 1>

2018년 지역교통안전환경개선사업 (서울시)

【교통운영과장 : 강진동, 02-2133-2450, 사업담당 : 손태빈, 02-2133-2446】

□ 집행실적

✳ 기준일 : 2018. 4. 20. (단위 : 백만원, 국비기준)
구분	예산액	교부액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)
계
교통사고 잦은 곳	357	-	-	0

□ 추진현황

○ 교통사고 잦은 곳

- 강북구 등 6개소 : 실시설계 (2017. 8월 ~ 2018. 4월)

□ 집행부진 사유 및 대책

○ 교통사고 잦은 곳

- 강북구 등 6개소 : 유관부서(경찰청 및 구청) 협의 기간 소요

→ 2018.4월 중 유관기관 협의 및 실시설계 완료 예정

- 2018.5월 예산 재배정

- 2018.11월 사업 완료

□ 집행 전망

(단위 : 백만원, 국비기준)
구분	예산액	교부액 (A)	집행액				집행률 (B/A)
			4.20.기준 집행액	5월 집행전망	6월 집행전망	누계액 (B)
계
교통사고 잦은 곳	357	-	-	-	-	-	0

<서식 2>

2017년 지역교통안전환경개선사업 (서울시)

【교통운영과장 : 강진동, 02-2133-2450, 사업담당 : 손태빈, 02-2133-2446】

□ 집행실적

⁎ 기준일 : 2018. 4. 20.                                                   (단위 : 백만원, 국비기준)

사 업 명	′17년				′18년
	예산	집행액	이월액	불용액	이월액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)
교통사고잦은곳 개선사업	370	241	80	49	80	3	3.8%

□ 추진현황

○ 2018. 1월 예산 재배정 완료

○ 공사 시행중

□ 집행 전망

(단위 : 백만원, 국비기준)
사업명	‘17년 이월액(A)	′18년 집행액				집행률 (B/A)
		4.20.기준 집행액	5월 집행전망	6월 집행전망	누계액 (B)
교통사고 잦은곳 개선사업	80	3	34	43	80	100