＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(국사봉배수지 건설공사 송수관 부설(관악로) 도로점용공사장 교통소통대책 수립용역)

우리부서에서『국사봉배수지 건설공사 송수관 부설(관악로) 도로점용공사장 교통소통대책 수립용역』과 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 국사봉배수지 건설공사 송수관 부설(관악로) 도로점용공사장 교통소통대책 수립용역

나. 용역기간 : 2018. 2. 26.~2018. 4. 26.

다. 용 역 비 : 19,773,700원

라. 도 급 자 : ㈜동해종합기술공사 대표자 정점래

바. 설계변경 내용

구 분	당 초	변 경	비고
용역금액	19,773,700원	19,773,700원	변경없음
용역기간	’18. 2. 26. ~ ’18. 4. 26.	’18. 2. 26.~ ’18. 5. 25.	증 29일

붙임 : 1. 준공기한 연기보고서 1부.

2. 변경합의서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	라승보		시설과장	04/26 송병욱
협조자
시행	시설과-3979	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/
전화	3146-1494	/전송	3146-1529	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	대시민공개