문서번호	도시철도설비부-4121
결재일자	2018.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
전문관	차량과장	도시철도설비부장
오금석	강치석	전결 05/01 구자훈

9호선 3단계 시운전 결과 보고

2018. 04. 30.

도시철도설비부

( 차 량 과)

9호선 3단계 일일 시운전 보고

2018.04.30.(월)

□ 금일 실적

급 전	단 전	시운전 시험시간
10 : 25	16 : 02	11 : 00 ∼ 15 : 15

○ 시험내용

- 931~938역 고속주행시험(80km/hr)

- TRS 무전기 송·수신 상태 점검

○ 차량탑승인원 : 11명(상황실:3명, 본부:1명, 공사관계자:5명, 기관사:2명)

□ 본선 출입승인

구분	분 야 (공구)	회 사 명	작업 구간	작 업 명	작업 인원	작업 일시
1	토목	㈜롯데건설	934정거장 터널부	구조물 누수보수	진영민외 9명	4.30 18:00 ∼5.01 06:00
2	토목	포스코건설	921공구 쉴드터널부	구조물 누수 보수	조동일외 5명	4.30 18:00 ~5.01 04:00
3	토목	㈜대우건설	922공구 정거장, 터널	면보수	조운일외 4명	4.30 19:00 ∼5.01 06:00
4	전기 분야	서울메트로9호선운영(주)	926~931 지하터널	전차선로 일상점검	금영진외 4명	5.01 01:45 ~5.01 04:00
5	이동 통신	LG유프러스	932 본선터널	이동통신 설치	배상달외 12명	5.01 22:00 ~5.02 05:00
6	전기 분야	서울메트로9호선운영(주)	926~931 지하터널	전차선로 일상점검	김종태외 3명	5.02 01:45 ~5.02 04:00
7	이동통신	SK텔레콤	934~937 본선터널	현장실사	윤재훈외 4명 신상준외 17명 안정헌외 13명 김민성외 20명	4.30 18:00 ~5.01 04:00
8	이동통신	SK텔레콤	934~937 본선터널	현장실사	신상준외 17명 안정헌외 13명 김민성외 20명	5.01 18:00 ~5.02 04:00

□ 시운전 전동차

○ 편성번호 : 941편성(4량) 1대

○ 주박위치 : 개화차량기지 입고

□ 기타 특이사항

□ 명일 시운전 계획

○ 전동차 종합시험운행을 위한 사전점검으로 시운전 없음.    끝.