하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	위례지구 A1-13BL 아파트 전기(소방), 정보통신 공사 공기연장 보고

1. 마곡위례사업단장 방침의 건축사업부-227호[2018.01.16. 실 착공 지연에 따른 계약기간 변경 검토 보고] 및 계약부-3617호[2018.03.14. 변경계약 체결 통보(위례택지개발지구 A1-13단지 공동주택 건설공사)]와 관련으로“위례지구 A1-13BL 아파트 전기(소방), 정보통신 공사”에 대한 공사기간을 다음과 같이 변경(연기)하고자 합니다.

가. 공사개요

계약명	계약자	계약금액	착공일	준공예정일
위례지구 A1-13BL 아파트 전기공사	㈜삼흥전력 정석만 ㈜데이터렉스 김정국 대진공무(주) 박종옥	8,414,982,000	2017.07.28	2019.08.15
위례지구 A1-13BL 아파트 정보통신공사	㈜대인정보통신 유재호	3,802,434,456	2017.07.06	2019.08.15

나. 변경내역

○ 공사비 변경 : 변경없음

○ 공사기간 변경

- 당초 : 2017.07.06/07.28 ~ 2019.08.15

- 변경 : 2018.03.20/04.11 ~ 2020.04.29 (실착공일 변경)

○ 변경사유 : 선행공종인 건축공사(단지내 지장물 및 폐기물 처리, 부지 정지작업

등의 미완료로 부지 인수인계 지연)의 공사기간 연기에 따른 전기(소방), 정보          통신 공사의 공사기간 연기

○ 계약기간 변경에 따른 간접비 지급 여부 : 실착공 지연에 따른 전기(소방), 정보

통신 공사 착공일, 준공일 변경으로 선 투입된 인원이 없기에 간접비 미지급

붙임  1. 실 착공 지연에 따른 계약기간 변경 검토 보고

2. 변경계약 체결 통보[위례택지개발지구 A1-13단지 공동주택 건설공사].  끝.

부 원						파트장				기전사업부장			마곡위례스마트사업단장		05/04
		이민규						박귀서			박철규			김익성
협조자
통 제

시행			기전사업부-1208				(2018.05.04)			접수				()
방침번호
우	06336			서울특별시 강남구 개포로 621								/	www.i-sh.co.kr
전화		02-3410-7812			전송	02-3410-7727		/	ninddt@i-sh.co.kr					/	공개