문서번호	설비부-6306
결재일자	2018.5.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		열빛총괄과장
성호준		05/11 유병기
협 조
	주무관		백남진

『서울소방행정타운 건립(1단계) 정보통신공사』

설계변경 소위원회 심의 요청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 05.

도시기반시설본부

(설비부)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		설비부 : 성호준		요청일		2018년 05월 일
공 사 명	서울소방행정타운 건립(1단계) 정보통신공사
공사개요	공사규모		연면적 25,174.81㎡, 건축물6개동(지하2동~지상15층) 정보통신공사
	공사기간		2016. 06. 01. ~ 2018. 05. 31.
	감 리 사		㈜건축사사무소 건원엔지니어링, ㈜토문엔지니어링, ㈜건일엠이씨
	설 계 사		㈜토문건축사사무소, ㈜유원이앤씨, ㈜영설계엔지니어링
	시 공 사		㈜세명에스엠지
자문 안건명			물가변동 및 설계변경 요청금액의 적정성 자문				요청금액		증 51,984,420원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ☑ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 통합배선설비 간선 외 11건 변경 및 각 공종별 변경요인을 현장여건에 반영한 변경.
감리단 의견(요약) ○ 내용 : 소방재난본부의 요청사항 및 일부 설계도서 미 반영, 현장여건 변경에 의한 설계변경 요청.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경내역 1. 본관동 통합배선설비 공사(간선) 2. 본관동 통합배선설비 공사(시스템박스 내 설비추가) 3. 중앙훈련장 통합배선설비 공사(시스템박스 추가) 4. 본관동 방송설비 공사(비상연동 및 리모트앰프 추가) 5. 본관동 외2개동 출입통제설비 공사(지문,화상인식 추가) 6. 본관동 통합배선설비 접지공사(접지단자함 추가) 7. 본관동 케이블트레이 설비 공사(4~5층 케이블트레이 추가) 8. 옥외 방송,CCTV설비 공사(옥외 방송설비 추가 및 CCTV감소) 9. 옥외 CCTV설비 공사(인명구조견사 추가) 10. 본관동 A/V설비 공사(변경 및 추가) 11. 본관동 A/V설비 공사(전자교탁,전자칠판 추가) 12. IP교환기 이전설치 공사					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 1,436,515,580원 - 변 경 : 1,488,500,000원 - 증 : 51,984,420원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 통신공사
물 량 증 감 내 역 (내역서 참조)
별첨서류	1. 건설사업관리단 검토보고서 사본 1부. 2. 실정보고 사본 1부. 3. 신규자재 견적서 1부. 4. 설계변경 예정내역서 1부.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	서울소방행정타운 건립(1단계) 정보통신공사
계약금액	1,436,515,580원	계약일	2016. 05. 20.	시공사	㈜세명에스엠지
공사기간	2016. 06. 01. ~ 2018. 05. 31.	낙찰률	86.745%	설계자	㈜토문건축사사무소 외 2개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜건원엔지니어링 ㈜토문엔지니어링 ㈜건일엠이씨
공사규모	연면적 25,174.81㎡, 건축물6개동(지하2층~지상15층)			작성자	성 호 준

□ 자문안건 설계변경 현황                                                     ( 단위  :　천원 )

구 분	설 계 변 경 전			설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	1. 본관동 IDF간선 용량 부족 2. 본관동 피트니스실 시스템박스 내 설비 미설계. 3. 중앙훈련장 9층,11층 시스템박스 미설계. 4. 본관동 방송설비 비상연동 누락 및 리모트 앰프 미설계. 5. 본관동 외 2개동 출입통제 화상,지문인식 미설계. 6. 각동 접지단자함 미설계. 7. 본관동 4~5층 케이블트레이 미설계. 8. 옥외 방송 미설계. 9. 인명 구조견사-옥외 CCTV 미설계. 10. 본관동 4층 A/V설비 3개소 설계. 11. 본관동 5층 전자교탁 및 칠판 미설계. 12. IP교환기 관급 설계. 13. 제,경비(VAT포함)			1. 본관동 IDF간선 용량 적정 2. 본관동 피트니스실 시스템박스 내 V.D 추가반영 3. 중앙훈련장 9층,11층 시스템박스 내 V,D추가반영 4. 본관동 비상연동 및 리모트앰프 추가반영 5. 본관동 외2개동 출입통제 화상,지문인식 추가반영 6. 각동 접지단자함 추가반영 7. 본관동4~5층 케이블트레이 추가반영 8. 옥외 방송 추가반영 및 CCTV 감소반영 9. 인명 구조견사-옥외 CCTV 추가반영 10. 본관동 4층 A/V설비 8개소(5개소공배관) 변경 및 추가반영 11. 본관동 5층 전자교탁 및 칠판 추가반영 12. IP교환기 철거후 이전 재설치 도급 추가반영 13. 제,경비(VAT포함)	증) 1,841 증) 1.472 증) 7,705 증) 5,302 증) 5,186 증) 6,209 증) 5,874 증) 19,237 증) 5,631 증) 27,375 증) 1,144 증) 13,651 감)-48,647
공 사 비	1,436,515		1,488,500		증) 51,984
적 용 요 율	낙찰률 86.745%		낙찰률 86.745%
설계변경요구자	☑ 발주처 ☑ 계약상대자 ☑ 건설사업관리단
협의율 적용 근거	신규비목 적용단가 : 신규단가 ☓ 낙찰률(86.745%) 적용근거 : 공사계약 일반조건 제7절
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 소방(CM)제18-220호
	관련규정	공사계약 일반조건 제6절 및 제7절
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	발주처 요청 사항 및 설계도서누락, 오류, 상호모순 등
효 과	① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고 승인 – 소방(CM)제18-220호