문서번호	전시과-759
결재일자	2018.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	전시과장	학예연구부장	서울역사박물관장
이진현	정명아	박현욱	04/26 송인호

돈의문전시관 전시물 제작설치 용역 준공서류 검토

2018. 4

서울역사박물관

(전시과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	SH공사
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

돈의문전시관 전시물 제작설치 용역 준공서류 검토

SH공사로부터 돈의문전시관 전시물 제작설치 용역 준공서류 검토요청(4.16(월))에 따라 다음과 같이 관련서류를 검토하고 회신하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 돈의문전시관 실시설계 및 전시물제작설치 용역

○ 발 주 청 : SH공사(근린재생사업부)

○ 계약업체 : ㈜작품오늘(대표 : 나은영)

○ 계약기간 : 2017. 6. 27 ~ 2018. 4. 15

○ 계약금액 : 2,420,000천원

□ 추진사항

○ 2017.  6.27.	용역 착수

○ 2017.12.19.	제1회 기성(기성금액 : 728,662천원)

○ 2018.  1.31.	용역기간 연장(당초 2.28 → 4.15)

- 사유 : 동절기 야외유구 보존처리 작업중지 및 야외유구전시장 기본계획 변경

○ 2018.  2. 5.	제2회 기성(기성금액 :538,868천원)

○ 2018.  3.15.	제3회 기성(기성금액 :896,049천원)

○ 2018.  4.16.	SH로부터 준공 서류 확인요청

(준공금액 :256,421천원)

□ 검토결과

○ 설계도서 확인 및 현장 점검(2018.4.23.~25)

- 참석 : 전시과 이진현, 총무과 박지영, ㈜작품오늘 현장대리인

작 성 자	학예연구부장 : 박현욱☎724-0138 전시과장 : 정명아 ☎724-0145 담당 : 이진현 ☎ 724-0146

○ 내역 검토, 보험금 정산, 안전관련비용 확인 등 준공금 지급과 관련된 행정적인 사항은 발주청인 SH공사의 공사감독자가 면밀한 검토를 통해 처리할 수 있도록 회신

※ 건설공사 감독자 업무지침(건설기술진흥법 제49조 관련)

- (제3조제2호) ‘공사감독자’란 발주청이 발주하는 건설공사가 계획대로 원활히 진행되는지에 대해 확인 및 점검업무를 수행하는  발주청 소속 직원을 말한다.

□ 향후계획

○ 검토결과를 SH공사에 공문으로 통보

※ SH공사에서 준공검사(5월 초 예정) 후 준공금 지급.  끝.