문서번호	시설과-2915
결재일자	2018.5.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
백강석	오임석	심상원		05/15 송천헌
협 조
	전략기획실장		유연호
	총무과장		이행용
	주무관		조대복

「서울대공원 잡용수 배관 교체공사(3단계)」시행 계획

2018. 05.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「서울대공원 잡용수 배관 교체 공사(3단계)」시행 계획

◯ 서울대공원 지하구 내 노후 잡용수 배관 교체공사(3단계)를 시행하여 기반시설안전관리 및 공원 운영에 만전을 기하고자 함

⇢ 공원 내 잡용수 사용처에 양질의 지하수 공급으로 동물복지 향상

⇢ 노후시설 교체로 안전사고 예방

Ⅰ		추진근거

서울대공원 특별감사시 지적 : ‘13.12.16 ~ ’14.1.18

- 동물원내 기반시설인 난방, 소화, 잡용수배관의 조속 교체

『서울대공원 지하구』노후 시설물(관로 및 지주대) 정비 추진 계획

시설과-726(2015. 2.5)

Ⅱ		사 업 개 요

사 업 명 : 서울대공원 잡용수 배관 교체공사

사업위치 : 서울대공원 지하구내

사업기간 : 2015 ~ 2018년 단계별 시행

사업내용 : 잡용수 배관 교체 5.54㎞(80A ∼ 400A)

- 2015년 1단계 : 1.96㎞(완료)

- 2016년 2단계 : 1.59㎞(완료)

- 2018년 3단계 : 1.99km 교체 및 기존 노후배관 철거(시행 예정)

총 공사비 : 1,434,052천원

- 2015년 1단계 : 220,318천원

- 2016년 2단계 : 613,734천원

- 2018년 3단계 : 600,000천원(예산)

Ⅲ		그간 추진현황

2015. 07. 24 : 서울대공원 노후시설(잡용수 배관 및 부대시설 등) 교체공사 실시설계

2015. 12.28 : 용수공급체계 변경을 위한 잡용수 펌핑관 1.96㎞ 신설(1단계)

2016. 04.07 : 용수공급체계 변경설계 전문가 자문회의 개최

2016. 04.19  : 용수공급체계 변경 → 기존 노후 잡용수 배관교체

2016. 06.21  : 기존 노후 잡용수배관교체공사 실시설계

2017. 03.21  : 노후 잡용수배관 1.59km 교체(2단계)

※ 2017년도 예산 미확보로 사업 미실시

Ⅳ		2018년 추진 계획

공사 개요

- 잡용수 배관신설 : 1.99km(150A ~ 250A)

- 노후 배관철거 : 4.79km(80A ~ 400A)

- 큰물새장 기계실 배관 철거 : 1식

공사 추진일정

- 계약심사 의뢰 : 2018. 5월

- 공사 발주 : 2018. 6월

- 공사 계약 및 착공 : 2018. 7월

- 공사 시행 : 2018. 8. ~ 11월

- 공사 준공 : 2018. 12월

계약방법

- 제한경쟁입찰(지역제한)

- 입찰참가자격 : 건설산업기본법에 의한 상하수도공사업을 등록한 업체로서

입찰공고일 현제 주된 사업장이 경기도에 소재한 업체

예산조치

- 소요예산 : 600,000천원

- 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 동물사관리기능 및 야생동물종보존, 공원    안전시설 보수 및 정비, 시설비(서울대공원 지하구 잡용수 배관교체)

붙 임 : 1. 노후 시설물(소화,잡용수 배관) 교체계획 방침 1부. 끝.