문서번호	계측관리과-3662
결재일자	2018.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	계측관리과장		요금관리부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
박시현	김오열		조세연		代이상국		05/17 이창학
협 조
	기획예산과장					김형규
	재무회계과장					박병식
	요금제도과장					박진용
	전산정보과장					한병주
	배급수연구과장					김현돈
	소장					윤종민

검침불편 계량기 안전사고 예방을 위한

수도계량기 원격검침시스템 구축 계획

2018. 05.

상수도사업본부

(요금관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

검침불편 계량기 안전사고 예방을 위한

수도계량기 원격검침시스템 구축계획

검침환경 개선으로 검침불편 및 검침위험 수전을 해소하고 원격검침 빅데이터를 활용한 상수도 물 관리시스템 기반을 마련하고자 함.

Ⅰ		추진목적

○ 디지털계량기 성능 및 수도계량기 함 내의 사물인터넷 통신상태 테스트

○ 차도, 대형맨홀 등에 설치된 계량기 검침으로 인한 안전사고 방지

○ 원격검침 데이터를 활용한 급수구역 수돗물 사용패턴 분석

Ⅱ		사업개요

○ 사 업 명 : ‘18년 수도계량기 원격검침시스템 구축

○ 소요예산 : 12억원

- 디지털계량기 950백만원, 검침단말기 250백만원

○ 설치대상 : 검침불편 계량기 중 ‘18년 만기대상계량기

- 대상수량 : 1,900개소(15~150mm)

- 사업소별 설치대상

구 분	합 계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
수량(개소)	1,900	149	165	155	164	344	356	354	213

- 구경별 현황

합 계	15㎜	20㎜	25㎜	32㎜	40㎜	50㎜	80㎜	100㎜	150㎜
1,900	287	105	99	44	139	226	555	358	87

○ 원격검침시스템 계통도

Ⅲ		추진 방향

○ 방침수립 후 디지털계량기 조달구매 발주 우선 실시

○ ********************************

○ 계량기와 단말기는 분할납품이 가능토록 하고 단말기가 설치되면 바로 검침상태를 모니터링 하여 문제 발생시 조기에 조치

Ⅳ		세부 추진 계획

○ 디지털계량기 구매 설치

- 구매수량 : 1,900개(소형 900개, 대형 1000개)

- *************************

- 구매부서 : 수도자재관리센터

- 설    치 : 서울시설공단

○ 검침단말기 구매 설치

- 구매수량 : 1,900개(사물인터넷, 비표시형)

- *****************************

- *************************************

- 설    치 : 단말기 납품업체(계약상대자)에서 설치

○ 추진일정

구분	추진	5월			6월	7월			8월		9월	10월	11월	12월		설치기간
디지털계량기	발주 방침															6개월
	조달계약
	공장 제작
	현장 설치
검침단말기	발주 방침															4개월
	협상 계약
	공장 제작
	현장설치
	시 운 전

Ⅳ		행정사항

○ 원활한 사업추진을 위하여 사업소 등과 역할분담

- 설치 지역이 서울시 전역에 분포되어 있고, 수량이 많아(1,900개) 계측관리과에서 모든(품질․안전관리 등) 것을 추진하기에는 어려움이 있음.

- 이러한 문제점을 해결하기 위하여 각 기관별로 역할을 분담하여 시행 필요

○ 기관별 주요 역할 및 협조사항

추진부서	업무내용 및 협조사항	비고
요금관리부	▷ 원격검침시스템 계획수립 및 사업추진 ▷ 검침단말기 구매 및 설치 ▷ 홈페이지에서 검침값 조회기능 추가 및 요금관리시스템 연계 (전산정보과 협조) ▷ 요금부과 방법, 시기 등 결정(요금제도과)
서울물연구원 (배급수연구과)	▷ 디지털계량기 및 검침단말기 납품시 성능검사 ▷ 기술검토 및 운영 분석
수도사업소 (요금과, 현장민원과)	▷ 원격검침시스템 설치대상 안내문 발송 및 민원 안내 ▷ 원격검침시스템 설치대상 선정(변경, 추가 등) 업무 ▷ 원격검침시스템 설치상태(정상 작동여부 등) 확인 ▷ 원격검침시스템 유지관리(하자관리 등) 업무
수도자재관리센터	▷ 디지털 계량기 구매
서울시설공단	▷ 디지털 계량기 설치 ▷ 검침원 및 교체원에 대한 사용자 교육 지원

○ 기대효과

- 검침장애 및 위험 수전 원격검침으로 여성이 많은 검침원 안전사고 예방

- 옥내누수 조기발견, 이사정산 편리 등 부가서비스 추가 개발을 통한 수용가 만족도 향상 및 민원 감축 가능. 끝.