투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경 시행(퇴계로지하차도 정비사업(시민참여)-조명 교체공사)

우리 사업소에서 시행 중인 “퇴계로 지하차도 정비사업(시민참여)-조명 교체공사”의 공사물량 증감으로 설계변경을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 퇴계로 지하차도 정비사업(시민참여)-조명 교체공사

나. 도 급 자 : ******************

다. 변경사유 : 배수펌프 교체공사 교통통제 지원에 따른 교통정리 및

고재처리 물량 증가

○ 물량 증가 : 교통정리 1명 증 (8명 → 9명)

고재처리 600㎏ 증 (148㎏ → 748㎏)

다. 설계변경 금액                                         (단위: 원)

구 분		금 액(원)			비 고
		당초	변경	(증,감)
도급비	공 급 가 액	23,809,790	23,845,455	35,665
	부가가치세	2,380,979	2,384,545	3,566
	계	26,190,769	26,230,000	39,231

라.예산과목 : 일반회계, 도로시설관리, 도로시설물운영,

퇴계로지하차도정비(시민참여), 시설비

붙 임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 원가관리 설계변경 검증확인서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	안광순		기전과장	05/17 양영민
협조자	주무관	代최경아		관리단속과장	안근
시행	기전과-4559	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8396	/전송	02-300-8384	/		/	부분공개(5)