투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(밤고개로 확장 전기공사(2구간 공사비 반영) 관련 실정보고 승인)

1. 업무지시현장 : 밤고개로 확장 전기공사 주식회사 제일엔지니어링종합건축사사무소

2. 작 성 일 자 : 2018-05-17 15:05:54

3. 지 시 내 용

가. 밤고개로감 제2018-76호(2018.05.15)호 관련입니다.

나. 우리 본부에 검토 보고한 「밤고개로 확장 전기공사」 실정보고(2구간 공사비 추가 반영)에 대하여 설계변경 승인하오니 향후 설계변경 소자문회의 진행 및 공정관리에 만전을 기하여 주시길 바랍니다. 끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							김두환			열빛총괄과장					05/17 유병기
협조자
시행			설비부-6667									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8604						/전송			02-3708-8659					/	buckgolje@seoul.go.kr												/	대시민공개