위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방행정타운 1단계 토목공사 설계내역 변경 요청

1. 소방행정타운 건립에 협조해 주신 귀 본부에 감사를 드립니다.

2. 『서울 소방행정타운 건립공사(1단계)』가 준공을 앞두고 주요 기반시설의 도로와 주차장을 포장하기 위해 협의한 결과 설계내역을 다음과 같이 변경하고자 요청하니 필히 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 변경 요청사항

1) 특수구조단 : 서측 주차장 보도블럭을 아스콘 포장으로(특구단 훈련시 사용)

2) 생활관 동측 주차장 : 특구단 전면 주차장 쪽으로 이동(2단계 건물 신축)

3) 구.119공원 부지 : 보도블럭으로 12m×15m이상의 공개공지(주차장) 조성

4) 조경석으로 시공 : 본관동과 A계곡사이 좌측 사면(당초 조경석→실정보고

게비온으로 변경)을 기존 설계대로 조경석으로 시공

붙임  토목공사 설계변경 요청사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),동광건설(주) 현장소장, (주)건원엔지니어링 감리단장 귀하
★담당자	곽민규		단장	박정경		소방행정과장	05/17 김선영
협조자
시행	소방행정과-12127	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1393	/전송	02-3706-1329	/	119mk2@seoul.go.kr	/	대시민공개