문서번호	시설과-2968
결재일자	2018.5.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
전문관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
서동민	한상길	代이춘한	심상원		05/18 송천헌
협 조
	전략기획실장			유연호

2018년 토목시설물 유지보수공사(연간단가계약)

설계변경 시행 검토보고

2018. 5.

서 울 대 공 원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2018년 토목시설물 유지보수공사(연간단가계약)

설계변경 시행 검토보고

「2018년 토목시설물 유지보수공사(연간단가계약)」가 조기집행으로 계약 물량이 소진되었으나, 안전점검 지적사항 및 동물원 긴급 보수요청 등 추가 공사가 발생하여  설계변경 시행 및 예산확보 계획에 대하여 검토 보고.

Ⅰ		추진근거

□ 2018년 토목시설물 유지보수공사(연간단가계약)시행 (시설과-532, 2018.1.29)

※ 공사방침 [동물복지과-1095(‘18.3.26)], 작업지시 [시설과-1539(‘18.3.22), 시설과-1539(‘18.3.29)]

Ⅱ		공사개요

□  공 사 명 : 2018년 토목시설물 유지보수공사(연간단가계약)

□  공사기간 : *************************

□  ***********************

□  ***************************************

Ⅲ		현재까지 추진현황

□  2018. 3. 5 : 공사계약

□  2018. 3. 6 : 공사착공

□  2018. 3.22 : 제1차 작업지시 (광명로 미술관진입로 긴급정비 등 2개소 정비)

□  2018. 3.29 : 제2차 작업지시 (하마사 방사장 정비 등  3개소 시설물 정비)

Ⅳ		현안사항 및 조치방안

□ 제2아프리카관 안전시설 설치 및 하수시설 보수보강공사 추진과 대동물관 들소이전에 따른 환경개선공사 등 대규모 공사 실시로 인하여 계약물량이 조기 소진되었으며, 정기 안전점검시 지적사항 처리와 기타 동물사 유지관리부서에서 긴급 보수정비를 요구하고 있는바 낙찰차액을 활용 하여 사업예산 확보 후 설계변경 추진

Ⅴ		추진사항

○ 작업지시별 세부내역(2018년 3월 ~ 현재까지)                (단위:천원)

작업지시 번 호	위치	공사내용 (공사기간)	공사비	추진현황 (공정)
계			*****************
1-1	광명로 (미술관진입로)	- 아스콘 포장철거 : 50m × 1m = 50m2 - 아스콘 포장절단 : 60m × 2개소 = 120m - 터파기 : 50m × 1m × 1m = 50m3 - 보조기층공 : 50m × 1m / 100 = 0.5a · 공사기간 : ‘18. 3. 29～ 6. 30.	*****	완료 (‘18.4.20)
2-1	하마사	- 토사 정비 : 1,100m3 - 하수관 설치 : Ø300, L=24m - 빗물받이 설치 : 1개소 - 측구수로관설치 : 400mm × 400mm, 7개소 - 콘크리트포장 철거 : 24m × 1m = 24m2 - 레미콘타설 : 12m × 20m × 0.2m = 52m3 - 자연석해체 : 30m × 1m × 4m = 118m3 - 자연석이전 : 20m × 1m × 4m = 84m3 동물안전난간 : H:1.5m × W:1.5m, L=22m - 이동출입문 설치 : H:1.5m × W:3.0m, 1개소 · 공사기간 : ‘18. 3. 29～ 6. 30.	*******	완료 (90%)
2-2	바바리양 야외방사장	- 인력터파기 : 0.7m×0.7m×0.5m×73개소=28m3 - 기초타설 : 0.5m×0.5m×0.5m×79개소=10m3 - 기존휀스 철거 : H:2m × W:2m, L=220m - 동물탈출방지 휀스설치 : H:2.5m × W:2m, 구획칸 L=140m - 동물이동출입문 설치 : H:2m×W:4m, 2개소 H:2m×W:2m, 2개소 가림막휀스 : H:1.8m, L=40m · 공사기간 : ‘18. 3. 29～ 6. 30.	*******	완료 (90%)
2-3	대동물관	- 방사장 면고르기 : 3,190m2 - 레미콘타설 : 10m × 20m × 0.2m = 42m3 - 와이어메쉬 : 10m × 12m = 122m2 - 이동교량설치 : 5m × 5m, 1개소 - 교량난간설치 : H1.5m, L=24m - 강재출입문설치 : H:1.5m × W:4m, 2개소 - 자연석철거 및 재 설치 : 30m × 1.5m × 1m = 45m3 · 공사기간 : ‘18. 3. 29～ 6. 30.	*******	완료 (90%)

○ 추가 공사내역

위치	공사내용	계략공사비 (천원)	비고
늑대사 주변	- 하수도 설치 : L=60m - 터파기 : 60m x 1m x 1m = 60m3 - 빗물받이 설치 : 1개소 - 목재 안전난간 설치 : H:1.2m, L=150m	******

Ⅵ		설계변경 내용

(단위 : 원)

구 분	변경전	변경후	비 고
***	***********	***********	************
공사기간	2018. 3. 6 ~ 2018. 12. 31	2018. 3. 6 ~ 2018. 12. 31	변경없음

Ⅶ		예산확보 및 집행계획

□  예산현황                                            (단위:원)

***	***	****	****
************	***********	***********	**********

□  예산 집행계획

○ 공사비 증가분**********에 대하여는 토목시설물 유지보수공사낙찰차액을 활용 설계변경 계약 추진

○ 예산과목

서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 산림내이용시설 및 조경관리강화, 공원시설물유지보수 및 정비, 시설비

Ⅷ		향후계획

□  추가공사에 대하여 설계변경 시행 및 정산처리

※ 본 공사의 특성상 일상적인 유지보수사항(연간단가)으로서 기존 내역의 단순 물량 증·감 사항이므로 설계변경 자문회의 미개최.  끝.