문서번호	계약심사과-9053
결재일자	2018.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		심사총괄팀장	계약심사과장
임장경		류종기	05/21 안호
협 조

수상레포츠 통합센터 조성 기본설계 설계경제성(VE) 심사 실행계획

2018. 05.

계약심사과

수상레포츠 통합센터 조성 기본설계

설계경제성(VE) 심사 실행계획

한강사업본부(수상기획과)에서 시행하고 있는「수상레포츠 통합센터 기본설계」에 대해 심사전담팀을 구성하고, 설계경제성(VE) 실행 계획을 수립하여 추진하고자 함.

1		추진근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ ’18년 설계경제성(VE) 심사 운영계획(계약심사과-579, ’18.1.11)

2		심사개요

□ 추진부서 : 한강사업본부(수상기획과)

□ 용  역  명 : 수상레포츠 통합센터 조성-기본설계

□ 위    치 : 마포구 상암동 482-479

□ 사업내용 : 부유식 통합센터, 방파제 및 계류장

- 사업규모 : 부지면적 19,000㎡

□ 공 사 비 : 11,599백만원

□ 용역기간 : ’17.5. ~ ’18.11.

□ 설계공정률 : 95%(기본설계)

3		심사계획

□ 주요 심사내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 시행방법 : 전담팀 구성하여 심사

○ 전담팀 : 15명 내외

구 분	구 성 내 용	역 할
VE책임자 (3명)	▸외부 설계VE 전문가 3명 - (CVP) 이한록 대표 ㈜열린이앤씨 - 진행 및 보고서 작성 2명	설계경제성 심사 업무 진행 심사결과 종합 결과보고서 작성
VE담당관	▸ 임장경 주무관 계약심사과	심사 총괄 및 결과보고서 정리
팀 원 (3명)	▸ 외부 검토위원 3명 - (건축계획) 오치현 위원 마스터건축 - (항 만) 곽호성 위원 ㈜삼안 - (항 만) 임주택 위원 대영ENG	정보 분석, 검토, 아이디어 제안, 발표, 평가, 보고서 작성 등
발주부서 및 설계자	▸ 발주담당, 설계업체 설계자	사업설명 등 (설계내용, 현장설명 등)

□ 설계경제성 심사 검토회의 세부일정

일 시	내 용
’18.05.29(화) 14:00~17:00	- 사업설명 및 현장답사 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실 및 현장
’18.06.04(월) 10:00~17:00	- 1차 검토회의 : 아이디어 제시, 대안 구체화 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실
’18.06.05(화) 10:00~17:00	- 2차 검토회의 : 대안에 대한 가치평가 및 분석 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실
’18.06.11(월) 14:00~18:00	- 최종 검토회의 : 제안 채택회의 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실

□ 설계경제성 심사 시행절차

구분		추진 일정		검토 절차		업무 내용
계획수립		’18.05.15		설계경제성 심사 신청 (발주기관)		▸심사 신청서 접수
		’18.05.21		설계경제성 심사 계획수립 (VE 담당관)		▸추진일정, 시행방법 등 ▸설계VE팀 구성
설계경제성심사운영		’18.05.29 ~ ’18.06.11 (9일)		설계경제성 검토회의 (VE 전담팀)		▸자료 사전검토 ▸현장 확인 - 사업설명(설계자) ▸1,2차 검토회의 : 대안 구체화 - 아이디어제시, 결과이행 회의 ▸최종 검토회의 : 의사결정
		’18.06.12		제안 채택결과서 통보 (계약심사과 → 사업부서)		▸채택 검토회의 결과서 통보
		’18.06.12 ~ ’18.06.19 (5일)		심사 결과보고서 작성 (계약심사과)		▸설계경제성 최종 결과보고서 작성 및 검토
		’18.06.20		심사결과 통보 (계약심사과 → 사업부서)		▸심사결과 통보

4		소요예산

□ 소요예산 : 9,349천원

○ 외부전문가 수당 : 8,849천원

— 리더(기술사+보고서작성)   : 2,689천원(2,689천원 × 1명)

— 위원(기술사)                : 4,116천원(1,372천원 × 3명)

— 퍼실리테이터(중급기술자) : 2,044천원(1,022천원 × 2명)

※「설계경제성심사제도 운영현황 및 개선방안」(계약심사과-10559(’15.6.15))에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 500천원

□ 예산과목

○ 신청부서(한강사업본부)에서 위원수당 지급

○ 계약심사과에서 회의운영비 지급

5		향후계획

□ 설계경제성 심사결과서 통보  - - - - - - -  ’18.6.20

붙   임 : 1) 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2) 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.