	2018. 5. 23.(수) 석간용
	이 보도자료는 2018년 5월 23일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
								보도자료
담당부서 :	도시기반시설본부 토목부						토목부장	김영수	3708-2540
							교량건설과장	박용택	3708-2575
							담당자	권순환	3708-2577
	안전총괄본부 도로계획과						도로계획과장	하종현	2133-8060
							광역도로계획팀장	박영서	2133-8086
사진없음 □			사진있음 ■			매수 : 7매	담당자	윤갑진	2133-8088
위례신도시↔동부간선 연결램프 상판 설치…교통 통제 - 연결 램프 기초․교각 설치 4월말 완료, 6월부터 8월까지 강교 조립 상판 거치 - 차량통행 적은 심야시간(23~05시) 차단, 1회 10분 넘지 않게, ‘19.7월 완공 - 위례신도시, 송파구 장지동 빠르고 편리하게 동부간선도로 접근, 자곡IC 교통량 분산 기대 - 시, “강교 거치위한 차량 통제 양해와 협조 당부, 시민불편 최소화 노력할 것”

□ 서울시는 위례신도시(장지지하차도)에서 동부간선도로로 진출입 램프(ramp)를 설치하기 위한 상판 설치공사를 위해 새말교차로 주변 도로를 오는 6월부터 전면차단(총 12회/1회 10분간) 및 부분 통제한다고 밝혔다.

□ 도로 전면차단은 도심지역의 교통체증이 없도록 차량 통행이 적은 심야시간(23시 ~ 05시)에 6월 한 달 동안 실시되며, 시민 편의를 위해 한번  통제 시 10분을 넘기지 않을 계획이다.

□ 공사는 지난해 6월 착공하여 연결램프 교량 하부공사 및 기초·교각 21개소를 2018년 4월말까지 모두 설치‧완료하고, 5월말 현재 상부공사를 위한 강교(steel bridge)를 조립하고 있다.

□ 조립된 강교를 교각위로 거치하는 공종은 오는 8월까지 마무리되며, 콘크리트 타설과 교량 및 하부도로 정비 등이 끝나는 2019년 7월 완공을 목표로 공사 중이다.

□ 출․퇴근 시간이 되면 송파구 장지동 주변에서 도심으로 접근하기 위해 동부간선도로 자곡IC를 이용하는 차량이 늘어 자곡IC 부근의 상습 지․정체 현상이 발생한다. 특히, 위례신도시와 문정지구의 업무․상업시설 입주로 인해 교통량이 더욱 늘어나면서 자곡IC 이용차량의 대기행렬이 새말로, 헌릉로 등 주변도로까지 영향을 주고 있는 실정이다.

□ 장지지하차도↔동부간선도로 진출입 램프가 개통되면 송파구 장지동, 위례신도시에서 빠르고 편리하게 동부간선도로에 접근할 수 있게 되어 장거리 통행 여건이 한층 개선될 것으로 기대하고 있다. 또, 자곡IC로 집중되는 교통량이 분산되어 주변 상습 지‧정체 구간의 교통 혼잡이 완화될 것으로 기대된다.

□ 김학진 서울시 도시기반시설본부장은 “위례신도시와 연결은 물론 송파구 일대 교차로 대기시간이 단축되어 교통난 해소에 크게 도움이 될 것으로 기대된다”라며, “강교 조립․거치를 위한 차량 통제가 불가피한 만큼 시민들의 많은 양해와 협조를 당부 드린다. 시민불편이 최소화 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

※ 붙임 : 1. 사업개요 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.

별첨 #1

장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사

▢ 사업개요

○ 위    치 : 서울특별시 송파구 장지동 803-20 ~ 803-8 일원

○ 규    모

- 진입 연결로(Ramp-A) : 연장 638m, 폭 1차로(B=6.0m)

- 진출 연결로(Ramp-B) : 연장 455m, 폭 1차로(B=6.0m)

○ 공사기간 : 2017. 6. ~ 2019. 7.

○ 총사업비 : 364 억원

▢ 추진현황

○ '16. 03. 22. : ‘탄천변 동측도로 구조개선 사업’ 추진계획 수립

○ '16. 05. 23. : 사업착수

○ '17. 01. 19. : 도시계획시설(도로)결정 및 실시계획인가 고시

○ '17. 05. 31. : 설계준공

○ '17. 06. 13. : 착공

○ '18. 05.(현재) : 교량받침 설치 완료, 강교 제작 및 조립 중

▢ 향후 공정계획

○ '18. 06.     : 강교 지조립 실시 및 강교 거치 착수

○ '18. 08.     : 강교 거치 완료

○ '18. 11.     : 상부슬래브 콘크리트 타설 완료

○ '19. 05.     : 교량 및 하부도로 아스팔트 포장

○ '19. 07.     : 공사 준공

▢ 조감도 및 위치도

(조감도)

(위치도)

[위성사진]

별첨 #2

▢ 현장사진

진입램프 시작부(위례방향)

진입램프 및 동부간선도로 합류지점(수서방향)

진출램프 및 동부간선도로 분기지점(수서방향)

진출램프 종점부(위례방향)