투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)경호엔지니어링 종합건축사사무소(책임건설사업관리기술자 이태언)
(경유)
제목	실정보고 승인 통보[구 북부법조단지 환경개선공사]

1. 시생박(건설관리)-제158(2018. 4. 27), -제184(2018. 5. 18)호와 관련입니다.

2. 『구 북부법조단지 환경개선공사』 및 『시민생활사박물관 리모델링공사』와 관련하여 제출한 ‘기존 건축물(시민생활사박물관 본관동, 서울여성공예센터) 전면부 기초판과 신설 지하주차장 CIP 간섭에 따른 지하주차장 위치 변경’ 실정보고 건에 대하여 승인하오니, 공정관리 및 품질·안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

3.	아울러, 사회적경제클러스터센터의 실외기 이전·설치 비용의 계약금액 결정은 향후 설계변경 절차에 따라 금액을 확정하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	서경식		건축관리과장	차무흥		건축부장	05/23 代박범규
협조자	주무관	송옥의
시행	건축부-7035	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2635	/전송	3708-2659	/	lcidb@seoul.go.kr	/	대시민공개