문서번호	설비부-6946
결재일자	2018.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		열빛총괄과장	설비부장
박희정		유병기	05/24 代유병기
협조
	경리과장		代김용범

『잠원2 빗물펌프장 신설 전기공사』

설계변경(총차 5회, 3차 1회) 계획 보고

2018. 05.

『잠원2 빗물펌프장 신설 전기공사』

설계변경(총차 5회, 3차 1회) 설계변경 계획 보고

강남역 침수방지 관로개선 전기공사의 실정보고 승인사항에 대한 책임

건설사업관리기술자의 설계변경 보고임

1		공사 개요

○ 공 사 명 : 잠원2 빗물펌프장 신설 전기공사(3차)

○ 공사기간 : 13.03.26.~18.05.31.(3차, 17.11.01.~18.01.31.)

○ 도 급 비 : 957,370,000원(3차, 351,750,000원)

○ 공사내용 : 수문 및 가동보 설치, 강남역 역경사 관로 전기공사 1식

○ 도 급 자 : ㈜등전전기외 1

○ 공 정 율 : 99%(잠원2 빗물펌프장100%+강남역 역경사 개선 99%)

○ 감 리 사 : ㈜신명건설기술공사(책임건설사업관리기술자 배백열)

2		검토 근거

○ 감리사 잠원2감 2018-248호, 설계변경(총차 5회, 3차 1회)도서 검토결과 보고

○ 설비부-6369호(2018.05.14.), 승강기 CCTV 설치 등 실정보고에 대한 검토 보고

3		감리보고 내용

○ 보험료 실비 반영(감2,696,780원)

【단위: 원】

구 분	당초 금액	변경 금액	증감 사유
직접공사비	9,959,266	9,959,266	∘ 보험료 납부실비 반영 산재보험 감960,413원 고용보험 감205,061원 퇴직공제 감833,581원 이윤 등 감697,725원
제 경 비	4,901,443	2,449,825
공 급 가 액	14,860,709	12,409,091
부 가 세	1,486,071	1,240,909
합 계	16,346,780	13,650,000

○ 공사비 증감(원)

차 수	당 초	변 경	증·(감)	비고
3 차	351,750,000	365,400,000	증13,650,000
총 차	957,370,000	971,020,000	증13,650,000

4		조치의견

○ 상기 건설관리기술자의 보고내용 대로 건설총괄과에 변경계약의뢰하고자 함

붙임 1. 감리 공문 1부.

2. 변경계약내역서(총차, 3차) 각 1부.

3. 합의각서(총차, 3차) 각 1부.

4. 검증 확인서 1부.   끝.