문서번호	전시과-945
결재일자	2018.5.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	전시과장	학예연구부장		서울역사박물관장
나신균	정명아	박현욱		05/25 송인호
협 조	경영지원부장		송임봉
	시설과장		代정필승

- 기획전시실 전시환경 개선공사(2차수) -

현장실정 및 설계변경 보고

2018. 5.

서울역사박물관

(전  시  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

- 기획전시실 전시환경 개선공사(2차수) -

현장실정 및 설계변경 보고

기획전시실 전시환경 개선공사 추진 중 시공방법 변경 등에 대하여 아래와   같이 현장 실정을 보고드리고 설계변경을 추진하고자 함

1		공사 개요

□ 공사 개요

◦ 공 사 명 : 기획전시실 전시환경 개선공사(건축공사/전기공사/통신공사)

◦ 공사기간 : ’18. 3. 6. ~ ’18. 5. 30.(86일)

◦ 도 급 자 : 주식회사 나움(대표 류근원)/

(주)서웅(대표 전명자)/(주)신우콤(대표 곽영석)

◦ 공사(계약)금액 : 금455,849,155원/금85,550,870원/금69,470,000원

※. 설계사 : ㈜강희재건축사사무소(대표 강성원)

□ 추진 경과

◦ 철거 착수 : ’18. 3. 6.

◦ 현장 점검 : ’17. 11. 15.(관장, 시설과, 전시과)

기존 벽체 상태를 확인하여 양호한 경우 재활용

◦ 현장 점검 : ’18. 3. 8.(관장, 자문위원, 시설과, 전시과)

- 기존 바닥, 벽체 재활용 등에 대한 검토

◦ 현장 실정 보고 : ’18. 5. 4. (시공사 - 통신공사)

◦ 현장 실정 보고 : ’18. 5.18. (시공사 - 전기공사)

◦ 현장 실정 보고 : ’18. 5.24. (시공사 - 건축공사)

작 성 자	학예연구부장 : 박현욱 ☎ 724-0138 과장 : 정명아 ☎ 0145 담당 : 나신균 ☎ 0150

2		현장 실정 보고

□ 건축공사 주요 내용

◦ 바닥공사 시공방법 변경

- 기존 바닥을 유지하여 셀프레벨링 및 몰탈 미시공

- 바탕 처리(샌딩) 추가

- 투명 무광 에폭시라이닝 추가 시공

◦ 벽체공사 마감 변경

- 당초 합판 2P 철거후 석고보드 2P 마감을 기존 합판 상태가 양호하여 철거하지 않고 석고보드 1P로 변경

◦ 기타공사

- 기획전시실 B 전시 및 진열장 임시보관용 가설 칸막이 설치

(B실 내, 보존과학과 앞)

- 기획전시실 B 전시환경을 위해 A-B실 경계부에 경량철골 천정틀 설치

- 전시 가설물(2000년 특별전 ‘운현궁’) 철거비용 추가

□ 전기공사 주요 내용

◦ 전반조명 추가 설치

- 전시실 내 작업을 위한 전반조명 설치(56개, LED 30W)

◦ 커텐박스 조작함 이설

- 내부공간 재배치에 따라 커텐박스 조작함 이설(5개소)

□ 통신공사 주요 내용

◦ 천정 감지기 센서 철거 후 재설치

- 기존 감지기 철거 후 천정 고정을 위한 브라켓 제작하여 재설치

◦ 영상 송출용 네트워크 장비 규격 변경

- 기존 100Mbps급 2대를 10GBe급 1대로 규격 변경

□ 감독자 의견

◦ 바닥 및 벽체 마감 변경으로 인한 설계변경 및 기타 변경 사항의 반영은 현장여건 및 예산절감을 위해 적정한 것으로 사료됨

3		설계변경 내용

□ 법적 근거

○ (지방계약법 시행령 제74조) 설계변경으로 인한 공사량 증감시 계약금액 조정

○ (공사계약 일반조건 제 7절) 설계서 누락·오류, 현장 상태 상이, 발주기관의

설계서 변경 필요 인정시 설계 변경

□ 변경 내용

○ 공사금액 : 건축 - 감)14,751,550원 / 전기 - 증)7,399,130원 /

통신 - 증)6,602,590원

(단위: 원)

구분	당 초	변 경	증 감
건축공사	455,849,550	441,186,000	감) 14,751,550
전기공사	85,550,870	92,950,000	증) 7,399,130
통신공사	69,470,000	76,072,590	증) 6,602,590

○ 공사기간 : 변경 없음

□ 세부 증감내역

(금액단위: 천원)

구 분		주요 변경 품명 및 규격			직접공사비 증감(△)액		설계변경 사유
		당 초	변경후
건축 공사	공통 가설	먹메김	먹메김 불필요		당초	3,863	먹메김 불필요
					변경	-1,743
					증(△)감	△5,606
	벽체 공사	기존 합판 2P 철거후 석고보드 2P 마감	기존 합판 재활용 및 석고보드 1P 추가		당초	12,490	기존 자재 재활용
					변경	10,323
					증(△)감	△2,167
	바닥 공사	모르타르 기계타설 및 마감	에폭시 라이닝만 제거		당초	4,238	하부 모르타르 마감 유지
					변경	0
					증(△)감	△4,238
		셀프레벨링 시행	셀프레벨링 미시행		당초	10,993	에폭시 라이닝만 철거하여 기존 바닥 마감 유지
					변경	0
					증(△)감	△10,993
		-	바탕 처리 추가		당초	0	바닥 시공 방법 변경에 따라 바닥 레벨 경사가 심한 구간에 한해 샌딩 조치
					변경	4,415
					증(△)감	4,415
		-	투광무광 에폭시라이닝 시행		당초	0	반광투명 에폭시 마감후 무광 투명 에폭시 마감 시행
					변경	13,548
					증(△)감	13,548
구 분		주요 변경 품명 및 규격			직접공사비 증감(△)액		설계변경 사유
		당 초	변경후
건축 공사	기타 공사	-	무빙월 판넬마감 추가		당초	0	무빙월 마감부 누락분 추가
					변경	4,689
					증(△)감	△4,689
		-	가설 칸막이 설치		당초	0	기획전시실 B실 전시 및 진열장 보관을 위한 가설 칸막이 설치
					변경	8,946
					증(△)감	8,946
		-	경량철골 천정틀 설치		당초	0	B실 전시를 위해 분진 및 소음차단용 천정틀 설치
					변경	1,219
					증(△)감	1,219
	철거 및 정리	-	전시 가설물 철거비용 추가		당초	0	‘운현궁’ 전시 가설물 철거비용 추가
					변경	7,510
					증(△)감	7,510
		모르타르, 회반죽 등 철거	에폭시 라이닝만 철거		당초	10,105	바닥 시공방법 변경
					변경	0
					증(△)감	△10,105
	직접 공사비 소계				당초	44,576
					변경	50,554
					증(△)감	5,978
전기 공사	전반 조명	-	전반조명 추가 설치 (총 56개)		당초	43,182	전시실 내 전반조명 필요
					변경	52,243
					증(△)감	9,061
	분전반	1면 교체	삭제		당초	14,181	박물관 전기설비 개량사업과 물량 중복되어 감액
					변경	9,754
					증(△)감	△4,426
	커텐 박스	-	커텐박스 철거 후 재설치		당초	0	내부공간 재배치
					변경	3,816
					증(△)감	3,816
	직접 공사비 소계				당초	60,726
					변경	69,178
					증(△)감	8,452
통신 공사	감지기 센서	-	감지기 센서 철거후 재설치 (총 29개소)		당초	0	설계내역 누락분 반영
					변경	5,749
					증(△)감	5,794
	네트워크 장비	100Mbps, 2대	규격 및 수량 변경 (10GBe, 1대)	당초		2,541	관리부서 요청
				변경		3,394
				증(△)감		853
	직접 공사비 소계			당초		2,541
				변경		9,143
				증(△)감		6,602

□ 법정경비 정산내역

○ 건축공사

(금액단위: 원)

구 분	법정 경비 금액		최종 정산 내역
	당 초	변경후	증감액	정산후
산재보험료	4,167,234	4,550,086	382,852	4,550,086
고용보험료	929,614	1,015,019	85,405	1,015,019
건강보험료	2,840,007	0	△2,840,007	-
노인장기요양보험료	186,020	0	△186,020	-
연금보험료	4,159,776	0	△4,159,776	-
퇴직공제부금	3,362,097	0	△3,362,097	-
산업안전보건관리비	12,307,880	5,732,500	△6,575,380	5,732,500
환경보전비	955,514	973,289	17,775	973,289

○ 전기공사

(금액단위: 원)

구 분	법정 경비 금액		최종 정산 내역
	당 초	변경후	증감액	정산후
산재보험료	2,156,563	2,478,039	321,476	2,478,039
고용보험료	493,739	567,340	73,601	567,340
건강보험료	899,980	0	△899,980	-
연금보험료	1,318,206	0	△1,318,206	-
노인장기요양보험료	58,949	0	△58,949	-
퇴직공제부금	1,217,620	0	△1,217,620	-
산업안전보건관리비	1,196,302	1,362,814	166,512	1,362,814

○ 통신공사

(금액단위: 원)

구 분	법정 경비 금액		최종 정산 내역
	당 초	변경후	증감액	정산후
산재보험료	1,676,417	1,816,142	139,752	1,816,142
고용보험료	373,970	405,139	31,169	405,139
건강보험료	681,666	681,666	-	681,666
연금보험료	998,440	998,440	-	998,440
노인장기요양보험료	44,649	44,649	-	44,649
퇴직공제부금	922,254	999,121	76,867	999,121
산업안전보건관리비	982,813	982,813	-	982,813
기타경비	2,638,802	2,904,188	265,386	2,904,188

4		추진 계획

□ 추진 일정

○ 2018. 5. 25. : 설계변경, 변경계약

○ 2018. 5. 30. : 2차공사 완료 및 검수

붙임. 1. 현장실정보고 각1부

2. 설계변경 내역서 각1부.  끝.