	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	내곡지구 지구계획 변경 등에 따른 도로 추가 보완공사 검토

내곡지구 지구계획 변경 등에 따른 도로 추가 보완공사 시행을 다음과 같이 검토 보고합니다.

가. 공사개요

○ 공 사 명 : 내곡 보금자리주택지구 조성공사

○ 위    치 : 서울시 서초구 내곡동, 신원동, 염곡동 일원

○ 공사기간 : 2011.11.30. ~ 2018.05.31.

○ 도 급 자 : 큰빛종합건설(주), 이수건설(주)

○ 도 급 비 : 41,185백만원

나. 관련근거

○ 2017.08.30. : 서울내곡 공공주택지구 지구계획변경 승인고시 알림(토목기술부-3266호)

1) 지구외 필지(신원동 343번지) 진입로 개설을 위하여 연결녹지 일부를 공공공지로 변경(횡단보도 위치 변경)

2) 내곡지구와 청룡마을간 보행자도로 개설을 위한 토지이용계획(단독주택5, 공공공지5, 보행자도로) 변경

3) 유치원3부지 진출입구 및 공공공지 위치변경(유치원과 1BL사이 교차로 계획 변경)

○ 2017.09.04. : 도로 및 도로시설물 인수인계에 따른 현장점검 결과 송부(서초구 도로과-22077호)

○ 2017.09.22. : 경찰서 교통안전시설심의 결과 통보(하달)(서울지방경찰청 교통관리과-27266호)

○ 2018.02.06. : 내곡지구 택지 도로시설물 보,차도 복구공사 협조 요청(전기공사부-511호)

다. 검토내용

○ 내곡공공주택지구 지구계획 변경에 따른 도로 관련 시설물의 추가 및 변경 설치 공사(교통규제 반영, 전기공사부 택지 전기시설물 설치 후 도로 복구 협조 포함) 시행함이 타당하다고 판단되며,

○ 서초구 도로과의 추가 시설물(도로 반사경, U형 볼라드 등) 설치 요청 사항은 입주민 민원을 반영한 사항으로 원활한 업무 협조를 위해 우리공사에서 시행함이 타당하다고 판단됨.

○ 공사 주요 물량 검토

품 명		단위	당초	변경	증감		비고
토공	아스팔트포장깨기	㎥	-	31	증)	31
	아스팔트절삭	㎡	-	192	증)	192
	보도블럭철거	㎡	-	3,714	증)	3,714
포장공	표층/포설및다짐	㎡	-	340	증)	340
	보도용블럭포장(투수블럭)	㎡	-	4,065	증)	4,065
	콘크리트포장 / 포설	㎡	-	407	증)	407
부대공	도로반사경 설치	EA	-	5	증)	5
	U형볼라드	EA	-	5	증)	5

○ 단가 검토

- 신규공종 : 협의낙찰율 적용[100+79.99]/2=89.99%]

※ 계약심사부-1449호(2018.05.18)로 기술심사 완료(별도의견없음)

○ 공사비 검토

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감		비고
직접공사비	-	104,777	증)	104,777
제잡비 및 부가세	-	36,540	증)	36,540
도 급 액	-	141,317	증)	141,317
지급자재	-	71,017	감)	71,017
총공사비	-	212,334	증)	212,334

라. 조치계획

○ 상기 검토내용에 대하여 설계변경심사위원회 심의 의결 결과에 따라 추후 설계 변경시 정산 ․ 반영.

붙임  1. 2018.05.17 (실정보고)토지이용계획 변경 따른추가공사 외(수정)

2. 부의안 및 설명서-내곡지구 내 하수시설물 인수인계 관련 추가 및 보완공사 검토 외 2건

3. 의결안(제2018-4회)-내곡지구 내 하수시설물 인수인계 관련 추가 및 보완공사 검토 외 2건.  끝.

부 원						도시조성부장				도시공간조성처장			도시공간사업본부장		05/28
		설재훈						박영욱			황의필			김소겸
협조자
일 상 감 사	행정감사부장		갈창훈				감사일자 :	2018/05/28		감사일련번호: No.	498		감사의견여부 :	의견없음

시행			도시조성부-2592				(2018.05.28)			접수				()
방침번호
우	135-988			서울 강남구 개포로 621								/
전화		02)3410-7641			전송	02)3410-7619		/	wogns79@i-sh.co.kr					/	공개