“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	지역경제과-22362		주무관		신성장동력팀장	지역경제과장		기획경제국장		부구청장
			김재균		김경찬	이수진		옥종식		전결 05/30 주윤중
등록일자	2018.5.29.
결재일자	2018.5.30.
			협조자
공개구분	부분공개(7)
				계약팀장			박성희

- 영동전통시장 안내표지판 보수공사 - 설계변경 시행계획

2018.  5.   .

	강 남 구
(		지역경제과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 • 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 보수공사 관련 시장상인회 의견 적극 반영에 따른 설계 변경
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 산출 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 지역주민, 상권 방문고객 및 상권 상인
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	해당사항 없음

- 영동전통시장 안내표지판 보수공사 - 설계변경 시행계획

영동전통시장 안내표지판 보수공사 관련하여 아래와 같이 설계변경하고자 함

Ⅰ		공사개요

□ 사업명 : 영동전통시장 안내표지판 보수공사

□ 공사위치 : 영동전통시장 진출입로 2개소

□ 공사기간 : 2018.5.29. ~30.(총 2일)

□ 공사내용 : 안내표지판 시인성 향상을 위한 LED BAR 설치

□ 공사업체 : ****************

□ 계약방법 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제25조 제1항 제4호에 의한 수의계약(물품 제작자 직접 정비)

□ 사업비 : 금3,841,000원

Ⅱ		설계변경

□ 변경사유

- 영동전통시장 상인회의 의견 적극 반영

- 가용 예산 범위 내에서 최대의 효용을 추구하기 위한 시공 방식 변경

□ 변경 내용

공사내용	당초	변경
LED BAR 설치	안내표지판 내부에 추가로 LED BAR 설치	안내표지판 외부 모서리를 따라 LED BAR 설치

□ 공사비 증감 현황

(단위 : 원)

공사명	업체명	당초	변경	증감
영동전통시장 안내표지판 보수공사	㈜세인환경디자인	3,841,000	3,200,000	감)641,000

※세부내역은 붙임 파일 참조

Ⅲ		조치의견

□ 상기 보고 내용과 같이 설계변경을 시행코자 함.

붙임  설계변경내역서 1부.  끝.