문서번호	소상공인지원과-7013
결재일자	2018.5.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		소상공인지원팀장	소상공인지원과장
심순보		강경훈	05/31 이성은
협조

동작 액션미디어거리 조성 사업계획 변경신청 검토보고

2018. 5.

경제진흥본부

(소상공인지원과)

동작 액션미디어거리 조성 사업계획 변경신청 검토보고

2018년 지역특화 골목상권 활성화 사업(동작 액션미디어 거리) 관련 자치구 사업계획 변경 신청 승인여부에 대해 검토한 결과를 보고드림

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2017. 8. ~ 2018. 12.

○ 위    치 : 동작구 사당로 301-1 ∼ 동작대로 27길 15

○ 사업내용

- 무분별하게 난립된 가로간판, 돌출간판을 통일된 디자인의 경관조명 겸용 미디어 간판으로 일제 정비

- 각 미디어 간판 유선으로 연결, 컬러 변화를 거리 전체적으로 연동해 표현 (생동적인 음악과 함께 화려한 움직임 연출)

○ 사 업 비 : 4억원 (시비 150백만원, 구비 250백만원)

□ 예산변경 신청내용

구 분	당 초		변 경		변경사유
	세부사업내용	금액(천원)	세부사업내용	금액(천원)
계		400,000		400,000
액션 미디어 거리	소계	370,000	소계	370,000	-
	돌출간판 미디어간판 교체	120,000	돌출간판 미디어간판 교체	120,000
	가로간판 미디어간판 교체	250,000	가로간판 미디어간판 교체	250,000
상징조형물 설치	소계	30,000	소계	30,000	디자인간판 연동 및 연출 관련 전문가 자문 필요
	액션미디어거리 홍보 주민참여 이벤트 행사	20,000	액션미디어거리 조성 디자인 기획용역	20,000
	거리 고보조명 시공	10,000	거리 고보조명 시공	10,000

□ 검토의견

○ 액션 미디어거리 조성사업은 골목상권 전 간판(가로간판 100개소, 돌출간판 100개소)을 연동, 역동적인 빛과 음악 연출로 즐길 거리를 제공해 주는 컨셉의 사업으로

○ 빛·조명 연출에 대한 전문가의 디자인 기획 및 운영관리에 대한 기술적 솔루션 지원이 필요하므로, 외부 전문업체에 용역을 통해 추진하도록 사업을 변경하는 것이 합리적이라고 사료됨

□ 향후일정

○ 예산변경 승인통보                 :  ’18. 5월 말

○ 사업추진 및 위탁운영비 집행       :  ~ ’18. 12월

○ 위탁운영비 정산                   :  ’19. 1월 중

붙임 : 자치구 예산 변경신청서 1부.  끝.