투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	*****************
(경유)
제목	준공검사원 제출에 대한 보완 촉구

1. ******************************

2. 귀사가 우리시와 계약체결하여 시공중인 ******************의 준공검사원 제출과 관련하여 준공검사를 시행한 바, 전체적으로 공사를 완성하지 않고 준공검사원을 제출하여 공사 이행여부를 확인하기조차 어려움이 있는 상황으로 공사를 완성하고 시정내용(전·중·후 사진 포함)을 2018.05.31.까지 제출토록 하였으나, 현재까지 공사가 완성되지않고 시정사항이 제출되지 않아 촉구하오니 2018.06.04.까지 공사를 완성하고 시정결과를 제출하시기 바랍니다.

3. 아울러, 기통보한 바와 같이 공사를 완성하지 아니한 때에는 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 의거 귀사와 체결한 계약서에서 정한 지연배상금률에 따라 지연배상금이 부과됨을 재차 알려드립니다.

■ 지적사항

- ************

- ********************* 등

붙임  공사현황 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	이일순		총무과장	06/01 박병현
협조자
시행	총무과-7435	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5,6)