문서번호	건축부-7615
결재일자	2018.6.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축관리과장	건축부장
조문석		차무흥	06/04 代박범규
협조	주무관		송옥의
	주무관		서경식

『구 북부법조단지 환경개선공사』

축중기 설치 실정보고 승인

2018. 6.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『구 북부법조단지 환경개선공사』

축중기 설치 실정보고 승인

『구 북부법조단지 환경개선공사』사토반출과 관련, 과적행위 방지를 위해 축중기 설치(사토량 10,000㎥ 이상인 건설현장)를 반영하고자 보고드림

※ 근거 : 시생박(건설관리) 제 199(’18. 05. 30)호 : 축중기 설치 실정보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구 북부법조단지 환경개선공사

○ 규    모 : 지하 1층 증축, 총사업면적 8,254㎡

○ 공사기간 : ’18.3.~’19.4.

○ 공 사 비 : 53억원

○ 시 공 사 : 지앤지건설(주)

○ 감 리 단 : (주)경호엔지니어링

□ 책임감리단 실정보고 내용

○ 변경사유

- 사토 운반량이 10,000㎥이상인 건설현장에서는 의무적으로 축중기 설치[국토교통부 훈령 제757호, 건설현장 축중기 설치 지침 제 7조(축중기 설치 비용 반영 방법)]

- 당현장 사토 운반량이 11,281㎥으로 축중기 설치가 필요하나 누락됨.

○ 변경내용

구 분	변경 전	변경 후
토공사	-	축중기 설치(15Ton, 이동식)

**************

*********

**********************************************************************************************************************************************************************************

*************************

□ 검토의견

○ 당현장 사토반출시 과적방지를 위한 축중기 설치 사용은 의무사항임.

○ 품셈적용에 따른 축중기 차량 반출 횟수는 전체 중 30%(260회)만 적용 운영함이 적당하다고 사료됨.

□ 조치의견

○ 책임건설사업감리단로부터 제출된『구 북부법조단지 환경개선공사』“축중기 설치 실정보고” 승인 통보

○ 향후 설계변경 절차를 거쳐 최종 공사금액을 확정코자 함

***********************************************

붙임 : 축중기 설치 실정보고  1부.  끝.