문서번호	도시철도토목부-6781
결재일자	2018.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
장대성		호경수	06/05 代윤방식
협조
	주무관		정삼기

『서울 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사 』

936정거장 출입구#3 변경 관련 실정보고 검토

2018. 6.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『서울 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사 』

936정거장 출입구#3 변경 관련 실정보고 검토

우리시의「고품격 특화정거장 시범추진」방침에 의거 936정거장 출입구#3 토목 구조물이 변경됨에 따라, 책임감리원으로부터 실정보고가 있어 이에 대해 검토보고 드림.

※ 관련문서 : 유신감(921)18-434호(2018.06.04.)「936정거장 출입구#3 토목구조물 구조변경 실정보고」

□ 공사 개요

❍ 공 사 명 : 서울 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사

❍ 공사구간 : 송파구 방이동 올림픽공원 남4문 ～ 5호선 올림픽공원역

❍ 공사규모 : 총 연장 1,742m (정거장 2개소 334m, 본선 1,408m)

❍ 계약금액 : 177,793백만원

❍ 계약기간 : 2009.12.31. ~ 2018.12.31.

❍ 시 공 사 : ㈜포스코건설 - 55%, 코오롱글로벌(주) - 45%

❍ 감 리 사 : ㈜유신

□ 추진 경위

❍ ‘16.08.16 : 935정거장 고품격 특화 정거장 시범추진 방침시행 [도시철도건축부-5934호(2016.08.11.)]

❍ ‘16.09.28 : 9호선 특화 정거장 관련 부시장 보고

❍ ‘16.10.01 : 특화 정거장 실시설계 착수

❍ ‘17.01.25 : 921공구 특화 정거장 실시설계 설계 성과품 납품

❍ ‘17.03.03 : 936정거장 출입구#3 케노피 디자인 변경

❍ ‘17.04.28 : 921공구 특화 정거장 디자인 승인 통보(본부→감리단)

□ 실정보고 내용

❍ 변경 현황

❍ 변경사유

- 921공구 디자인 특화설계 추진 중 936정거장 출입구#3 캐노피부분에 대한 디자인 변경으로 인하여 토목 구조물 변경 필요

❍ 개략 공사비 현황

(단위 : 백만원, 부가세제외)

구 분		단위	당 초(ⓛ)		변 경(②)		증 감(②-①)		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
구조물	콘크리트타설외	㎥	75	9	205	23	130	14	증)
	철근조립	ton	321	90	392	116	71	26	증)
부대공	운반비 외	식	1	3	1	4	1	1	증)
	레미콘	㎥	75	5	208	15	133	10	증)
	철근	ton	337	158	411	201	74	43	증)
직접공사비 계		식	1	265	1	359	1	94	증)
제 경 비		식	1	119	1	146	1	27	증)
공사비계		식	1	384	1	505	1	121	증)

□ 책임감리원 검토의견

❍ 본부장 방침(도시철건축부-5934)에 의거하여 9호선 3단계 921공구 고품격 특화정거장이 시범추진에 따라 936정거장 출입구#3이 특화 구역에 반영되어 도시철도건축부의 최종 승인된 설계도서에 대하여 검토결과 936정거장 출입구#3 캐노피 형태 변경으로 토목구조물의 구조보강이 필요하여 변경 시공코자 하며,

❍ 시공사에서는 936정거장 출입구#3 캐노피 특화화로 변경되는 토목구조물의 구조보강 변경에 대해 공사비가 증액(증 121백만원)되나 입찰안내서 관련규정 검토결과와 같이 전체공사 준공전 증감되는 금액을 합산하여 계약금액을 조정하되, 추가공사 금액의 요청이나 계약금액 증액 없이 정산 조치코자 요청하여 검토결과 타당하다고 사료됨.

□ 보고자 의견

❍ 상기 보고 내용과 같이 936정거장 출입구#3 토목구조물 변경에 대한 실정보고 건에 대해 책임감리원 의견과 같이 승인하며,

- 계약금액 증액 없이 정산 조치

❍ 당초 사업계획과 비교하여 변경되는 사항에 대해서는 사업계획 변경 및 보상(환매 포함)절차 추진.

□ 행정 사항

❍ 936정거장 출입구#3 토목구조물 변경 실정보고 승인 통보(본부→감리단)

❍ 사업계획 변경 및 보상절차 추진(도철토목부↔도철계획부, 송파구청)

붙임 : 1) 936정거장 출입구#3 토목구조물 변경 실정보고 1부.

2) 고품격 특화정거장 시범추진 방침(도시철도건축부) 1부.  끝.