하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	설계변경심사위원회 개최결과 보고 [항동지구 4단지, 도시형 1,2]

1. 우리공사에서 시행중인 「항동 공공주택지구 4단지 아파트 및 도시형생활주택 1,2단지 건설공사」 토목공종과 관련하여 설계변경심사위원회 개최결과를 아래와 같이 보고합니다.

-  아  래  -

가. 공사개요

- 공 사 명 : 항동 공공주택지구 4단지 아파트 및 도시형생활주택 1,2단지 건설공사

- 도 급 자 : 동부건설㈜ 외 1개사

- CM기술자 : ㈜희림종합건축사사무소

- 공사기간 : 2016.09.19.~2019.04.12.

- 도 급 비 : 64,799백만원 (토목 : 8,389백만원)

나. 설계변경심사위원회 개최결과 (붙임 참조)

- 건    명 : 2단계 설계 및 현장여건 반영에 따른 구조물공사 설계변경

- 일    시 : 2018.06.01.(금)

- 개최결과 : 원안가결

- 소요예산 : 증)57,006천원 (제잡비 포함)

다. 조치계획

- 상기 설계변경심사위원회 의결(안)에 대하여 도급자로 하여금 우선 시행토록 하고 추후 설계변경 시 정산 반영.

붙임  1. 부의안 및 설명서

2. 의결안.  끝.

부 원						부원				토목조경공사부장			건설사업처장		06/04
		정승길						백용철			정용			김동일
협조자

시행			토목조경공사부-2025				(2018.06.04)			접수				()
방침번호
우	135-988			서울특별시 강남구 개포로 621 SH공사 토목조경공사부								/	http://www.i-sh.co.kr
전화		02-3410-8950			전송	02-3410-8996		/	jeongsk329@i-sh.co.kr					/	비공개(6)